ТИПОВАЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА (ТТК)

УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ОДЕРНОВКОЙ СПЛОШНЫМ ПОКРОВОМ 

I. Область применения 

     Технологическая карта разработана на укрепление одерновкой сплошным покровом откосов насыпей высотой до 3 м с крутизной откоса не более 1:1,5. Грунт супесчаный.
     
     Одерновка откосов сплошным покровом применяется для укрепления откосов насыпей, периодически подтопляемых на короткое время, при высоте волн не более 0,2 м и скорости течения воды до 1 м/с.
     
     Одерновку сплошным покровом следует применять при наличии дерна в непосредственной близости от места производства работ.
     
     В состав работ входят:
     
     - нарезка дерна дернорезом-дерноукладчиком;
     
     - перемещение и разравнивание растительного грунта на откосе;
     
     - укладка дерновых лент на откосе;
     
     - закрепление дерна.

II. Организация и технология производства работ 

     До начала производства работ по укреплению откосов необходимо проверить готовность земляного полотна и его соответствие требованиям СНиП "Автомобильные дороги" и СНиП "Земляные сооружения, основания и фундаменты".
     
     Для одерновки следует применять свеженарезанный луговой дерн из мест с плотным травяным покровом. Перед нарезкой дерна трава должна быть скошена.
     
     Применение болотного и поросшего мхом дерна не допускается. Качество дерна выше, если он содержит клевер и злаковые растения (пырей, мятлик).
     
     Нарезанный дерн хранить более трех дней не рекомендуется. При необходимости хранения дерн следует складировать в штабели травой к траве, корнями к корням. При жаркой сухой погоде дернины необходимо поливать.
     
     Работы по одерновке откосов сплошным покровом ведутся комплексной механизированной бригадой на двух захватках площадью 200 м каждая (рис.1).

          

Рис.1. Схема организации и производства работ

Операции, выполняемые на захватках:

1-я захватка - выгрузка растительного грунта на откос автосамосвалом ///; разравнивание грунта на откосе автогрейдером /;

2-я захватка - укладка дернин на откос дерноукладчиком //; закрепление дернин спицами.

1, 2 -последовательность проходов автогрейдера.

Стрелкой указано направление потока.

     
     Численность комплексной механизированной бригады 5 чел.:
     
     Машинист дернореза-дерноукладчика 5 разр. - 1;
     
     Машинист автогрейдера 6 разр. - 1;
     
     Дорожный рабочий 2 разр. - 2;
     
     Дорожный рабочий 3 разр. -1.
     
     На первой захватке выполняются следующие технологические операции:
     
     - нарезка дерна дернорезом-дерноукладчиком;
     
     - перемещение грунта на откос и его разравнивание автогрейдером.
     
     Дернорез-дерноукладчик представляет собой сменное оборудование к экскаватору. Оборудование состоит из двух частей, одна из которых предназначена для нарезки полос дерна, другая - для разрезания полос на отдельные карты и укладки их в транспортные средства или на откосы. Производительность дернореза при нарезке дерна 3500 м/ч, рабочая скорость 4 км/ч.
     
     Срезать дерн следует на глубину главной корневой системы, но не менее чем на 6 см. Для лучшего перекрытия швов дернины нарезают со скосом.
     
     При одерновке сплошным покровом используются ленты дерна шириной 0,25 и длиной 2-3 м или штучные дернины (карты) шириной 0,2-0,3 и длиной 0,3-0,5 м.
     
     Ленты дерна разрезают на отдельные карты с помощью ножа, установленного на раме захвата дернореза, а подъем и укладка карт производятся с помощью шипов захвата, также находящихся на раме захвата.
     
     Перед укладкой дерна откосы должны быть покрыты растительным грунтом слоем толщиной не менее 6 см.
     
     Растительный грунт доставляется на место работ автомобилями-самосвалами. Выгружать грунт следует так, чтобы основная его часть попадала сразу на откос.
     
     Разгрузку очередного автомобиля-самосвала следует производить на расстоянии  от места разгрузки предыдущего:

,

     где q -объем грунта в кузове автомобиля-самосвала; b- длина откоса; h -толщина слоя растительного грунта.
     
     Растительный грунт разравнивают автогрейдером ДЗ-31-1, оборудованным откосником, за два прохода начиная с верхней части откоса. Автогрейдер движется вдоль подошвы откоса.
     
     На второй захватке выполняются следующие технологические операции:
     
     - укладка дерна на откос;
     
     - закрепление дерна спицами.
     
     Дернины укладывают снизу от подошвы откоса сразу по всей длине захватки горизонтальными рядами. Возле бровки откоса вдоль земляного полотна укладывают дерновые ленты.
     
     Подошву откоса укрепляют дерновыми лентами в три ряда с перевязкой швов. Ленты нижнего ряда должны врезаться в грунт основания на 10 см. Их заделывают местным грунтом заподлицо с поверхностью земли.
     
     Уложенный дерн прикрепляют к поверхности откоса спицами. Их забивают на расстоянии 5-6 см от края дернины по ее углам, а также вдоль краев на расстоянии не более 40 см друг от друга.
     
     Спицы заготавливают дорожные рабочие 2 разр. Процесс заготовки включает:
     
     - выбор материала (ивовый хворост, обрезки бревен, досок и т. д.);
     
     - разметку его по длине 25-30 см;
     
     - распиливание материала согласно разметке;
     
     - раскалывание полученных заготовок на спицы сечением 25х25 мм;
     
     - заострение спиц.
     
     Калькуляция трудовых затрат на укрепление 1000 м откосов насыпи одерновкой сплошным покровом приведена в табл.1.     

Таблица 1 

	

  

	

На един. измерения 
	
На объем 

Обоснование 
	
Работа 
	
Состав звена 
	
Единица измерения 
	
Объем 
	
Норма времени, чел. - ч, (маш. - ч)
	
Расценка р.- к.
	
Трудоемкость,  чел. - ч 
(маш. - ч)
	
Прямая заработная плата, р. - к.

По расчету 
	
Нарезка дерна дернорезом- дерноукладчиком 
	
Машинист
5 разр. - 1 
	
1000 м 
	
1,11 
	
0,3 (0,3)
	
0-27 
	
0,3 (0,3)
	
0-27 

Расц.= (0-91) 0,3=0-27 

Е2-1-39. п.2в 
	
Разравнивание растительного грунта слоем 6 см на поверхности откоса автогрейдером ДЗ-31-1, оборудованным откосником 
	
Машинист
6 разр. - 1 
	
1000 м 
	
1,0 
	
0,38 (0,38)
	
0-40,3 
	
0,38 (0,38)
	
0-41 

По расчету 
	
Заготовка спиц 
	
Дорожный рабочий
2 разр. - 1 
	
1000 спиц 
	
2,8 
	
2,11 (-)
	
1-48 
	
5,91 (-)
	
4-14 

По расчету 
	
Укладка дерновых карт на откосы дерноукладчиком 
	
Машинист
5 разр. - 1 
	
100 м 
	
11,1 
	
3,07 (3,07)
	
2-79,4 
	
34,08 (34,08)
	
31-00 

Расц.= (0-91) 3,07=2-79,4 

По расчету 
	
Обрезка дерна по шнуру, закрепление спицами, уборка обрезков дерна 
	
Дорожные рабочие:
2 разр.- 2
3 разр - 1 
	
100 м 
	
36 
	
3,0 (-)
	
1-98 
	
108 (-)
	
71-28 

Расц.= (0-64) 2+0,70=1-98 

Итого 

	

  

	

148,67 (34,76)
	
107-10 

     
     При операционном контроле качества работ по укреплению откосов насыпи земляного полотна одерновкой сплошным покровом следует проверять:
     
     - расстояние между кучами отсыпанного грунта;
     
     - качество грунта;
     
     - толщину слоя растительного грунта;
     
     - качество дерна;
     
     - ширину и длину дерновых лент;
     
     - качество укладки дерна;
     
     - надежность закрепления дерна спицами.
     
     Качество выполнения работ контролирует мастер в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

Операция 
	
Предмет контроля 
	
Время контроля 

Нарезка дерна 
	
Соответствие качественных характеристик дерна требуемым 
	
До нарезки 

Распределение по откосу растительного грунта 
	
Ровность 
	
В процессе работы 

Укладка дерна и закрепление его спицами 
	
Качество укладки 
	
В процессе работы 

     

III. Технико-экономические показатели 

(на 1000 м откоса)

     Затраты труда - 18,6 чел. - дня;
     
     Потребность в машинах - 4,3 маш. - смены;
     
     Выработка на одного рабочего - 200 м.

IV. Материально-технические ресурсы 

     
     Расход материалов при укреплении откосов насыпи земляного полотна одерновкой сплошным покровом приведен в табл.3.     

Таблица 3 

	

  
	
Расход спиц, шт.

Укрепляемый участок 
	
Дерн 
	
Расход дернин на 10 м, шт.
	
на 10 м (при сплошной одерновке)
	
на 10 м пог. длины (при линейной одерновке)

  
	
Карты размерами, см:

	

  

Горизонтальный или откосы с уклоном не более 1:2 
	
20х25 
	
220 
	
440 
	
100 

Горизонтальный или откосы с уклоном не более 1:2 
	
25х40 
	
110 
	
220 
	
70 

Горизонтальный или откосы с уклоном не более 1:2 
	
30х50 
	
70 
	
140 
	
60 

Горизонтальный или откосы с уклоном не более 1:2 
	
Ленты 
	
17 
	
240 
	
60 

  
	
Карты размерами, см:

	

  

Откосы с уклоном более 1:2 
	
20х25 
	
229 
	
660 
	
200 

Откосы с уклоном более 1:2 
	
25х40 
	
110 
	
440 
	
100 

Откосы с уклоном более 1:2 
	
30х50 
	
70 
	
280 
	
120 

Откосы с уклоном более 1:2 
	
Ленты 
	
17 
	
400 
	
100 

     
     
     Потребность в основных материалах определена из расчета на 1000 м откоса:
     
     Дерн, м - 1110;
     
     Древесные отходы, м - 10,2;
     
     Растительный грунт, м - 52,5.
     
     Потребность комплексной механизированной бригады в машинах, оборудовании и приспособлениях определена из расчета оптимальной их загрузки:
     
     Дернорез-дерноукладчик ЭО-2621 (Э-153) - 1;
     
     Автогрейдер ДЗ-31-1 (Д-557) - 1.

V. Техника безопасности 

     
     При производстве работ по укреплению откосов земляного полотна механизированным посевом многолетних трав необходимо соблюдать требования по охране труда, приведенные в соответствующих разделах "Правил техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог", СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве". Часть 1 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве". Часть 2.
     
     Машинисты, рабочие и другие работники при выполнении дорожно-строительных работ должны быть обеспечены средствами защиты и специальной одеждой в соответствии с действующими правилами по охране труда и технике безопасности.
     
      Разработка дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности труда не требуется.

             

Материал разработан
научным сотрудником ВИТУ Олейником В. А.