Пусконаладочные работы

Сметная стоимость	107315 руб. 
в том числе 
Налог на добавленную стоимость	16370 руб. 
Составлен(а) в текущем уровне цен на февраль 2011 г.

N/N	Наименование	Номер ед	Количество,	Стоимость ед., руб. /с индекс.	Общая стоимость, руб. /с индекс.	Трудоемкость, чел-час	
п/п	работ	расценки	ед.изм.	Всего	Осн. з/п	Экспл. машин	Всего	Осн. з/п	Экспл. машин	на единицу	всего	
	ПНР											
1	Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА
234.85*13.26	ТЕРп 01-02-003-01	2
1 шт.	234.85
3114.11	234.85
3114.11	0
0	469.7
6228	469.7
6228	0
0	25	50	
2	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением до 1 кВ
13.17*13.26	ТЕРп 01-02-017-01	6
1 шт.	13.17
174.63	13.17
174.63	0
0	79.02
1048	79.02
1048	0
0	1.5	9	
3	Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности без подмагничивания
17.56*13.26	ТЕРп 01-02-018-01	2
1 шт.	17.56
232.85	17.56
232.85	0
0	35.12
466	35.12
466	0
0	2	4	
4	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А
20.42*13.26	ТЕРп 01-03-002-05	26
1 шт.	20.42
270.77	20.42
270.77	0
0	530.92
7040	530.92
7040	0
0	3	78	
5	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 630 А
61.25*13.26	ТЕРп 01-03-002-09	3
1 шт.	61.25
812.18	61.25
812.18	0
0	183.75
2437	183.75
2437	0
0	9	27	
6	Выключатель нагрузки напряжением до 11 кВ
79.63*13.26	ТЕРп 01-03-008-01	2
1 шт.	79.63
1055.89	79.63
1055.89	0
0	159.26
2112	159.26
2112	0
0	9	18	
7	Конденсатор статический напряжением до 1 кВ трехфазный
34.67*13.26	ТЕРп 01-08-033-02	1
1 шт.	34.67
459.72	34.67
459.72	0
0	34.67
460	34.67
460	0
0	3.5	3.5	
8	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м
18.56*13.26	ТЕРп 01-11-010-02	1
1 измерение	18.56
246.11	18.56
246.11	0
0	18.56
246	18.56
246	0
0	2	2	
9	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
148.48*13.26	ТЕРп 01-11-011-01	0.38
100 точек	148.48
1968.84	148.48
1968.84	0
0	56.42
748	56.42
748	0
0	16	6.08	
10	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
13.92*13.26	ТЕРп 01-11-013-01	26
1 токоприемник	13.92
184.58	13.92
184.58	0
0	361.92
4799	361.92
4799	0
0	1.5	39	
11	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ
9.28*13.26	ТЕРп 01-11-024-01	24
1 фазировка	9.28
123.05	9.28
123.05	0
0	222.72
2953	222.72
2953	0
0	1	24	
12	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ
18.56*13.26	ТЕРп 01-11-024-02	2
1 фазировка	18.56
246.11	18.56
246.11	0
0	37.12
492	37.12
492	0
0	2	4	
13	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
3.71*13.26	ТЕРп 01-11-028-01	24
1 линия	3.71
49.19	3.71
49.19	0
0	89.04
1181	89.04
1181	0
0	0.4	9.6	
14	Испытание обмотки трансформатора силового
28.01*13.26	ТЕРп 01-12-010-01	2
1 испытание	28.01
371.41	28.01
371.41	0
0	56.02
743	56.02
743	0
0	3	6	
15	Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ
74.77*13.26	ТЕРп 01-12-020-01	12
1 испытание	74.77
991.45	74.77
991.45	0
0	897.24
11897	897.24
11897	0
0	9	108	
16	Испытание аппарата коммутационного напряжением до 35 кВ
30.74*13.26	ТЕРп 01-12-021-02	2
1 испытание	30.74
407.61	30.74
407.61	0
0	61.48
815	61.48
815	0
0	3.5	7	
17	Испытание конденсатора статического напряжением до 3 кВ
26.35*13.26	ТЕРп 01-12-022-01	2
1 испытание	26.35
349.4	26.35
349.4	0
0	52.7
699	52.7
699	0
0	3	6	
		ИТОГО (прямые затраты) по смете	3345.66
44363	3345.66
44363	0
0		401.18	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 65%		28836					
И Т О Г О с накладными расходами		73200					
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 40%		17745					
И Т О Г О со сметной прибылью		90945					
Налог на добавленную стоимость 18%		16370					
				ИТОГО	107315					

(Сто семь тысяч триста пятнадцать руб. 00 коп.)

	
	От заказчика	От подрядчика 

	_________________	_________________

	"   " ___________ 20__  г.	"   " ___________ 20__  г.

	   М П	      М П