"СОГЛАСОВАНО"		"УТВЕРЖДАЮ"	
 Подрядчик			Заказчик		
 			
 "__"_______________20__г.		"__"_______________20__г.	
 	
 Наименование стройки (объекта):		
 	
 ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №		
 (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА) на устройство асфальтобетонного покрытия	
 	
 Наименование работ и затрат:		
 Основание:		
 Сметная стоимость:	2866,585 тыс.руб	
 Нормативная трудоемкость:	1421,63 чел-ч	
 Сметная заработная плата:	445,551 тыс.руб	
 Составлен(а) в уровне цен на:	Март 2017 г.	
 Наименование региона:	Санкт-Петербург	
 Наименование редакции СНБ:	ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2014 (ГЭ 2012)	
 Наименование сборника индексов пересчета:	Индексы по расценкам 03.2017 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012)	
 Наименование сборника текущих цен:	ССЦ 03.2017 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012)	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №1 <Нет раздела>	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕР27-03-009-02	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 8 см	13,47	2 087,89	2 017,47	287 402,92	14 956,28	196 993,9	5,89	79,34	
 	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7; МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.11.3	V=1347/100; Изп=18,125; Иэмм=7,249; Имат=12,683; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=60,54*0,8*1,15*1,1; ЭММ=1834,06*0,8*1,25*1,1; ЗПм=92,23*0,8*1,25*1,1; Мат=11,45*0,8; ТЗТ=5,81*0,8*1,15*1,1; ТЗТм=6,06*0,8*1,25*1,1	100 м2	61,26	101,45			24 768,37	6,67	89,84	
 2	ТЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований щебеночных	1,35	767,66	608,12	21 881,64	3 903,74	7 033,18	16,72	22,57	
 	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7; МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.11.3	V=1347*0,1/100; Изп=18,125; Иэмм=8,567; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=126,12*1,15*1,1; ЭММ=442,27*1,25*1,1; ЗПм=58,86*1,25*1,1; ТЗТ=13,22*1,15*1,1; ТЗТм=3,79*1,25*1,1	100 м3 конструкций	159,54	80,94			1 980,5	5,21	7,03	
 3	ТЕР47-01-001-02	Планировка участка вручную	13,47	123,1	0	74 834,87	30 054,13	0	12,9	173,76	
 	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7; МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.11.3	V=1347/100; Изп=18,125; НР=0,88 (1,15*0,9*0,85); СП=0,61 (0,9*0,85*0,8); ЗП=97,31*1,15*1,1; ЭММ=0*1,25*1,1; ЗПм=0*1,25*1,1; ТЗТ=10,2*1,15*1,1; ТЗТм=0*1,25*1,1	100 м2	123,1	0			0	0	0	
 4	ТЕРр68-12-18	Разборка тротуаров из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм	0,94	5 276,94	1 706,44	151 353,49	52 902,81	16 541	313,96	295,12	
 	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.11.3	V=93,5/100; Изп=18,125; Иэмм=10,312; Имат=4,926; НР=0,88 (1,04*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); ЗП=2822,8*1,1; ЭММ=1551,31*1,1; ЗПм=306,29*1,1; ТЗТ=285,42*1,1; ТЗТм=25,76*1,1	100 м2 площади разборки	3 105,08	336,92			5 740,28	28,34	26,64	
 4.1	101-9427-001П	Диск отрезной алмазный	0,00282	1 564,32		4,41		
 			шт.					
 5	ТЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований щебеночных	0,14	767,66	608,12	2 269,21	404,83	729,37	16,72	2,34	
 	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7; МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.11.3	V=93,5*0,15/100; Изп=18,125; Иэмм=8,567; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=126,12*1,15*1,1; ЭММ=442,27*1,25*1,1; ЗПм=58,86*1,25*1,1; ТЗТ=13,22*1,15*1,1; ТЗТм=3,79*1,25*1,1	100 м3 конструкций	159,54	80,94			205,39	5,21	0,73	
 6	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	0,22	1 858,48	0	14 228,52	7 410,69	0	194,81	42,86	
 	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7; МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.11.3	V=0,23*93,5/100; Изп=18,125; НР=0,61 (0,8*0,9*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=1469,16*1,15*1,1; ЭММ=0*1,25*1,1; ЗПм=0*1,25*1,1; ТЗТ=154*1,15*1,1; ТЗТм=0*1,25*1,1	100 м3 грунта	1 858,48	0			0	0	0	
 7	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	1,44	4 446,39	4 128,63	92 542,92	7 898,9	47 894,75	30,6	44,06	
 	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7; МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.11.3	V=1440,5*0,1/100; Изп=18,125; Иэмм=8,056; Имат=12,685; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=239,24*1,15*1,1; ЭММ=3002,64*1,25*1,1; ЗПм=326,3*1,25*1,1; ТЗТ=24,19*1,15*1,1; ТЗТм=20,6*1,25*1,1	100 м3 материала основания (в плотном теле)	302,64	448,67			11 710,28	28,33	40,8	
 7.1	408-0007	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм	144,64	1 174,61		169 895,59		
 			м3					
 7.2	408-0035	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 5-20 мм	36,16	1 365,92		49 391,67		
 			м3					
 8	ТЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1,44	3 442,74	2 267,64	98 498,52	14 871	32 627,89	48,46	69,78	
 	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7; МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.11.3	V=1440,5/1000; Изп=18,125; Иэмм=9,992; Имат=3,198; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=450,41*1,15*1,1; ЭММ=1649,19*1,25*1,1; ЗПм=307,89*1,25*1,1; ТЗТ=38,3*1,15*1,1; ТЗТм=19,1*1,25*1,1	1000 м2 покрытия	569,77	423,35			11 049,44	26,27	37,83	
 8.1	410-9010-026П	Смеси асфальтобетонные горячая пористая, марка: I мелкозернистая	134,928	2 623,06		353 924,24		
 			т					
 9	ТЕР27-06-020-03	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1,44	3 185,98	2 259,57	97 430,79	14 871	32 518,28	48,46	69,78	
 	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7; МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.11.3	V=1440,5/1000; Изп=18,125; Иэмм=9,994; Имат=3,604; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=450,41*1,15*1,1; ЭММ=1643,32*1,25*1,1; ЗПм=307,57*1,25*1,1; ТЗТ=38,3*1,15*1,1; ТЗТм=19,08*1,25*1,1	1000 м2 покрытия	569,77	422,91			11 037,95	26,24	37,79	
 9.1	410-9010-015П	Смеси асфальтобетонные горячая плотная, марка: I, тип Б мелкозернистая	137,952	2 823,4		389 493,68		
 			т					
 10	ТЕРр68-14-01	Разборка бортовых камней на бетонном основании	2,04	1 655,57	862,66	89 335,48	29 317,84	14 031,1	75,09	153,18	
 	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.11.3	V=204/100; Изп=18,125; Иэмм=7,973; НР=0,88 (1,04*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); ЗП=720,83*1,1; ЭММ=784,24*1,1; ЗПм=110,54*1,1; ТЗТ=68,26*1,1; ТЗТм=9,4*1,1	100 м	792,91	121,59			4 495,79	10,34	21,09	
 11	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	0,15	4 446,39	4 128,63	9 639,89	822,8	4 989,04	30,6	4,59	
 	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7; МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.11.3	V=1*0,5*204*0,15/100; Изп=18,125; Иэмм=8,056; Имат=12,685; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=239,24*1,15*1,1; ЭММ=3002,64*1,25*1,1; ЗПм=326,3*1,25*1,1; ТЗТ=24,19*1,15*1,1; ТЗТм=20,6*1,25*1,1	100 м3 материала основания (в плотном теле)	302,64	448,67			1 219,82	28,33	4,25	
 11.1	408-0007	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм	15,07	1 174,61		17 701,37		
 			м3					
 11.2	408-0035	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 5-20 мм	3,77	1 365,92		5 149,52		
 			м3					
 12	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	2,04	3 895,2	111,28	150 900,49	36 795,3	1 697,36	96,24	196,33	
 	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7; МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.11.3	V=204/100; Изп=18,125; Иэмм=7,477; Имат=7,55; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=786,67*1,15*1,1; ЭММ=80,93*1,25*1,1; ЗПм=10,74*1,25*1,1; ТЗТ=76,08*1,15*1,1; ТЗТм=0,68*1,25*1,1	100 м бортового камня	995,14	14,77			546,13	0,94	1,92	
 12.1	403-8021	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	204	315,78		64 419,12		
 			шт.					
 ИТОГО:	1 090 318,74	214 209,32	355 055,87	1 153,71	
 			72 753,95	267,92	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	214209,32	1	214 209,32	
 Машины и механизмы	355055,87	1	355 055,87	
 Материалы	51616,29	1	51 616,29	
 Итого по неучтенным материалам		1 049 979,6	
 Итого		1 670 861,08	
 Автомобильные дороги (1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12)	
 Накладные расходы	(94523,85+62517,88)*1,42*0,85	1,21	190 020,49	
 Сметная прибыль	(94523,85+62517,88)*0,95*0,85*0,8	0,65	102 077,12	
 Итого		292 097,61	
 Озеленение. Защитные лесонасаждения (3)	
 Накладные расходы	(30054,13+0)*1,15*0,9*0,85	0,88	26 447,63	
 Сметная прибыль	(30054,13+0)*0,9*0,85*0,8	0,61	18 333,02	
 Итого		44 780,65	
 Благоустройство при ремонте (4, 10)	
 Накладные расходы	(82220,65+10236,07)*1,04*0,85	0,88	81 361,91	
 Сметная прибыль	(82220,65+10236,07)*0,6*0,8	0,48	44 379,23	
 Итого		125 741,14	
 Земляные работы, выполняемые ручным способом (6)	
 Накладные расходы	(7410,69+0)*0,8*0,9*0,85	0,61	4 520,52	
 Сметная прибыль	(7410,69+0)*0,45*0,85*0,8	0,31	2 297,31	
 Итого		6 817,83	
 	
 Итого		2 140 298,31	
 	
 №2 <Нет раздела>	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	[ТССЦпг01-01-01-041]	Погрузочные работы: Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	298,99	530,41	0	158 587,29	158 587,29	0		
 			т	530,41	0			0		
 2	[ТССЦпг03-21-02-030]	Расстояние перевозки: от 29.1 до 30 км. Класс груза 2. Таблица 3.7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера	536,06	243,3	243,3	130 423,4		130 423,4		
 			т							
 ИТОГО:	289 010,69	158 587,29	130 423,4	0	
 			0	0	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	158587,29	1	158 587,29	
 Машины и механизмы	130423,4	1	130 423,4	
 Материалы	0	1	0	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Итого		289 010,69	
 <Нет вида работ> (1, 2)	
 Накладные расходы	(158587,29+0)*0	0	0	
 Сметная прибыль	(158587,29+0)*0	0	0	
 Итого		0	
 	
 Итого		289 010,69	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		2 429 309	
 НДС	2429309*0,18	18%	437 275,62	
 Итого		2 866 584,62	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ