Унифицированная форма № КС-2	
 	Утверждена Постановлением Госкомстата России	
 	от 11 ноября 1999 г. № 100	
 	Код	
 Форма по ОКУД	0322005	
 Инвестор : 		по ОКПО		
 Заказчик (генподрядчик) :		по ОКПО		
 Подрядчик (субподрядчик) :		по ОКПО		
 Стройка : 	Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Валдай - Демянск км 67+000 - 68+000 в Демянском муниципальном районе Новгородской области			
 Объект : 	Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Валдай - Демянск км 67+000 - 68+000 в Демянском муниципальном районе Новгородской области			
 Вид деятельности по ОКДП		
 Договор подряда (контракт)	номер		
 	дата	11	июня	2013	
 Вид операции		
 	
 	Номер документа	Дата составления		Отчетный период		
 				с	по		
 АКТ	1	12 июля 2013 г.		11.06.2013	12.07.2013		
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	
 	
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 5 716 920,72 руб.	
 Локальная смета №02-01-01 на Ремонт	
 Номер	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ	
 по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.	
 1	2	3	4	5	6	7	8	
 1	П.1-4	Рубка кустарника с автовозкой		1 га	0,6		2778,88	
 2	П5-6	Прочистка канав экскаватором с автовозкой		м3	78		6 729,84	
 3	П.7-11	Досыпка обочин песком		м3	50		206 155,00	
 4	П.12-19	Ямочный ремонт		м2	600		195 516,00	
 5	П.20-24	Выравнивание поперечного профиля плотной асфальтобетонной смесью		т	500		1 219 450,00

 Номер	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ	
 по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.	
 1	2	3	4	5	6	7	8	
 6	П.25-27	Устройство покрытия из плотной а/б смеси марки II тип Б толщиной 5 см		м2	6000		1 732 380,00	
7	П.28-29	Укрепление обочин ПГС толщиной 10 см		м	4000		490 360,00	
8	П.30-31	Устройство сигнальных столбиков на трубе		шт.	6		8 689,20	
 9	П.32	Устройство металлического ограждения		п.м.	250		759 600,00	
		ИТОГО:					4 621 658,92	
10	ГСН 81-05-01-01	Временные здания и сооружения 3,28%			4 621 658,92*3,28%		151 590,41	
		ИТОГО					4 773 249,33	
11
	МДС 81-35.2004	Непредвиденные работы 1,5%			4 773 249,33*1,5%		71 598,74	
		ИТОГО					4 844 848,07	
12	ССР, нал.кодекс	НДС 18%			4 844 848,07*18%		872 072,65	
13		ВСЕГО 					5 716 920,72	

Заказчик (Генподрядчик) 			
	
 М.П.		подпись	расшифровка подписи	
 Подрядчик (Субподрядчик)			
	
 М.П.		подпись	расшифровка подписи