Правительство Москвы
Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы
НОРМЫ 
продолжительности проектирования объектов 
строительства в Москве и ЛПЗП
МРР-3.1.10-97
СИСТЕМА НОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЕКТНОМ КОМПЛЕКСЕ
Москва 1997
Правительство Москвы
Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы
Согласовано:							Утверждаю:
Начальник Управления					Первый заместитель
развития Генплана						премьера правительства
Я.В. Топельсон						В.И. Ресин
НОРМЫ 
продолжительности проектирования объектов 
строительства в Москве и ЛПЗП
МРР-3.1.10-97
Согласовано:
Заместитель руководителя				Председатель
Департамента экономической				Москомархитектуры
политики и развития Москвы					А.В. Кузьмин
В.Ф. Иликов
Заместитель председателя
Москомархитектуры
Ю.В. Гольдфайн
Согласовано:
Заместитель начальника управления			Начальник отдела
Департамента экономической политики		Управления подготовки
и развития Москвы					проектирования
Г.Г. Страшнов					и координации
							проектно-
изыскательских работ
Москомархитектуры
Ю.В. Минаев
Москва 1997
Нормы продолжительности проектирования объектов строительства в Москве и ЛПЗП подготовлены специалистами проектно-строительного и инвестиционного комплекса Москвы в составе И.Л. Дроновой, В.К. Соболева, под руководством заместителя начальника Координационно-маркетингового управления Москомархитектуры Ю.В. Минаева.
Нормы предназначены для определения продолжительности проектирования объектов жилищно-гражданского строительства в условиях города Москвы и лесопаркового защитного пояса (ЛПЗП).
Нормы изданы в связи с отменой ранее действующих Временных норм продолжительности проектирования зданий и сооружений для организаций Мосгорисполкома, как устаревшие и не соответствующие рыночным отношениям.
Нормы утверждены Первым заместителем премьера Правительства Москвы В.И. Ресиным и введены в действие приказом по Москомархитектуре от 16.09.97 г. № 114.
ВВЕДЕНИЕ
Определение норм продолжительности проектирования зданий и сооружений находится в прямой зависимости от трудоемкости выраженной в чел. днях или в чел. мес. к технологической последовательности выполнения работ, влияющей на уровень совмещения процессов проектирования. Существенное значение имеет также распределение удельных весов отдельных разделов этих работ в общей продолжительности разработки ПСД.
Методология формирования и практического применения норм продолжительности проектирования базируется на принципах увязки интересов проектных организаций и заказчика в современных условиях поэтапного перехода к рыночной экономике со всеми присущими рынку процессами и явлениями (инфляция и т.п.)
При разработке «Норм продолжительности», в первую очередь, учитывался опыт разработки проекта «Норм продолжительности проектирования зданий и сооружений для проектных организаций, подведомственных правительству Москвы», «Рекомендаций по определению укрупненных показателей стоимости строительства, изыскательских и проектных работ по объектам, расположенным в Москве и ЛПЗП» (распоряжение первого заместителя премьера от 13.10.93 г. № 1888-РЗ), а также других нормативных документов по ценообразованию в проектировании, в том числе «Порядка определения стоимости проектных работ для строительства в Москве и ЛПЗП (2-ая редакция)» (распоряжение мэра Москвы от 12.08.96 г. № 222/1-РМ).
Единый методический подход к системе норм и нормативов продолжительности выполнения ПСД, адекватный условиям рыночных отношений, создает соответствующие экономические предпосылки, направленные на упорядочение технологических процессов в проектировании, создает необходимые условия при заключении хозяйственных договоров между заказчиками и проектными организациями и способствует нормализации взаимоотношений между ними.
При разработке «Норм продолжительности» использованы следующие источники информации:
1. «Справочник по ценообразованию» под редакцией Н.Т. Глушкова, изд. «Экономика», 1985 г. Москва.
2. У.Э. Минков «Оценка эффективности капитальных вложений (новые подходы)», Москва, «Наука» 1991 г.
3. Л. Катерович и др. «Экономика и организация», Москва, изд. «Наука», 1990 г.
4. Роберт Пиндай К. «Микроэкономика», изд. «Экономика», «Дело», 1992 г.
5. Стенм Фишер, изд. «Экономика», Москва, 1993 г.
Работа выполнена временным творческим коллективом под руководством заместителя начальника координационно-маркетингового управления Москомархитектуры Минаева Ю.В.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Нормы продолжительности разработки проектно-сметной документации ПСД являются составной частью комплексной системы экономических норм и нормативов в проектно-строительном комплексе города.
1.2. Нормы продолжительности разработки ПСД базируются на комплексном, системном подходе с применением экономико-математических методов и программно-технических средств.
1.3. В структуре норм продолжительности учтен экстенсивный и интенсивный характер интеллектуального труда, корреляционная зависимость (или ее отсутствие) между принятыми моделями определения стоимости проектирования и нормами продолжительности разработки ПСД, характерные особенности каждого вида проектной документации и объекта строительства.
1.4. Нормативная продолжительность разработки ПСД функционально связана следующими зависимостями:
- нормативом времени выполнения единицы продукции;
- общей площадью рассматриваемого объекта;
- коэффициентами, учитывающими изменения объема работ по отношению к базовому и коэффициентом совмещения процессов проектирования.
1.5. Нормативная продолжительность разработки ПСД не учитывает время, необходимое:
- для сбора и анализа исходных данных;
- выполнение изыскательских работ;
- согласования проектных решений с заинтересованными организациями и организациями государственного надзора;
- экспертизу и утверждение проектной документации.
1.6. Нормативная продолжительность разработки ПСД учитывает время необходимое для проектирования объекта, как единого целого.
1.7. Продолжительность проектирования комплекса, состоящего из нескольких объектов, связанных единым архитектурным замыслом или технологическим процессом, определяется на основе сетевых графиков с использованием норм продолжительности разработки ПСД отдельных объектов и систем с учетом совмещения процессов проектирования.
1.8. Продолжительность разработки раздела (за исключением архитектурно-строительного раздела) или части проекта определяется пропорционально их доле в общем объеме работ с коэффициентом 1,2, учитывающий время на ознакомление с проектом в целом.
Продолжительность разработки архитектурно-строительного раздела принимается равной общей продолжительности проектирования с коэффициентом 0,9.
1.9. При привязке объектов нормативная продолжительность определяется в % от общей продолжительности проектирования при следующих условиях:
- с переработкой нулевого цикла - 30%;
- с изменением назначения 1-го нежилого этажа - 50%;
- с изменением этажности - 50%;
- с размещением нежилых этажей в конструкциях типа «Стол» - 50%.
1.10. Доля раздела проекта в общем объеме ПСД определяется по разбивке долевого участия в соответствии с классификацией по стадиям проектирования, принятой в проектной организации.
1.11. Использование норм продолжительности разработки ПСД позволяет упорядочить:
- установление в договорах подряда объективных сроков разработки ПСД
- стоимость проектных работ в случае сокращения сроков проектирования, принятых в договорах по сравнению с нормативными (см. «Порядок определения стоимости проектных работ для строительства в Москве и ЛПЗП (2-ая редакция) (распоряжение мэра Москвы от 12.08.96 № 222/1-РМ);
- установлению нормативно-правового основания для преодоления разногласий, возникающих между заказчиком и проектной организации по поводу продолжительности проектирования.
1.12. Нормы продолжительности разработаны для следующих стадий проектирования:
- эскизный проект (ЭП), эскизный проект застройки (ЭПЗ);
- технико-экономические обоснования (ТЭО);
- проект (П);
- рабочий проект (РП);
- рабочая документация (РД).
1.13. Применение компьютерных технологий учитывается коэффициентом Ккп.
2. КЛАССИФИКАЦИЯ И НОМЕНКЛАТУРА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
2.1. Классификация проектной документации определяется:
- по отраслевому признаку;
- видом строительства;
- стадией проектирования.
2.2. Классификация по отраслевому признаку:
- объекты жилищного назначения;
- объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
- объекты культурно-просветительного, зрелищного и физкультурно-оздоровительного назначения;
- объекты науки, просвещения, здравоохранения и учреждений финансов и юстиции;
- объекты коммунального хозяйства;
- объекты инженерно-транспортного обеспечения;
- объекты производственного назначения;
- объекты благоустройства и озеленения.
2.3. По видам строительства:
- отдельно стоящие объекты;
- градообразующие архитектурные ансамбли и комплексы;
- комплексы гражданского и производственного назначения, не связные единым технологическим процессом;
- тоже, связанные единым технологическим процессом;
- застройки жилых кварталов, микрорайонов.
2.4. По стадиям проектирования:
- эскизный проект (ЭП);
- эскизный проект застройки (ЭПЗ);
- технико-экономические обоснования (ТЭО);
- проект (П);
- рабочий проект (РП);
- рабочая документация (РД).
3. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОРМ И НОРМАТИВОВ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Формирование норм и нормативов продолжительности проектирования основывается на следующих принципах:
- системном, комплексном подходе;
- построение технологических сетевых моделей на основе использования экономико-математических методов с применением современной вычислительной техники;
- использовании нормативно-параметрического метода для усредненных «эталонных» объектов;
- создании единой нормативной базы, которая должна обеспечить объективную оценку наиболее существенных свойств объектов проектирования через их критериальные физические параметры (га, м2 общей площади, п.м. км и т.д.) с учетом качественных характеристик, позволяющих осуществлять сравнение (сопоставление) каждого конкретного объекта с эталонным образцом
- установлении пропорциональной зависимости норм продолжительности разработки ПСД от ее стоимости и трудоемкости;
- четкого разграничения проектных работ в зависимости от их назначения по стадиям проектирования;
- определении базовой стоимости проектных работ в ценах 1991 года.
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ НОРМ И НОРМАТИВОВ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
4.1. Продолжительность разработки проектно-сметной документации (ПСД) находится в непосредственной зависимости от следующих факторов:
- объема и содержания (стоимости) работ;
- количества разработчиков и их квалификации;
- технологической последовательности и взаимозависимостей при разработке разделов проекта составляющих полный объем ПСД;
- трудоемкости выполнения отдельных операций и разделов;
- соотношения последовательных и параллельных операций при разработке ПСД, характерное для различных стадий проектирования.
4.2. Объем и содержание работ характеризуется стоимостью выполнения ПСД, учитывающей необходимые трудозатраты, зависящие от величины общей площади и функционального назначения объекта (территории), стадии проектирования и других факторов.
4.3. Количество и соотношение специалистов различной квалификации в группе разработчиков существенно влияет на среднюю выработку (Вср) и тем самым на трудоемкость выполнения работ.
Средняя выработка определяется по следующей формуле:
Вср=				(4.1)
где ЗПср - средняя зарплата в бригаде разработчиков;
Рср - средняя рентабельность в проектной организации;
Кз - коэффициент зарплаты, определяющий долю зарплаты в себестоимости.
Трудоемкость выполнения ПСД определяется по формуле:
ТнЧр=					(4.2)
где Тн - нормативное время выполнения работы в мес.
Чр - расчетная численность специалистов, выполняющих работу
Спсд - стоимость разработки ПСД в руб.
Таким образом, нормативное время на выполнение работы (операции) равно:
Тн=/Чр					(4.3)
Расчетная численность специалистов, выполняющих работу, определяется по формуле:
Чр=ЧпКуч					(4.4)
где Чп - плановая численность специалистов, участвующих в разработке документации;
Куч - коэффициент участия специалистов в разработке документации.
Куч=Чi/Чп				(4.5)
где Тпi - плановое время участия специалиста в разработке ПСД;
Т - продолжительность разработки расчетного этапа проектирования;
Чi - численность специалистов, принимающих одинаковое время в разработке ПСД;
Чп - плановая численность специалистов, участвующих в разработке ПСД.
Куч1,0
4.4. Технология разработки ПСД отличается последовательностью и параллельностью исполнения работ. От соотношения объемов работ последовательного и параллельного исполнения и их трудоемкости в значительной степени зависит продолжительность разработки ПСД.
Доля последовательных процессов в разработке ПСД в процентном отношении, как правило, сохраняется на одном уровне, и играет определяющую роль в общей продолжительности проектирования. Продолжительность разработки параллельных процессов изменяется в зависимости от совмещения процесса проектирования, от количества исполнителей и методов выполнения документации.
В зависимости от стадии и объема появляется разная возможность совмещения процессов проектирования, которая учитывается коэффициентом совмещения, Ксм.
4.5. Таким образом, нормативная продолжительность определяется по формуле:
Тнп=ТнвСпсдКсм				(4.6)
где Тнп - нормативная продолжительность разработки ПСД
Тнв - норматив времени на разработку единицы продукции.
Тнв=1/ВсрЧр					(4.7)
Общая продолжительность выполнения ПСД определяется по формуле
Тпп=Тп+Тнп+Тв					(4.8)
где Тпп - общая продолжительность проектирования;
Тп - нормативная продолжительность приемки, анализа и оценки исходных данных;
Тв - нормативная продолжительность работ по оформлению и выпуску ПСД.
4.6. Значения норматива времени на разработку единицы продукции Тнв определяются по таблице 1, в зависимости от расчетной численности исполнителей (Чр), исходя из средней выработки Вср=6,5 тыс. руб./мес. рассчитанной на базовых показателях проектных организаций в 1991 года
ЗПср=2500 руб./мес.;
Р=30%, Кз=0,5
4.7. Стоимость разработки ПСД и ее разделов, (Спсд), определяется в соответствии с «Порядком определения стоимости проектных работ для строительства в г. Москве и ЛПЗП (2-я редакция)» утвержденного распоряжением мера от 12.08.96 г. № 222/1-РМ.
4.8. Значения коэффициентов совмещения процессов (Ксм) проектирования определяются по таблице 2 в зависимости от стадии проектирования и стоимости разработки ПСД.
Значение коэффициентов Ксм получены по результатам анализа сетевых моделей разработки ПСД и репрезентативной выборки фактических показателей продолжительности проектирования объектов, разработанных проектными организациями за предшествующие годы.
4.9. Нормативная продолжительность Тп и Тв определяется на основе технологических карт выполнения этих работ в проектной организации, но не более 0,5 месяца.
4.10. Расчет нормативной продолжительности разработки ПСД для различных стадий проектирования осуществлен в табличной форме (см. приложение).
Приведение мощности объектов к единому показателю, 1 кв. м общей площади, осуществляется по данным таблицы 3.
Таблица 1
Значения нормативов времени на разработку единицы продукции Тнв
Расчетная численность Чр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Норматив времени Тнв	0,15	0,077	0,05	0,038	0,03	0,025	0,021	0,019	0,017	0,015	
Таблица 2
Значения коэффициентов совмещения процессов проектирования Тсм
Наименование стадии 	Значения Ксмi при стоимости разработки ПСД
в тыс. руб. (в ценах 1991 г.)	
проектирования	до 50	от 51 до 100	от 101 до 200	от 201 до 300	от 301 до 400	от 401 до 500	от 501 до 600	от 601 и более	
Эскизный проект, Эскизный проект застройки, технико-экономическое обоснование, проект	0,9	0,81	0,7	-	-	-	-	-	
Рабочий проект	0,8	0,73	0,67	0,65	-	-	-	-	
Рабочая документация	07	0,63	0,57	053	0,52	0,5	0,5	05	

ТАБЛИЦА 3
приведения мощности предприятий и организаций 
к единому показателю 1 кв. м общей площади объекта
№	Наименование объекта	Расчетный показатель	Мощность расчетный показатель	Общая площадь на расчетный показатель в кв. м	Примечание	
1	2	3	4	5	6	
1	Детские дошкольные учреждения	место	280-140	7,0-10,0		
2	Общеобразовательные школы	учащийся	1300-1000	5,5-9,5		
3	Поликлиники взрослые	посещение	1400-570	60-10,7		
4	Поликлиники детские	посещение	800-320	13,5-21,9		
5	Поликлиники стоматологические	посещение	1300-275	7,6-10,3		
6	Магазины продовольственные	торговая площадь кв. м	500-200	3,4-5,7		
	Магазины промтоварные	торговая площадь кв. м	2400-900	1,8-2,2		
7	Рынки	рабочих мест	100	3,2-5,2		
8	Аптеки	тыс. рецептов	350-100	3,0-6,5		
	Аптеки	тыс. жителей	15-10	20-25		
	Аптеки	рабочих мест	50-30	17-42		
9	Предприятия бытового обслуживания	рабочих мест	90-35	15-20		
10	Парикмахерские	рабочих мест	20-10	197-241		
11	Рестораны	посадочных мест	400-200	7,0-11,5		
12	Кафе	посадочных мест	160-50	5,2-6,5		
13	Отделения связи	рабочих мест	40-35	17,1-24,7		
14	Сбербанки	рабочих мест	45-6	14,6-24,2		
15	Библиотеки	1 тыс. ед. хран.	96-65	9,3-12,0	^	
16	Кинотеатры	мест	300	32		
		мест	500	3,1		
		мест	800	2,9		
		мест	1200	2,7		
17	Спортивный корпус с залом для гимнастики	1 кв. м. в спортивном зале	450	2,8		
			540	2,7		
			650	2,6		
	Спортивный корпус с залом для волейбола	1 кв. м. в спортивном зале	1000	24		
			450	2,8		
			540	2,7		
			650	2,6		
	Спортивный корпус с залом для бокса	1 кв. м. в спортивном зале	1000	2,4		
			300	29		
			540	2,8		
	Спортивный корпус с залом для леткой атлетики	1 кв. м. в спортивном зале		2,8		
18	Универсальный спортивный корпус для гимнастики и акробатики	1 кв. м. в спортивном зале	540	2,9		
			650	2,8		
			1000	2,9		
	Универсальный спортивный корпус для спортивных игр	1 кв. м. в спортивном зале	540	3,0		
			650	2,9		
			1000	2,9		
19	Многозальный спортивный корпус двухзальный с залами	1 кв. м. в спортивном зале	430	32		
			360	32		
			160	32		
	Многозальный спортивный корпус трехзальный с залами	1 кв. м. в спортивном зале	300	3,0		
			540	30		
20	Бассейны крытые с ваннами:					
	- основной	1 кв. м зеркала воды	12,5	49		
			60	49		
			400	48		
	- детской	1 кв. м зеркала воды	60	48		
21	Физкультурно-спортивные комплексы (ФОК)	1 кв. м. в спортивном зале		1,8		
22	Клубы	единовременная вместимость (мест)-	200	4,6		
			475	5,2		
23	Гаражи-стоянки для автомобилей принадлежащих гражданам					
	- многоэтажные		200	20		
	- полуподземные и подземные одноярусные	1 место	475	20		

5. НОРМЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
5.1. Застройка микрорайонов (кварталов), градостроительных комплексов с инженерными сетями, благоустройством и подготовкой территории (без привязки жилых домов, объектов культурно-бытового и коммунального назначения), на стадии «Эскизный проект».
№ п/п	Наименование объекта	Мощность тыс. кв. м общей площади	Нормы проектирования в месяцах для стадий	
			ЭП ТЭО	П	Р	РП	
1	2	3	4	5	8	7	
1.	Многоэтажная застройка	до 50	3,0	4,5	5,0	8.0	
	(10-14-17-22 эт.)	от 50 до 100	от 3,0 до 4,5	от 4,5 до 5,5	от 5,0 до 6,5	от 8,0 до 9,5	
		от 101 до 150	от 4,5 до 5,0	от 5,5 до 8,0	от 6,5 до 7,0	от 9,5 до 10,5	
		от 151 до 250	от 5,0 до 5,5	от 6,0 до 6,5	от 7,0 до 8,0	от 10,5 до 11,0	
		свыше 250	от 5,5 до 6,0	от 6,5 до 7,0	от 8,0 до 8,5	от 11,0 до 11,5	
2.	Малоэтажная застройка	до 15	3,0	5,0	5,5	9,5	
	(2-4-7-9)	от 18 до 75	от 3,0 до 5,5	от 5,0 до 7,0	от 5,5 до 8,0	от 9,5 до 11,5	
		свыше 75	от 5,5 до 8,0	от 7,0 до 8,0	от 8,0 до 8,5	от 11,5 до 13,0	

5.2. Объекты жилищного назначения
№ п/п	Наименование объекта	Мощность объекта	Нормы проектирования в месяцах для стадий	
		В натуральных показателях	тыс. кв. м общей площади	ЭП ТЭО	П	Р	РП	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Жилые дома:							
	- панельные	до 5 эт.	2,0	2,0	2,5	3,0	3,5	
		до 12 эт.	5,4	2,77	3,0	4,0	5,0	
		до 18 эт.	7,2	3,08	4,0	5,0	6,5	
	- каркасно-панельные	до 18 эт.	7,2	3,0	4,0	5,0	7.5	
		до 22 эт.	10,0	3,5	5,0	6,0	8.0	
	- кирпичные	до 5 эт.	2,0	2,0	2,5	3,0	3,5	
		до 12 эт.	5.4	3,0	35	4,5	8,0	
		до 16 эт.	7,2	3,5	4,0	5,5	75	
	- монолитные	до 5 эт.	2,0	2.0	3,0	3,5	4,0	
		до 12 эт.	5,4	3,0	5,0	5,5	7,5	
		до 16 эт.	7,2	4,0	5,5	7,0	8,5	
		до 22 эт.	100	4,0	8,0	7,5	11,0	
2.	Гостиницы							
	- панельные	до 12 эт.	8,5	2,5	40	4,5	6,5	
		до 16 эт.	8,0	30	5,3	5,5	7,5	
	- каркасно-панельные	до 16 эт.	9,0	3,5	6,0	7,5	95	
		до 22 эт.	10,0	4,0	7,0	8,0	10,0	
	- кирпичные	до 5 эт.	4,0	2,5	4,0	4,5	5,5	
		до 12 эт.	10,0	4,0	5,5	7,5	10,5	
	- монолитные	до 5 эт.	4,0	3,0	50	6,5	7,5	
		до 12 эт.	10,0	5,0	7,5	85	12,0	
		до 18 эт.	14,0	5,5	85	10,5	13,5	
3.	Коттеджи							
	- кирпичные	до 4 эт.	0,2	1,0	2,0	2,0	2,5	
			0,4	1,0	2,0	2,0	2,5	
			0,6	1,0	2,0	2,0	2,5	
	- монолитные	до 4 эт.	0,4	1,0	20	2,0	2,5	
			0,6	1,0	2,0	2,5	3,0	
5.3. Объекты просвещения
№ п/п	Наименование объекта	Мощность объекта	Нормы проектирования в месяцах для стадий	
		В натуральных показателях	тыс. кв. м общей площади	ЭП ТЭО	П	Р	РП	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		мест						
1.	Детские дошкольные учреждения	140	1,9	2,0	2,5	3,0	3,5	
2.	Детский сад-ясли	280	2,8	2,0	3,5	4,0	4,5	
		140	2,4	2,0	3,5	4,0	4,0	
		190	2,6	2,0	3,5	4,0	4,5	
3.	Комплекс детского дома	250	3,0	2,0	3,5	4,5	5,0	
		учащихся						
4.	Общеобразовательная	1300	8,8	3,5	5,0	6,0	9,0	
	школа	900	7,0	3,0	5,0	5,5	9,0	
5.	Школа-интернат	360	20,0	4,5	7,5	8,0	11,0	
6.	Блок начальных классов	360	2,0	2,05	3,0	3,5	5,0	
	для пристроек	450	3,0	2,0	3,0	4,5	5,0	
7.	Лицеи гимназии	500	4,5	3,0	3,5	5,0	6,5	
5.4. Объекты культурно-просветительского и зрелищного назначения
№ п/п	Наименование объекта	Мощность объекта	Нормы проектирования в месяцах для стадий	
		В натуральных показателях	тыс. кв. м общей площади	ЭП ТЭО	П	Р	РП	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		посадочных мест						
1.	Клубы общего профиля	500	2,6	2,0	3,0	3,5	6,0	
	со сценой	900	4,5	2,0	4,0	4,5	7,5	
		1200	6,0	2,5	4,5	5,5	8,0	
2.	Кинотеатры	300	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	
		500	1,6	2,0	3,0	3,5	5,0	
		800	2,3	2,0	3,5	4,0	6,0	
3.	Киноконцертные залы	1000	3,5	2,0	4,0	5,0	8,0	
		1200	3,8	2,0	4,5	5,5	8,5	
4.	Театры	400	1,8	2,0	3,5	4,5	6,0	
		600	2,6	2,0	4,0	5,5	6,5	
		800	3,2	2,0	4,5	5,5	8,0	
		1000	3,9	2,5	5,0	6,0	9,0	
		тыс. томов						
5.	Библиотеки	75	0,9	2,0	2,5	3,0	3,5	
		100	1,1	2,0	3,0	3,5	3,5	
		200	1,4	2,0	3,0	3,5	4,0	
		500	1,6	2,0	3,5	4,0	4,7	
		1000	3,0	2,0	3,5	4,0	5,0	
5.5. Объекты торговли и общественного питания
№ п/п	Наименование объекта	Мощность объекта	Нормы проектирования в месяцах для стадий	
		В натуральных показателях	тыс. кв. м общей площади	ЭП ТЭО	П	Р	РП	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		торговая площадь						
1.	Промтоварный магазин	1000	2,2	2,5	5,0	5,5	6,0	
		2000	3,8	3,5	5,0	5,5	7,5	
		5000	8,5	4,0	7,0	7,5	10,5	
2.	Продовольственный	200	1,2	2,0	3,0	3,5	5,5	
	магазин	300	1,4	2,0	3,0	3,6	6,0	
		500	1,6	2,0	3,5	4,1	6,5	
		1000	2,5	2,5	3,5	5,0	7,5	
		торговых мест						
3.	Крытый рынок	100	0,5	2,0	2,0	2,5	3,0	
		200	1,0	2,0	3,0	3,5	4,5	
4.	Рынок (открытый)	100	0,5	2,0	2,0	2,5	3,5	
		200	1,0	2,0	3,0	3,5	4,5	
		300	1,5	2,5	3,5	4,0	5,0	
		посадочных мест						
5.	Рестораны	100	1,2	2,0	3,0	3,5	5,0	
		200	2,1	2,5	3,0	4,0	6,0	
		500	3,3	3,0	4,5	5,0	6,5	
		рабочих мест						
6.	Аптеки	30	1,3	2,0	3,0	3,5	4,5	
		50	1,5	2,0	3,5	4,0	5,0	
		посадочных мест						
7.	Кафе	500	0,4	2,0	2,0	2,0	3,0	
		100	0,6	2,0	2,5	2,5	3,0	
		150	0,8	2,0	3,0	3,0	3,0	
5.6. Объекты бытового и коммунального назначения
№ п/п	Наименование объекта	Мощность объекта	Нормы проектирования в месяцах для стадий	
		В натуральных показателях	тыс. кв. м общей площади	ЭП ТЭО	П	Р	РП	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		тонн белья в смену						
1.	Химчистки	0,6	1,3	2,0	3,0	3,5	4,5	
		1,0	1,6	2,0	3,0	3,5	4,7	
2.	Прачечные	1,0	2,0	2,5	3,0	3,5	5,5	
		3,0	4,5	3,0	4,0	5,0	6,2	
		5,0	7,5	3,5	5,0	6,0	7,3	
3.	Прачечные-химчистки	0,4	1,0	2,0	2,5	3,0	4,5	
		0,6	1,2	2,0	2,5	3,0	4,8	
		0,8	1,5	2,0	3,0	3,5	5,4	
		мест						
4. 	Бани	50	0,4	2,0	2,0	3,0	4,5	
		100	0,7	2,0	2,5	4,5	4,5	
5.	Сауна с бассейном и	10	0,1	1,0	1,0	1,2	1,5	
	комнатой отдыха	20	0,15	1,2	1,5	1,7	2,0	
6.	Фотоателье	-	0,1	1,0	1,0	1,2	1,5	
		мест						
7.	Гаражи-стоянки							
	- многоэтажные	100	2,0	3,0	4,5	5,0	5,7	
	надземные	300	6,0	4,0	5,5	7,5	10,0	
		500	10,0	4,0	6,5	8,5	12,0	
	- подземные	100	2,0	3,5	5,5	6,0	6,8	
	многоэтажные	300	6,0	4,0	5,5	8,5	11,6	
		500	10,0	5,0	7,0	9,0	12,7	
8.	Мастерские срочного ремонта	-	0,2	1,5	1,5	2,0	2,5	
5.7. Объекты учреждений здравоохранения
№ п/п	Наименование объекта	Мощность объекта	Нормы проектирования в месяцах для стадий	
		В натуральных показателях	тыс. кв. м общей площади	ЭП ТЭО	П	Р	РП	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		посещения						
1.	Поликлиники							
	- детская	300	6,6	3,7	4,5	5,6	8,0	
		500	8,0	4,2	5,0	6,0	9,0	
		800	10,8	5,0	6,0	8,0	11,6	
	- взрослая	800	6,3	3,3	4,0	5,0	7,0	
		1000	8,0	4,1	5,0	6,5	9,0	
		1400	8,5	4,3	5,5	7,0	9,0	
		койко-мест						
2.	Больницы							
	- детская	150	7,5	4,5	5,5	6,5	9,5	
		300	14,0	4,6	6,0	7,5	12,0	
		500	22,0	5,8	7,0	8,3	12,5	
	- взрослая	150	9,0	4,5	5,8	7,0	9,8	
		300	15,0	5,0	6,3	7,5	11,0	
		500	24,0	5,5	6,8	8,0	11,8	
3.	Диспансеры							
	- коордилогический	240	13,2	5,8	7,5	8,3	12,5	
	- онкологический с поликлиническим отделением	450	22,5	6,0	8,2	9,4	13,5	
4.	Родильные дома	130	8,5	4,3	5,0	6,5	9,5	
		250	13,5	4,6	5,5	7,0	10,5	
5.	Лечебные корпуса для расширения больницы							
	- терапевтические	60	3,6	3,0	3,6	3,9	5,0	
		120	7,0	3,6	4,0	5,3	7,8	
	- хирургические	150	9,0	3,8	4,5	6,0	8,2	
		240	14,0	4,4	5,0	6,5	9,6	
	- детский инфекционный	150	7,5	4,5	5,0	6,5	8,0	
5.8. Объекты физкультурно-спортивного назначения
№ п/п	Наименование объекта	Мощность объекта	Нормы проектирования в месяцах для стадий	
		В натуральных показателях	тыс. кв. м общей площади	ЭП ТЭО	П	Р	РП	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		площадь спортивного зала м2						
1.	Крытые спортивные	450	1,3	2,0	2,5	3,5	4,6	
	корпуса (однозальные)	650	1,8	2,0	3,0	4,5	5,5	
		1000	2,8	2,2	3,5	4,8	6,5	
2.	Многозальные спортивные корпуса							
	- двухзальные	430	2,7	2,3	4,0	5,0	6,5	
		380						
	- трехзальные	180	3,0	2,5	4,2	5,5	7,0	
		300						
		540						
		площадь зеркала воды м2						
3.	Бассейны крытые с	220	1,1	2,0	3,6	4,3	5,3	
	ваннами	400	1,9	2,3	4,2	5,1	7,0	
		1000	4,8	3,2	5,0	6,0	8,5	
4.	Физкультурно-	-	5,0	3,0	4,8	6,0	8,5	
	оздоровительный		6,0	3,5	5,6	6,9	9,5	
	комплекс (ФОК)		7,0	3,5	6,0	7,5	10,5	
5.	Крытые катки	площадь катка 1000 м2	0,5	2,0	2,0	2,5	3,5	
		количество зрителей						
6.	Стадионы	1000	10,0	2,0	3,3	3,5	4,5	
		15000	14,0	2,1	3,3	4,4	5,5	
		20000	18,0	2,4	4,4	5,0	6,5	
5.9. Объекты учреждений финансов и юстиции
№ п/п	Наименование объекта	Мощность объекта	Нормы проектирования в месяцах для стадий	
		В натуральных показателях	тыс. кв. м общей площади	ЭП ТЭО	П	Р	РП	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		рабочих мест						
1.	Районные учреждения финансирования	10	0,200	1,0	2,0	2,0	2,5	
	страхования (встроенные)	20	0,350	1,5	2,5	2,5	3,0	
2.	Банки сбербанки	10	0,25	1,0	2,0	2,0	2,5	
	(встроенные)	30	0,6	1,5	2,5	2,5	3,0	
		50	0,75	2,0	2,5	3,0	3,5	
3.	Банки (отдельно	50	0,75	2,0	3,0	3,0	4,5	
	стоящие)	100	1,5	2,5	3,5	5,0	6,0	
		200	3,0	3,5	4,5	6,0	7,0	
4.	Офисные помещения	50	0,6	2,0	2,5	3,5	4,0	
	(отдельно стоящие)	100	1,2	2,0	3,0	4,0	5,0	
		200	2,6	3,5	4,5	5,5	6,5	
5.	Районные отделения милиции (отдельно стоящие)	-	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	
		рабочих мест						
6.	Здания судов	10	0,3	1,0	2,0	2,0	2,5	
	прокуратуры	50	1,2	2,0	3,0	3,0	5,0	

6. Объекты коммунального хозяйства
№ п/п	Наименование объекта	Мощность объекта	Нормы проектирования в месяцах для стадий	
		В натуральных показателях	тыс. кв. м общей площади	ЭП ТЭО	П	Р	РП	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		количество заправок в сутки						
1.	Автозаправочные	250	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	
	станции	500	1,0	1,5	2,2	2,5	3,6	
		750	1,3	2,0	2,5	3,0	4,2	
		1000	1,6	2,2	2,6	3,3	5,0	
		число постов						
2.	Станции технического	10	0,5	1,5	2,5	3,0	4,0	
	обслуживания	25	1,0	2,2	3,0	3,5	5,0	
	автомобилей	30	1,2	2,4	3,5	4,0	5,5	
		количество выездов						
3.	Пожарное депо	8	3,0	2,5	3,5	4,0	6,5	
		количество номеров						
4.	Районная АТС	23-30 тыс.	5,0	3,0	4,5	5,0	6,6	
		тонн/сут						
5.	Пекарни	2,4	0,5	2,5	3,0	3,5	5,0	
6.1. Инженерные сети и сооружения
№ п/п	Наименование объекта	Единица измерения	Нормы проектирования в месяцах для стадий	
			ЭП ТЭО	П	Р	РП	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Водопроводные сети диаметром	1000 п. м.					
	до 600 мм		2,0	3,0	3,5	4,0	
	до 1000 мм		3,0	4,0	4,0	4,8	
	более 1000 мм		3,5	4,0	4,5	5,4	
2.	Газопроводы диаметром	1000 п. м.					
	до 300 мм		1,5	2,0	2,5	3,5	
	до 600 мм		2,0	2,5	3,0	4,0	
	более 600 мм		2,5	3,0	3,5	4,5	
3.	Канализационные сети диаметром	1000 п. м.					
	до 600 мм		2,0	2,5	3,0	4,0	
	до 1500 мм		3,5	4,0	4,5	5,5	
	более 1500 мм		5,0	5,5	6,0	7,0	
4.	Тепловые сети диаметром	1000 п. м.					
	до 400 мм		3,0	4,0	4,5	5,0	
	до 1000 мм		4,0	5,0	6,0	7,0	
	более 1000 мм		5,0	6,0	7,0	9,0	
5.	Электрические кабели	1000 п. м.					
	до 10 кв.		1,0	1,0	1,5	2,0	
6.	Сети связи	1000 п. м.	1,0	1,0	1,5	2,0	
7.	Коммуникационные тоннели сечением	1000 п. м.					
	до 10 кв. м		3,0	4,0	5,0	8,0	
	более 10 кв. м		4,0	5,0	6,5	10,0	
8.	Щитовые тоннели диаметром	1000 п. м.					
	до 26 м		3,5	4,0	4,7	6,5	
	до 40 м		4,5	5,5	6,5	8,0	
	более 40 м		5,0	6,0	7,0	8,5	
9.	Городские дороги	1000 п. м.					
	I категории сложности		1,5	2,0	2,5	3,0	
	II категории сложности		3,0	4,0	5,0	6,0	
	III категории сложности		4,0	5,0	6,5	8,0	
10.	Набережные	1000 п. м.	4,0	5,0	5,5	6,5	
11.	Городские мосты путепроводы эстакады	1000 кв. м	2,5	3,0	4,0	5,5	
12.	Транспортные тоннели	1000 кв. м	2,5	3,0	4,0	5,5	
13.	Подземные пешеходные переходы	1000 кв. м	4,0	5,0	6,0	8,0	
14.	Пруды и водоемы	1 га	2,5	3,0	4,0	5,0	
15.	Очистные сооружения поверхностного стока расход	объект					
	до 01 куб. м/сек		3,0	3,5	4,0	5,5	
	до 05 куб. м/сек		4,0	4,5	5,0	7,0	
	свыше 05 куб. м/сек		4,5	5,00	5,5	8,5	
16.	Электрозащита от коррозии	объект					
	1 установка					1,0	
	2 установки					1,5	
	более 3 установок					2,0	
Примечание к таблице 6
Инженерные сети и сооружения
1. Сроки продолжительности проектирования, определенные по таблице 6, не учитывают время на предпроектные работы: составление эскиза, получение геоподосновы в МГГТ, получение технических условий и т.п., а также время на согласование проектной документации.
2. При протяженности инженерных сетей и дорог, не кратной 1000 п.м., продолжительность проектирования определяется следующим образом:
при протяженности инженерных сетей и дорог менее 1000 п.м. принимаются значения для 1000 п.м.
При протяженности сетей и дорог более 2000 п.м. вводится понижающий коэффициент К=0,8, более 5000 п.м. - К=0,7.
3. При проектировании инженерных сетей и сооружений в центральной части города, в исторической среде, в зоне охраняемого ландшафта, в затесненных условиях при наличии в зоне строительства действующих и перекладываемых коммуникаций, других осложняющих факторов продолжительность проектирования определяется с коэффициентом К=1,2.
4. В таблице принята классификация городских дорог по категориям сложности по следующим признакам:
I категория (простые) - городские дороги шириной менее 15 м, без перекладки подземных коммуникаций;
II категория (сложные) - городские дороги шириной более 15 м, при наличии контактной сети, светофоров, с перекладкой коммуникаций, вырубкой зеленых насаждении;
III категория (очень сложные) - городские дороги с подземными пешеходными переходами, развязками к разных уровнях, перекладкой крупных коммуникаций и т. п.
5. Продолжительность проектирования комплексного проекта принимать с учетом совмещения по времени проектирования отдельных сооружений, входящих в комплекс.
Сравнительные данные норм продолжительности проектирования
№ п/п	Наименование объекта	Мощность тыс. м2 общей площади	Нормативная продолжительность месяцев на стадии РП	
			старые	новые	
1	2	3	4	5	
1.	Многоэтажная застройка	до 100,0	130	95	
2.	Жилой дом 16 эт. (панельный)		80	8,5	
3.	Детский сад-ясли на 280 мест	28	7,0	4,5	
4.	Продовольственный магазин торговой площадью 300 м2	1,4	6,5	8,0	
5.	Больницы на 300 койко-мест взрослая	14,0	16,0	120	
6.	Банки, отдельно стоящие	до 1000	10,0	6,0	
7.	Ресторан на 100 посадочных мест	0,5	60	5,0	
8.	Прокладка водопровода d=600 мм	1,0 км	5,3	4,1	
Номенклатура объектов приведена в соответствие с потребностями текущего времени.