ФОРМА № 4	
 Наименование стройки - 3-я очередь строительства ЗСД.Участок от транспортной развязки на перенсечении с Богатырским проспектом до КАД	
 Объект Путепровод через КАД на ПК309+47(Дл.143,1м)	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-05-3к	
 на Промежуточные опоры	
 	
 Основание	Сметная стоимость - 	11207,510 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	17927,00 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	237,624 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г. 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 Раздел 1. 	
 1	ТЕР05-01-078-03	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1700 мм глубиной до 30 метров агрегатами типа "Bauer BG25", "Junttan РM26" в грунтах группы: 3	758	8850,86	6629,86	6708952	46943	5025434	5,21	3949	
 	(501) 		1 м3	61,93	74,26			56289	4,61	3494	
 2	ТЕР05-01-078-01	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1700 мм глубиной до 30 метров агрегатами типа "Bauer BG25", "Junttan РM26" в грунтах группы: 1	436	6492,58	4505,35	2830765	17484	1964333	3,34	1456	
 	(501) 	V=1194-758	1 м3	40,1	57,82			25210	3,57	1557	
 3	ССЦ01.2000 Табл.8-1	Расстояние перевозки - от 0,1 до 1 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 8    13,44/2,44=5,51	2071,8	5,51	5,51	11416	0	11416		
 		V=1151*1,8	тонн							
 4	ТЕР30-01-020-02	Сооружение монолитных бетонных опор при подаче бетона на суше: с одновременной облицовкой МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б СТОЙКИ	6,325	12999,86	5565,78	82224	34995	35204	492,68	3116	
 	(24) 		100 м3	5532,8	751,57			4754	49,87	315	
 4.1	[401-0011]	Бетон гидротехнический	648,3125	674		436963		
 			м3					
 5	ТЕР30-01-022-01	Армирование опор искусственных сооружений	55,781	3090,87	1543,05	172412	37127	86073	53,59	2989	
 	(24) 	V=39,97+1,518+6,45+7,843	1 т	665,58	146,62			8179	9,28	518	
 6	[204-9172]	Комплекты арматурной заготовки из стали класса А-III	41,488	8270	0	343106		
 		V=39,97+1,518	т					
 7	[204-9173]	Комплекты арматурной заготовки из стали класса А-I	6,45	6600	0	42570		
 			т					
 8	[101-1134]	Прокат холоднокатаный тонколистовой толщиной 3,9 мм из стали углеродистой обыкновенного качества	7,843	6900	0	54117		
 			т					
 9	ТЕР30-01-024-01	Устройство из монолитного железобетона: подферменных площадок и прокладных рядов на суше	0,0688	21706,97	8243,33	1493	461	567	536,8	37	
 	(24) 		100 м3	6704,63	1156,84			80	75,03	5	
 10	[401-0011]	Бетон тяжелый, класс В30 (М400)	7,1552	674	0	4823		
 		V=0,0688*104	м3					
 11	[204-9172]	Комплекты арматурной заготовки из стали класса А-III	0,619	8270	0	5119		
 			т					
 12	ТЕР30-08-040-01	Окраска железобетонных лицевых поверхностей опор за 2 раза	11,083	1586,95	43,69	17588	2553	484	18,44	204	
 	(24) 		100 м2	230,32	9,93			110	0,82	9	
 13	ТЕР30-08-040-02	Устройство подмостей для окраски	11,083	1281,25	311,17	14200	2960	3449	22,35	248	
 	(24) 		100 м2	267,08	43,25			479	2,74	30	
 ИТОГО:	10725748	142523	7126960	11999	
 			95101	5928	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	142523	1	142523	
 Машины и механизмы	7126960	1	7126960	
 Материалы	3457356	1	3457356	
 Итого		10726839	
 Накладные расходы (24 - Мосты и трубы)	(78096+13602)*1,1	110%	100868	
 Сметная прибыль (24 - Мосты и трубы)	(78096+13602)*0,8	80%	73358	
 Накладные расходы (501 - Свайные работы)	(64427+81499)*1,3	130%	189704	
 Сметная прибыль (501 - Свайные работы)	(64427+81499)*0,8	80%	116741	
 Итого по разделу 1 в ценах 2000г.		11207510	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		11207510	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ