СНиП 3.01.04-87

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.
Основные положения 

Дата введения 1988-01-01 

РАЗРАБОТАНЫ Управлением стандартизации и технических норм в строительстве с участием ЦНИИОМТП Госстроя СССР, Сводного отдела капитальных вложений Госплана СССР, Технического управления Стройбанка СССР, Планово-экономического управления Госбанка СССР, Управления статистики капитального строительства ЦСУ СССР и Отдела охраны труда ВЦСПС

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением стандартизации и технических норм в строительстве Госстроя СССР (А.И.Голышев, В.И.Чуев)

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного строительного комитета СССР по делам строительства от 21 апреля 1987 г. N 84

С введением в действие СНиП 3.01.04-87 утрачивает силу СНиП III-3-81 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения"

В СНиП 3.01.04-87  внесено Изменение N 1, утвержденное постановлением Госстроя СССР от 18 ноября 1987 г. N 272 и введенное в действие с 1 января 1988 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие нормы и правила устанавливают порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством (реконструкцией, расширением) объектов (предприятий, их отдельных очередей, пусковых комплексов, зданий и сооружений).

1.2. При приемке объектов в эксплуатацию следует соблюдать действующее законодательство и правила приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов со специфическими условиями производства продукции по соответствующим отраслям народного хозяйства и отраслям промышленности, утвержденные министерствами и ведомствами СССР по согласованию с Госстроем СССР, соответствующими ЦК профсоюзов и заинтересованными органами государственного надзора.

Приемка в эксплуатацию объектов производственного назначения после технического перевооружения осуществляется с учетом требований постановления Совета Министров СССР от 23 января 1981 года N 105 в порядке, установленном министерствами и ведомствами по согласованию с соответствующим ЦК профсоюза и заинтересованными органами государственного надзора.

Законченные строительством объекты системы Госагропрома СССР принимаются в эксплуатацию в порядке, установленном настоящими правилами и постановлением Совета Министров СССР от 20 марта 1986 г. N 358.

Законченные строительством индивидуальные жилые дома с надворными постройками принимаются в эксплуатацию государственными приемочными комиссиями в порядке, устанавливаемом советами министров союзных республик.

1.3.Предприятие, цех, участок, производство могут быть приняты и введены в эксплуатацию только при обеспечении на них условий труда в соответствии с требованиями техники безопасности и производственной санитарии.

1.4. Подготовленные к эксплуатации объекты, законченные строительством, в соответствии с утвержденным проектом заказчик (застройщик) должен предъявлять к приемке государственным приемочным комиссиям.

Объекты, законченные строительством, сдаваемые "под ключ", подрядчик совместно с заказчиком должен предъявлять к приемке государственным приемочным комиссиям. Указанные объекты следует принимать в эксплуатацию в порядке, установленном настоящими правилами.

1.5. До предъявления объектов государственным приемочным комиссиям рабочие комиссии, назначаемые заказчиком (застройщиком), должны проверить: соответствие объектов и смонтированного оборудования проектам, соответствие выполнения строительно-монтажных работ требованиям строительных норм и правил, результаты испытаний и комплексного опробования оборудования, подготовленность объектов к эксплуатации и выпуску продукции (оказанию услуг), включая выполнение мероприятий по обеспечению на них условий труда в соответствии с требованиями техники безопасности и производственной санитарии, защите природной среды, и только после этого принять объекты.

Результатом комплексного опробования оборудования на рабочих режимах по объектам производственного назначения должно быть начало выпуска продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом, в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период.

1.6. Отдельно стоящие здания и сооружения, встроенные или пристроенные помещения производственного и вспомогательного назначения, сооружения    (помещения)    гражданской    обороны,    входящие    в состав объекта, при необходимости ввода их в действие в процессе строительства объекта принимаются в эксплуатацию рабочими комиссиями по мере их готовности с последующим предъявлением их Государственной приемочной комиссии, принимающей объект в целом.

Рабочими комиссиями принимаются в эксплуатацию также титульные временные здания и сооружения, строительство которых осуществляется за счет средств, предусмотренных главой "Временные здания и сооружения" сводного сметного расчета стоимости строительства.

1.7. Законченные строительством объекты производственного назначения подлежат приемке в эксплуатацию государственными приемочными комиссиями только в том случае, когда они подготовлены к эксплуатации (укомплектованы эксплуатационными кадрами, обеспечены энергоресурсами, сырьем и др.), на них устранены недоделки и на установленном оборудовании начат выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом, в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период.

Опытные (экспериментальные), опытно-промышленные заводы, цехи и установки подлежат приемке в эксплуатацию в том случае, когда они подготовлены  к проведению опытов или выпуску продукции, предусмотренных проектом.

Не допускается приемка в эксплуатацию объектов производственного назначения, по которым в нарушение установленного порядка внесены изменения в состав пусковых комплексов, предусмотренных проектом.

В исключительных случаях изменения в состав пусковых комплексов может вносить орган, утвердивший проект (по проектам, утвержденным Советом Министров СССР, после предварительного рассмотрения внесенных изменений Госпланом СССР и Госстроем СССР) до назначения Государственной приемочной комиссии. При этом из состава пусковых комплексов не следует исключать здания и сооружения: санитарно-бытового назначения, обеспечивающие условия труда в соответствии с требованиями техники безопасности и производственной санитарии, эффективную очистку, обезвреживание, улавливание вредных выбросов в атмосферу, воду и почву; по переработке отходов производства; подъездные пути; линии связи, а также мелиоративные мероприятия.

Внесение изменений в состав пусковых комплексов, связанных с уточнением вводимых в действие производственных мощностей, предусмотренных планом экономического и социального развития СССР, допускается с разрешения Совета Министров СССР.

Ежегодная приемка в эксплуатацию орошаемых и осушенных земель допускается в процессе строительства оросительных и осушительных систем после осуществления строительства оросительной и осушительной сети, водохозяйственных сооружений, объектов, необходимых для нормальной эксплуатации систем, использования земель и для других работ, входящих в состав пускового комплекса. По оросительным и осушительным системам с продолжительностью строительства не более одного года и при необходимости эксплуатации земель в сельскохозяйственном производстве разрешается одна приемка части земель до полного завершения строительства в соответствии с проектом.

Приемку в эксплуатацию объектов товарного рыбоводства следует завершать до 1 ноября соответствующего года.

Приемку в эксплуатацию последнего пускового комплекса следует осуществлять одновременно с приемкой объекта в целом или его последней очереди.

1.8. Законченные строительством объекты жилищно-гражданского назначения подлежат приемке в эксплуатацию государственными приемочными комиссиями только после выполнения всех строительно-монтажных работ, благоустройства территории, обеспеченности объектов оборудованием и инвентарем в полном соответствии с утвержденными проектами, а также после устранения недоделок.

Жилые дома и общественные здания нового жилого микрорайона подлежат приемке в эксплуатацию преимущественно в виде законченного градостроительного комплекса, в котором должно быть завершено строительство учреждений и предприятий, связанных с обслуживанием населения, выполнены все работы по инженерному оборудованию, благоустройству и озеленению территории в соответствии с утвержденным проектом застройки микрорайона.

При плановом вводе объектов в эксплуатацию в I и IV кварталах, а для северной зоны РСФСР и в апреле месяце, и соблюдении нормативных сроков строительства разрешается перенос сроков выполнения отдельных видов работ согласно обязательным приложениям 6 и 7.

1.9. Многосекционные жилые дома, состоящие из четырех секций и более, могут приниматься в эксплуатацию отдельными секциями, когда это предусмотрено проектом, планом капитального строительства и титульным списком, при условии полного окончания монтажа конструкций и подключения отопления в примыкающей секции, а также завершения благоустройства территории, прилегающей к сдаваемой секции, с учетом требования п. 1.8.

Законченные строительством жилые дома, а также секции в многосекционных жилых домах, имеющие встроенные, встроенно-пристроенные, пристроенные помещения для предприятий и учреждений торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения и нужд непромышленного характера, следует принимать в эксплуатацию одновременно с указанными помещениями.

В случае, если встроенные, встроенно-пристроенные, пристроенные помещения относятся к нескольким жилым секциям, посекционную приемку следует осуществлять при условии завершения всех строительно-монтажных работ и обеспечения тепла в указанных помещениях данной секции. Приемка в эксплуатацию встроенных, встроенно-пристроенных помещений в этом случае осуществляется одновременно с приемкой последней секции.

Приемку в эксплуатацию предприятий и учреждений, размещенных во встроенных, встроенно-пристроенных, пристроенных помещениях, необходимо осуществлять по отдельному акту соответствующими государственными приемочными комиссиями.

1.10. Очистные сооружения канализации вновь строящихся, расширяемых и реконструируемых объектов подлежат приемке в эксплуатацию после гидравлических испытаний трубопроводов и емкостных сооружений, продолжительного (не менее трех суток) комплексного опробования под нагрузкой на чистой или сточной воде, а также после проверки взаимодействия в работе всех сооружений.

Примечание. Наладку технологического процесса биологической очистки сточных вод необходимо осуществлять после приемки в эксплуатацию очистных сооружений при плюсовой температуре воздуха ночью и не менее 10 °С днем не позднее следующих сроков:

Производительность очистных сооружений, тыс.  м/сут 	Предельная продолжительность наладки, мес 
	
      До  0,7         включ.
	3 	
Св. 0,7 до  10  "
	5 	
  "   10   "    40  "
	8 	
  "   40   "  130  "
	9 	
  "  130   "  175  "
	10 	
  "  175   "  280  "
	11 	
  "  280   "  350  "
	12 	
                    "  350 
     	13 	

1.11. Датой ввода объекта в эксплуатацию считается дата подписания акта Государственной приемочной комиссией.

Датой ввода в эксплуатацию объекта, принимаемого согласно п.1.6, считается дата подписания акта рабочей комиссией.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

2.1. Заказчики (застройщики) несут ответственность за своевременную подготовку к эксплуатации и выпуску продукции (оказанию услуг) вводимых в действие объектов (укомплектование их кадрами, обеспечение сырьем, энергоресурсами и др.), за проведение комплексного опробования (вхолостую и на рабочих режимах) оборудования с участием проектных, строительных и монтажных организаций, а при необходимости - и заводов - изготовителей оборудования, за наладку технологических процессов, ввод в эксплуатацию производственных мощностей и объектов в установленные сроки, выпуск продукции (оказание услуг) и освоение проектных мощностей в сроки, предусмотренные действующими нормами.

2.2. Проектные организации несут ответственность за соответствие мощностей и других технико-экономических показателей объектов, введенных в эксплуатацию, мощностям и показателям, предусмотренным проектом, и за решение вопросов, связанных с проектированием, возникающих в процессе приемки объектов в эксплуатацию и освоения их проектных мощностей.

2.3. Научно-исследовательские организации несут ответственность за соответствие выданных ими исходных данных для проектирования достижениям научно-технического прогресса в области новых технологических процессов, оборудования и материалов.

2.4. Строительно-монтажные организации несут ответственность за выполнение строительных и монтажных работ в соответствии с проектом и в установленные сроки, за надлежащее качество этих работ, проведение индивидуальных испытаний смонтированного ими оборудования, своевременное устранение недоделок, выявленных в процессе приемки строительных и монтажных работ и комплексного опробования оборудования, своевременный ввод в действие производственных мощностей и объектов.

2.5. В случае нарушения правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов председатели и члены комиссии, а также лица, понуждающие к приемке в эксплуатацию объектов с нарушением настоящих правил, привлекаются к административной, дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

3. РАБОЧИЕ КОМИССИИ, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

3.1. Рабочие комиссии назначаются решением (приказом, постановлением и др.) организации-заказчика (застройщика). Порядок и продолжительность работы рабочих комиссий определяется заказчиком (застройщиком) по согласованию с генеральным подрядчиком.

3.2.  В состав рабочих комиссий включаются представители заказчика (застройщика) - председатель комиссии, генерального подрядчика, субподрядных организаций, эксплуатационной организации, генерального проектировщика, органов государственного санитарного надзора, органов государственного пожарного надзора, Государственной инспекции по охране атмосферного воздуха при Государственном комитете СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды*, технической инспекции труда соответствующего ЦК или совета профсоюзов, профсоюзной организации заказчика или эксплуатационной организации. При приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского назначения в состав рабочих комиссий включаются архитекторы -  авторы проектов (заместители председателя).
_______________
* Для объектов производственного назначения.     

При приемке в эксплуатацию зданий, сооружений и помещений, указанных в п.1.6, к участию в работе рабочих комиссий дополнительно привлекаются представители заинтересованных организаций и органов надзора.

3.3. Рабочие комиссии создаются не позднее чем в пятидневный срок после получения письменного извещения генерального подрядчика о готовности объекта или оборудования к сдаче.

3.4. Рабочие комиссии до предъявления заказчиком Государственной комиссии к приемке в эксплуатацию объектов обязаны:

а) проверить соответствие выполненных строительно-монтажных работ, мероприятий по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмических мероприятий проектно-сметной документации, стандартам, строительным нормам и правилам производства работ с проведением в необходимых случаях контрольных испытаний конструкций;

б) произвести приемку оборудования после индивидуальных испытаний для передачи его для комплексного опробования по акту, составленному по форме, приведенной в обязательном приложении 1;

в) произвести приемку оборудования после комплексного опробования по акту, составленному по форме, приведенной в обязательном приложении 2, и принять решение о возможности предъявления его Государственной приемочной комиссии;

г) проверить отдельные конструкции, узлы зданий и сооружений и принять здания и сооружения для предъявления Государственной приемочной комиссии;

д) проверить готовность предъявляемых Государственной приемочной комиссии в эксплуатацию объектов производственного назначения к началу выпуска продукции или оказанию услуг, предусмотренных проектом, в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период, бесперебойной работе и освоению проектных мощностей в нормативные сроки, в частности, должно быть проверено укомплектование объекта эксплуатационными кадрами, обеспечение технологической документацией на производство продукции, энергоресурсами, сырьем, полуфабрикатами и комплектующими изделиями и возможность реализации продукции, также обеспеченность эксплуатационных кадров необходимыми для обслуживания санитарно-бытовыми помещениями, пунктами питания, жилыми и общественными зданиями.

По результатам проверок, указанных в подп. "а", "г", "д" настоящего пункта, рабочая комиссия должна составить акт о готовности зданий, сооружений, законченных строительством, для предъявления Государственной приемочной комиссии по форме, приведенной в обязательном приложении 3, а также подготовить сводные материалы о готовности объекта к приемке в эксплуатацию Государственной приемочной комиссией.

Здания, сооружения и помещения, указанные в п.1.6, принимаются в эксплуатацию рабочими комиссиями по акту, составленному по форме, приведенной в обязательном приложении 4, утвержденному заказчиком (застройщиком).

3.5. Генеральный подрядчик представляет рабочим комиссиям следующую документацию:

а) перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ;

б) комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ. Указанный комплект рабочих чертежей является исполнительной документацией;

в) сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ;

г) акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций (опор и пролетных строений мостов, арок, сводов, подпорных стен, несущих металлических и сборных железобетонных конструкций);

д) акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; акты об испытаниях технологических трубопроводов, внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, отопления и вентиляции, наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и дренажных устройств; акты о выполнении уплотнения (герметизации) вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен зданий в соответствии с проектом (рабочим проектом) ;

е) акты об испытаниях внутренних и наружных электроустановок и электросетей;

ж) акты об испытаниях устройств телефонизации, радиофикации, телевидения, сигнализации и автоматизации;

з) акты об испытаниях устройств, обеспечивающих взрывобезопасность, пожаробезопасность и молниезащиту;

и) акты об испытаниях прочности сцепления в кладке несущих стен каменных зданий, расположенных в сейсмических районах;

к) журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций, материалы обследований и проверок в процессе строительства органами государственного и другого надзора.

3.6. Документация, перечисленная в п.3.5, после окончания работы рабочей комиссии должна быть передана заказчику (застройщику) .

4. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИЕМОЧНЫЕ КОМИССИИ, ИХ ПРАВА, 
ОБЯЗАННОСТИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ 

4.1. Приемка в эксплуатацию уникальных и особо важных объектов производственного назначения, включая атомные электростанции и их очереди, производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми Советом Министров СССР по представлению министерств и ведомств СССР и советов министров союзных республик. Перечень таких объектов определяется в годовых планах экономического и социального развития СССР.

4.2. Приемка в эксплуатацию объектов производственного назначения (кроме указанных в п.4.1) сметной стоимостью 4 млн. руб. и выше, а также экспериментальных объектов независимо от их сметной стоимости производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми:

министерствами и ведомствами СССР - по объектам, входящим в их систему, если капитальные вложения на строительство объектов выделялись этим министерствам и ведомствам СССР;

советами министров союзных республик - по объектам республиканских и союзно-республиканских министерств и ведомств союзных республик и исполкомов Советов народных депутатов, если капитальные вложения на строительство объектов выделялись советам министров союзных республик.

4.3. Приемка в эксплуатацию объектов производственного назначения сметной стоимостью до 4 млн. руб. производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми в порядке, устанавливаемом:

министерствами и ведомствами СССР - по объектам, входящим в их систему, если капитальные вложения на строительство объектов выделялись этим министерствам и ведомствам СССР;

советами министров союзных республик - по объектам республиканских и союзно-республиканских министерств и ведомств союзных республик и исполкомов Советов народных депутатов, если капитальные вложения на строительство объектов выделялись советам министров союзных республик.

4.4. Приемка в эксплуатацию водохозяйственных сооружений, оросительных и осушительных систем, объектов, необходимых для нормальной эксплуатации этих систем, использования земель, а также для новых совхозов на этих землях, сметной стоимостью 4 млн. руб. и выше (кроме указанных в п.4.1) производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми:

советами министров союзных республик, если капитальные вложения на строительство объектов выделялись советам министров союзных республик;

советами министров союзных республик по согласованию с Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР, если капитальные вложения на строительство объектов выделялись этому министерству.

4.5. Приемка в эксплуатацию оросительных и осушительных систем, водохозяйственных сооружений, объектов, необходимых для нормальной эксплуатации систем и использования земель, сметной стоимостью до 4 млн. руб. производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми в порядке, устанавливаемом:

советами министров союзных республик, если капитальные вложения на строительство объектов выделялись советам министров союзных республик;

советами министров союзных республик по согласованию с Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР, если капитальные вложения на строительство объектов выделялись этому министерству.

4.6. Приемка в эксплуатацию орошаемых и осушенных земель ежегодно в процессе строительства оросительных и осушительных систем (указанных в пп.4.4 и 4.5), а также части указанных земель при продолжительности строительства объекта до одного года производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми в порядке, устанавливаемом советами министров союзных республик.

4.7. Приемка в эксплуатацию объектов производственного назначения, построенных на средства межхозяйственных предприятий (организаций) в сельском хозяйстве, а также колхозов, производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми в порядке, устанавливаемом советами министров союзных республик, а объектов производственного назначения, построенных на средства других кооперативных и иных общественных организаций, - государственными приемочными комиссиями, назначаемыми в порядке, устанавливаемом центральными органами кооперативных и других общественных организаций.

4.8. Приемка в эксплуатацию объектов, общих для группы предприятий, производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми министерствами и ведомствами СССР и советами министров союзных республик, в ведении которых находятся головные застройщики данных объектов, в порядке, указанном в пп.4.2 и 4.3.

4.9. Приемка в эксплуатацию пусковых комплексов, входящих в состав объекта, производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми в порядке, установленном настоящими правилами для приемки объекта в целом.

4.10. Приемка в эксплуатацию уникальных и особо важных объектов жилищно-гражданского назначения производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми Советом Министров СССР по представлению министерств и ведомств СССР и советов министров союзных республик или советами министров союзных республик по представлению министерств и ведомств союзных республик, советов министров автономных республик, исполкомов Советов народных депутатов автономных областей и автономных округов и исполкомов краевых и областных Советов народных депутатов.

Перечень таких объектов предусматривается в годовых планах экономического и социального развития СССР и союзных республик.

4.11. Приемка в эксплуатацию жилых домов, общежитий, зданий детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, независимо от их ведомственной принадлежности, а также всех объектов жилищно-гражданского назначения, которые построены на средства межхозяйственных предприятий (организаций) в сельском хозяйстве, а также колхозов, других кооперативных и иных общественных организаций или заказчиками (застройщиками) которых являются исполкомы районных, городских или районных в городах Советов народных депутатов, производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми исполкомами районных, городских или районных в городах Советов народных депутатов (кроме объектов, указанных в п.4.10).

4.12. Приемка в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского назначения, кроме объектов, указанных в пп.4.10 и 4.11, а также всех объектов жилищно-гражданского назначения, расположенных в полосе отвода железных дорог вне городов, поселков и курортных зон, производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми в порядке, устанавливаемом соответствующими министерствами и ведомствами СССР и советами министров союзных республик.

Государственные приемочные комиссии по приемке в эксплуатацию указанных объектов могут назначаться также исполкомами районных, городских и районных в городах Советов народных депутатов с согласия министерств и ведомств -  заказчиков (застройщиков) этих объектов.

4.13. В состав государственных приемочных комиссий при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения включаются: представители заказчика (застройщика), эксплуатационной организации, генерального подрядчика, исполкома районного (городского) Совета народных депутатов, генерального проектировщика, органов государственного санитарного надзора, органов государственного пожарного надзора, Государственной инспекции по охране атмосферного воздуха при Государственном комитете СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды, органов по регулированию использования и охране вод системы Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР, технической инспекции труда соответствующего ЦК или совета профсоюзов, профсоюзной организации заказчика (застройщика) или эксплуатационной организации и финансирующего банка.

В состав указанных государственных приемочных комиссий также включаются при приемке:

магистральных нефтепродуктопроводов и газопроводов, а также объектов, подконтрольных органам Госгортехнадзора СССР, - представители этих органов;

объектов, подконтрольных органам государственного газового надзора Министерства газовой промышленности СССР, - представители этих органов;

объектов со сложным или уникальным технологическим оборудованием - представители заводов - изготовителей этого технологического оборудования и монтажных организаций;

объектов, имеющих железнодорожные подъездные пути, -  представители организаций Министерства путей сообщений СССР;

оросительных и осушительных систем, рекультивированных земель, защитных лесонасаждений, противоэрозионных гидротехнических сооружений и других объектов, сооружаемых в целях повышения плодородия и охраны земель, - представители органов государственного контроля за использованием земель и других органов Госагропрома СССР, а также представители хозяйств-землепользователей;

объектов, деятельность которых влияет на состояние и воспроизводство лесов, - представители органов Государственного комитета СССР по лесному хозяйству;

объектов, подконтрольных организациям и учреждениям государственной ветеринарии, -  представители этих организаций и учреждений;

автомобильных дорог -  представители Государственной автомобильной инспекции;

объектов, деятельность которых влияет на состояние и воспроизводство рыбных запасов и живых ресурсов континентального шельфа СССР и экономической зоны СССР, - представители органов рыбоохраны Министерства рыбного хозяйства СССР;

газоочистных и пылеулавливающих установок - представители органов Государственной инспекции по контролю за работой газоочистных и пылеулавливающих установок Министерства химического и нефтяного машиностроения СССР;

объектов со встроенными сооружениями (помещениями) гражданской обороны или отдельно стоящих сооружений гражданской обороны -  представители соответствующих штабов гражданской обороны;

объектов, подконтрольных органам Госатомэнергонадзора СССР, - представители этих органов.

4.14.  В состав государственных приемочных комиссий при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского назначения включаются: представители заказчика (застройщика), эксплуатационной организации, генерального подрядчика, архитектора - автора проекта, органов государственного архитектурно-строительного контроля (в районах, где такие органы отсутствуют, - районные архитекторы), органов государственного санитарного надзора, органов государственного пожарного надзора, предприятий Министерства связи СССР и министерств связи союзных республик, профсоюзной организации заказчика (застройщика) или соответствующего совета профсоюзов.

В состав указанных государственных приемочных комиссий также включаются при приемке:

объектов, связанных с забором и сбросом вод, - представители органов по регулированию использования и охране вод системы Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР;

объектов, подконтрольных органам Госгортехнадзора СССР, - представители этих органов;

объектов с технологическим оборудованием - представители технической инспекции труда соответствующего ЦК или совета профсоюзов;

кооперативных жилых домов и других кооперативных объектов - представители правления соответствующего строительного  кооператива;

улиц, дорог и дорожных сооружений -  представители Государственной автомобильной инспекции;

объектов, предназначенных для проведения общественных мероприятий (культурно-массовых, спортивных и др.),  - представители Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию или его органов на местах;

объектов со встроенными сооружениями (помещениями) или отдельно стоящих сооружений гражданской обороны - представители соответствующих штабов гражданской обороны;

объектов жилищно-гражданского назначения, на строительство которых проекты разработаны генеральным проектировщиком, находящимся на большом расстоянии от места строительства, по решению органа, назначающего Государственную приемочную комиссию, - представитель проектной организации, расположенной в районе строительства и осуществляющей разработку проектов на строительство объектов жилищно-гражданского назначения вместо представителя генерального проектировщика (с его согласия).

4.15. Председателями государственных приемочных комиссий при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения сметной стоимостью 4 млн. руб. и выше, а также экспериментальных объектов независимо от их сметной стоимости назначаются руководящие работники министерств и ведомств-заказчиков, а также непосредственно подчиненных им предприятий, учреждений и организаций.

Председателями государственных приемочных комиссий по приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения сметной стоимостью до 4 млн. руб. назначаются руководящие работники органов, назначивших эти комиссии, а также руководящие работники предприятий, учреждений и организаций, непосредственно подчиненных этим органам.

Председателями государственных приемочных комиссий по приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского назначения назначаются руководящие работники органов, назначивших эти комиссии, а также руководящие работники предприятий, учреждений и организаций, непосредственно подчиненных этим органам. Заместителем председателя государственной приемочной комиссии назначается архитектор - автор проекта.

4.16. Государственные приемочные комиссии следует назначать заблаговременно в зависимости от характера и сложности объекта, но не позднее чем за 3 мес до установленного срока при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения и за 30 дней - объектов жилищно-гражданского назначения. При этом должны быть определены даты начала и окончания работы комиссий с учетом установленного срока ввода объектов в эксплуатацию.

Замену представителей  - членов Государственной приемочной комиссии (в случае необходимости) может производить орган, назначивший комиссию.

4.17. Заказчик представляет государственным приемочным комиссиям документацию, перечисленную в п.3.5, а также:

справку об устранении недоделок, выявленных рабочими комиссиями; 

утвержденную проектно-сметную документацию и справку об основных технико-экономических показателях объекта, принимаемого в эксплуатацию;

перечень проектных, научно-исследовательских и изыскательских организаций, участвовавших в проектировании объекта, принимаемого в эксплуатацию;

документы об отводе земельных участков, а по объектам жилищно-гражданского назначения также разрешение органов госархстройконтроля на производство строительно-монтажных работ; 

документ на специальное водопользование;

документы на геодезическую разбивочную основу для строительства, а также на геодезические работы в процессе строительства, выполненные заказчиком;

документы о геологии и гидрогеологии строительной площадки, о результатах испытания грунта и анализах грунтовых вод;

паспорта на оборудование и механизмы;

акты о приемке здании и сооружений, смонтированного оборудования, составленные рабочими комиссиями;

акты о приемке в эксплуатацию зданий, сооружений и помещений, указанных в п.1.6;

справку об обеспечении принимаемого объекта эксплуатационными кадрами и предназначенными для их обслуживания санитарно-бытовыми помещениями, пунктами питания, жилыми и общественными зданиями;

справку об обеспеченности принимаемого объекта материально-техническими ресурсами, в том числе сырьем, электроэнергией, водой, паром, газом, сжатым воздухом и др.;

справки городских эксплуатационных организаций о том, что внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечат нормальную эксплуатацию объекта и приняты ими на обслуживание;

справку о соответствии вводимых в действие мощностей (для начального периода освоения проектных мощностей) мощностям, предусмотренным проектом;

справку о фактической стоимости строительства, подписанную заказчиком и подрядчиком;

документы о разрешении на эксплуатацию объектов и оборудования, подконтрольных соответствующим органам государственного надзора, представители которых не вошли в состав Государственной приемочной комиссии;

сводные материалы рабочей комиссии о готовности объекта в целом к приемке в эксплуатацию Государственной приемочной комиссией.

4.18. Документацию, перечисленную в пп.3.5 и 4.17, после приемки объекта в эксплуатацию следует хранить у заказчика (застройщика); при наличии единого заказчика (застройщика) -  у соответствующих эксплуатационных организаций.

     4.19. Государственные приемочные комиссии обязаны: 

а) проверить устранение недоделок, выявленных рабочими комиссиями, и готовность объекта к приемке в эксплуатацию. Указанная проверка производится по программе, составленной заказчиком (застройщиком) и утвержденной Государственной приемочной комиссией;

б) дать оценку прогрессивности технологических и архитектурно-строительных решений и объекту в целом;

в) проверить соответствие вводимой в действие мощности и фактической стоимости (для заказчика) объекта производственного назначения мощности  и  сметной  стоимости  строительства  объекта,  предусмотренным утвержденным проектом, а в случае отклонений проанализировать причины их возникновения. Результаты анализа с соответствующими предложениями следует представить органам, назначившим комиссию.

4.20. Государственные приемочные комиссии в необходимых случаях назначают контрольные опробования, испытания и проверки, указанные в п.3.4.

4.21. Государственная приемочная комиссия при выявлении непригодности объекта к эксплуатации представляет мотивированное заключение об этом в орган, назначивший комиссию, и копии направляет заказчику (застройщику) и генеральному подрядчику.

Государственная приемочная комиссия представляет в этих случаях в вышестоящие организации заказчика (застройщика), подрядчика и других организаций, осуществляющих проектирование и строительство объекта, материалы для привлечения в установленном порядке к ответственности должностных лиц, допустивших некачественное выполнение проектных и (или) строительно-монтажных работ.

4.22. Полномочия Государственной приемочной комиссии прекращаются с момента утверждения акта о приемке объекта в эксплуатацию.

4.23. Приемка государственными приемочными комиссиями в эксплуатацию объектов производственного назначения не допускается без наличия в акте приемки подписей членов комиссии, являющихся представителями органов государственного санитарного надзора, технической инспекции труда соответствующего ЦК или совета профсоюзов, а также профсоюзной организации заказчика (застройщика) или эксплуатационной организации.

4.24. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов государственными приемочными комиссиями оформляется   актами,   составленными по форме,   приведенной   в обязательном   приложении 5. Акты о приемке в эксплуатацию объектов подписываются председателем и всеми членами комиссии. При наличии у отдельных членов комиссии возражений их необходимо рассмотреть до утверждения акта о приемке с участием органов, представителями которых являются эти члены комиссии.

4.25. Председатель Государственной приемочной комиссии должен представить в орган, назначивший Государственную приемочную комиссию: 

а) акт о приемке объекта в эксплуатацию;

б) краткую докладную записку к акту о приемке, содержащую выводы комиссии о подготовленности объекта к нормальной эксплуатации, обеспеченности его необходимыми для эксплуатации материально-техническими ресурсами, а также кадрами и предназначенными для их обслуживания санитарно-бытовыми помещениями, пунктами питания, жилыми и общественными зданиями;

в) предложения о дальнейшем использовании опыта проектирования и строительства вводимого в эксплуатацию объекта, а также о мерах по обеспечению освоения проектной мощности предприятия (его очереди, пускового комплекса) в сроки, установленные нормами продолжительности освоения проектных мощностей вводимых в действие предприятий;

г) предложения (в необходимых случаях) об улучшении качества применяемого оборудования, о повышении рентабельности предприятий и долговечности зданий и сооружений, а также об улучшении технологических процессов производства и других проектных решений;

д) проект решения органа, назначившего Государственную приемочную комиссию, об утверждении акта о приемке объекта в эксплуатацию.

Акт о приемке в эксплуатацию объекта и докладную записку к нему необходимо составлять в пяти экземплярах, два из которых вместе с проектом решения представлять в орган, назначивший Государственную приемочную комиссию, два - передать заказчику (застройщику) и один - генеральному подрядчику.

4.26. Рассмотрение актов о приемке в эксплуатацию объектов, принятие решений по результатам рассмотрения возражений отдельных членов комиссии и утверждение актов органами, назначившими эти комиссии, следует производить: по объектам производственного назначения - в срок не более месяца, а по объектам жилищно-гражданского назначения - в срок не более 7 дней после подписания актов.

Объекты, по которым указанные сроки истекли, считаются непринятыми и по ним назначаются государственные приемочные комиссии повторно.

4.27. Акты о приемке в эксплуатацию объектов утверждаются решением (приказом, постановлением и др.) органов, назначивших комиссии.

4.28. В отчетность о выполнении плана ввода в действие мощностей и основных фондов включаются только те объекты, акты о приемке в эксплуатацию которых утверждены органом, назначившим комиссию.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ИНОСТРАННЫМ 
ЛИЦЕНЗИЯМ, НА БАЗЕ КОМПЛЕКТНОГО ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И 
НА ОСНОВЕ КОМПЕНСАЦИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ И КОНТРАКТОВ
 С ИНОСТРАННЫМИ ФИРМАМИ 

5.1. Законченные строительством объекты до приемки их в эксплуатацию государственными приемочными комиссиями принимаются рабочими комиссиями, назначаемыми заказчиками.

В состав рабочих комиссий включаются представители заказчика (застройщика) - председатель комиссии, эксплуатационной организации, генерального подрядчика, субподрядных организаций, исполкома районного (городского) Совета народных депутатов, генерального проектировщика, органов государственного санитарного надзора, органов государственного пожарного надзора, Государственной инспекции по охране атмосферного воздуха при Государственном комитете СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды, органов по регулированию использования и охране вод системы Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР, технической инспекции труда соответствующего ЦК или совета профсоюзов, профсоюзной организации заказчика (застройщика) или эксплуатационной организации, финансирующего банка, а также представители органов надзора и организаций, которым подконтролен принимаемый объект (Госгортехнадзора СССР, органов рыбоохраны Министерства рыбного хозяйства СССР и др.) .

5.2. Приемка в эксплуатацию объектов рабочими комиссиями производится после окончания строительства в соответствии с проектом, после устранения недоделок и начала выпуска продукции на установленном оборудовании.

5.3. Акт рабочей комиссии утверждается министерством (ведомством) - заказчиком и является основанием для включения в государственную отчетность введенных в действие производственных мощностей и основных фондов по принятым объектам.

Рассмотрение и утверждение министерством (ведомством) - заказчиком актов о приемке в эксплуатацию объектов, принятых рабочими комиссиями, производится в срок не более месяца.

5.4. В период, предусмотренный контрактом для отработки технологического процесса и освоения проектной мощности, объем выпуска продукции по объекту, принятому рабочей комиссией, устанавливается заказчиком с учетом выполнения условий контракта.

5.5. Заказчики и генеральные подрядные строительные организации несут ответственность за своевременное выполнение работ, необходимость в которых возникает в период отработки технологического процесса и освоения проектной мощности объекта.

5.6. Приемка объектов государственными приемочными комиссиями производится после подписания представителями Министерства внешней торговли СССР и заказчика с иностранными фирмами-поставщиками протоколов о выполнении ими обязательств, предусмотренных контрактами.

Назначение государственных приемочных комиссий производится в порядке, установленном разд.4 настоящих правил.

5.7. При принятии иностранными фирмами-поставщиками обязательств только по поставке оборудования приемка в эксплуатацию объектов, на которых установлено это оборудование, производится государственными приемочными комиссиями в порядке, установленном настоящими правилами для объектов, сооружаемых на отечественном оборудовании.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ,
СООРУЖАЕМЫХ НА БАЗЕ СЛОЖНОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

6.1. Особые условия приемки в эксплуатацию объектов, сооружаемых на базе сложного отечественного оборудования, распространяются только на предприятия, предусмотренные в перечнях министерств и ведомств СССР и советов министров союзных республик, утвержденных ими по согласованию с ГКНТ СССР, Госстроем СССР, Госпланом СССР и министерствами СССР, осуществляющими строительно-монтажные работы.

Отнесение объектов к числу сооружаемых на базе сложного отечественного оборудования производится в порядке, изложенном в обязательном приложении 8.

6.2.Законченные строительством  (реконструкцией, расширением) объекты, сооружаемые на базе сложного отечественного оборудования, до приемки их в эксплуатацию государственными приемочными комиссиями принимаются рабочими комиссиями, назначаемыми заказчиками. 

     6.3. Состав рабочих комиссий устанавливается в соответствии с п.3.2. 

6.4. Приемка в эксплуатацию указанных объектов рабочими комиссиями производится после окончания строительства в соответствии с проектом, устранения недоделок, начала выпуска продукции на установленном оборудовании и оформляется актом.  Акты рабочих комиссий утверждаются министерствами (ведомствами) - заказчиками в месячный срок после их подписания и являются основанием для включения в государственную отчетность введенных в действие производственных мощностей и основных фондов по принятым объектам. В указанных актах устанавливаются сроки доведения мощностей предприятий до уровней, соответствующих нормам освоения проектных мощностей в начальный период.

6.5. Заказчики и генеральные подрядные строительные организации несут ответственность за своевременное выполнение работ, необходимость в которых возникает в период отработки технологического процесса и освоения проектной мощности предприятия.

6.6. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов, сооружаемых на базе сложного отечественного оборудования, государственными приемочными комиссиями производится в порядке, установленном настоящими правилами, при достижении предприятиями устойчивой работы по выпуску продукции в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период.

7.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ
ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМКОЙ

7.1. Законченные строительством объекты жилищно-гражданского назначения до предъявления их Государственной приемке принимаются приемочными комиссиями, назначаемыми заказчиком.

7.2. Состав приемочных комиссий назначается в соответствии с п.4.14 настоящего СНиП (без представителей органов государственного архитектурно-строительного контроля). Председателем приемочной комиссии назначается представитель заказчика (застройщика), а его заместителем - архитектор - автор проекта.

Приемка объектов приемочными комиссиями производится при их полной готовности в соответствии с утвержденными проектами.

7.3. Заказчик и генеральный подрядчик предъявляют приемочным комиссиям документацию, перечисленную в п.4.17 СНиП 3.01.04-87 (кроме акта о приемке в эксплуатацию зданий, сооружений и помещений, указанных в п.1.6 настоящего СНиП, справок об устранении недоделок и фактической стоимости строительства).

Акты о приемке зданий, сооружений, смонтированного оборудования и сводные материалы о готовности объекта составляются приемочными комиссиями.

7.4. Приемка объектов приемочными комиссиями оформляется актом, составленным по форме, приведенной в обязательном приложении 9.

7.5. Законченные строительством объекты после приемки их приемочными комиссиями не более чем в 5-дневный срок предъявляются заказчиком совместно с генеральным подрядчиком Государственной приемке.

7.6. Объекты, принятые Государственной приемкой, подлежат включению в государственную отчетность после утверждения акта о приемке их в эксплуатацию исполкомом местного Совета народных депутатов. Акт приемки объекта должен быть утвержден не позднее 7 дней после его подписания Государственной приемкой. Объекты, по которым акты не утверждены в установленный срок, считаются не принятыми и по ним назначается повторная приемка.

7.7. Датой ввода в эксплуатацию объекта, принимаемого Государственной приемкой, считается дата утверждения акта исполкомом местного Совета народных депутатов.

8. ЗАКРЫТИЕ СВОДНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ

8.1. После ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов, на которые имеются утвержденные отдельные проекты со сводными сметными расчетами стоимости к ним, указанные сводные сметные расчеты должны быть закрыты не позднее чем через 6 мес.

В этот же срок должны быть произведены все расчеты за смонтированное оборудование и выполненные строительно-монтажные работы, предусмотренные утвержденным проектом.

8.2. При раздельных ассигнованиях на строительство объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, предусмотренных в сметной документации, и вводе в эксплуатацию в полном объеме объектов только одного из указанных видов строительства закрытию подлежит соответствующий раздел сводки затрат.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное
 
А К Т
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
ПОСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

             
   г._____________ 		"_________"_____________________19______г. 

Рабочая комиссия, назначенная ____________________________________________

__________________________________________________________________________
(наименование организации-заказчика (застройщика), назначившей рабочую комиссию)

решением от "_________ " _____________________ 19______ г. N _________

в составе:
      
председателя - представителя заказчика (застройщика)______________________

__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:
     
генерального подрядчика __________________________________________________

_________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

 субподрядных (монтажных) организаций ____________________________________

_________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

 эксплуатационной организации ____________________________________________

_________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика ______________________________________________

_________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарного надзора ____________________________

________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного пожарного надзора ______________________________

________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

технической инспекции труда ЦК или совета профсоюзов ___________________

_______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

профсоюзной организации заказчика или эксплуатационной организации ______

________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

 других заинтересованных органов надзора и организаций __________________

________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА: 
     
1. Генеральным подрядчиком ______________________________________________

_________________________________________________________________________
          (наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке следующее оборудование: ___________________________

_________________________________________________________________________
      (перечень оборудования и его краткая техническая характеристика 

_________________________________________________________________________,
            (при необходимости перечень указывается в приложении))

смонтированное в_________________________________________________________
(наименование здания, сооружения, цеха)

входящего в состав 
__________________________________________________________________________
                (наименование предприятия, его очереди, пускового комплекса)

2. Монтажные работы выполнены _____________________________________________

___________________________________________________________________________
        (наименование монтажных организаций и их ведомственная подчиненность)

3. Проектная документация разработана______________________________________

___________________________________________________________________________
        (наименования проектных организаций и их ведомственная подчиненность,

___________________________________________________________________________
                        номера чертежей и даты их составления)

4. Дата начала монтажных работ ____________________________________________.
(месяц и год)

   Дата окончания монтажных работ _________________________________________.
(месяц и год)

   Рабочей  комиссией  произведены  следующие   дополнительные   испытания
оборудования (кроме испытаний, зафиксированных в исполнительной документации,
представленной генподрядчиком):

____________________________________________________________________________
(наименование испытаний)

 Решение рабочей комиссии:
     
   Работы по монтажу предъявленного оборудования выполнены в соответствии  с
проектом, стандартами,  строительными  нормами   и  правилами,  техническими
условиями и отвечают требованиям приемки для его комплексного опробования.
     
   Предъявленное к приемке оборудование, указанное в поз.1 настоящего акта,
считать  принятым  с "_______ " _________________ 19___ г.  для комплексного
опробования.

Председатель рабочей комиссии _______________________________________________
(подпись)

Члены рабочей комиссии:______________________________________________________

                       ______________________________________________________

                       ______________________________________________________
                                            (подписи)

Сдали                                                 Приняли
представители генерального                            представители заказчика
подрядчика и субподрядных                             (застройщика): 
организаций:
_________________________                             _________________________

_________________________                             _________________________
         
_________________________                             _________________________
      (подписи)                                             (подписи) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

А К Т
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
ПОСЛЕ КОМПЛЕКСНОГО ОПРОБОВАНИЯ

г.____________     "_________"_____________________19______г.

Рабочая комиссия, назначенная _________________________________________________

_______________________________________________________________________________
{наименование организации-заказчика (застройщика), назначившей рабочую комиссию}
 
решением от "_________ " ______________________ 19 ______ г. N __________
     
в составе: 
     
председателя - представителя заказчика (застройщика) ________________________

_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:
     
генерального подрядчика _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных (монтажных) организаций ________________________________________

_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации ________________________________________________

____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика _________________________________________________

____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарного надзора ________________________________

____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного пожарного надзора __________________________________

_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

технической инспекции труда ЦК или совета профсоюзов ________________________

_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

профсоюзной организации заказчика или эксплуатационной организации ___________

______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

других заинтересованных органов надзора и организаций ________________________

______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА: 
     
1. Оборудование: ______________________________________________________________
                  (наименование оборудования, технологической линии, установки,  

_______________________________________________________________________________,
агрегата (при необходимости указывается в приложении к акту))

смонтированное в ______________________________________________________________,
(наименование здания, сооружения, цеха)

входящего в состав ____________________________________________________________,
(наименование предприятия, его очереди, пускового комплекса)

прошло  комплексное  опробование,  включая  необходимые  пусконаладочные  работы,
совместно с коммуникациями

с "____ " _______________19_____г. по "_____ "_____________19_____г.

в течение _____________________________________________________________________
(дни или часы)

в соответствии с установленным заказчиком порядком и по ________________________

________________________________________________________________________________
(наименование документа, по которому проводилось комплексное опробование)

  2.Комплексное опробование,включая необходимые пусконаладочные работы, выполнено

________________________________________________________________________________
(наименования организации-заказчика, пусконаладочной организации)

  3.  Дефекты    проектирования,  изготовления  и  монтажа оборудования (при
необходимости указываются в приложении . . . к  акту), выявленные в процессе
комплексного опробования, а также недоделки:
________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________
устранены.

 4.В процессе комплексного опробования выполнены дополнительные работы, указанные
в приложении . . . к акту.
     
Решение рабочей комиссии:

  Оборудование,прошедшее комплексное опробование,считать готовым к  эксплуатации
и выпуску продукции (оказанию   услуг),   предусмотренной   проектом  в  объеме,
соответствующем  нормам  освоения  проектных  мощностей  в  начальный  период  и
принятым с " ____ " ______________ 19 ____ г. для  предъявления  Государственной
приемочной комиссии к приемке в эксплуатацию.

Председатель рабочей комиссии __________________________________________________
(подпись)

Члены рабочей комиссии:__________________________________________________________

                       __________________________________________________________
(подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
 Обязательное 

А К Т
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ ЗАКОНЧЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ  ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

г._____________ 			"_________"________________19______г.

Рабочая комиссия, назначенная ______________________________________________

____________________________________________________________________________
{наименование организации-заказчика (застройщика), назначившей рабочую комиссию]

решением от "_________ " ______________________ 19______ г. N ______________
     
в составе: 
     
председателя - представителя заказчика (застройщика) _______________________

____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:
     
 генерального подрядчика ____________________________________________________

____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных (монтажных) организаций _______________________________________

____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации ________________________________________________

____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

 генерального проектировщика ________________________________________________

____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарного надзора ________________________________

_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного пожарного надзора __________________________________

_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

Государственной инспекции по охране атмосферного  воздуха при Государственном
комитете СССР по гидрометеорологии и контролю  природной  среды  (по объектам
производственного назначения) _______________________________________________

_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

технической инспекции труда ЦК или совета профсоюзов _________________________

_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

 профсоюзной организации заказчика или эксплуатационной организации__________ 

_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

других заинтересованных органов надзора и организаций _______________________

_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87,

УСТАНОВИЛА:
     
1. Генеральным подрядчиком___________________________________________________

_____________________________________________________________________________
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

 предъявлено к приемке в эксплуатацию законченное строительством _____________

______________________________________________________________________________,
(наименование здания, сооружения)

входящего в состав ___________________________________________________________
(наименование объекта)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим _________

______________________________________________________________________________,
(виды работ)

и его субподрядными организациями ____________________________________________

______________________________________________________________________________,
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

выполнившими _________________________________________________________________
(виды работ)

3. Проектно-сметная  документация  на  строительство   разработана   проектными
организациями _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту___________________________________

______________________________________________________________________________
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам))

5. Проектно-сметная документация утверждена __________________________________

______________________________________________________________________________
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

"______"____________________19____г. N________________

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
     
начало работ ____________________________; окончание работ ___________________
                    (месяц и год)                              (месяц и год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация: _____________________
                                                           перечень документов

______________________________________________________________________________
          в соответствии с п.3.5 СНиП 3.01.04-87 или номер приложения к акту)

   Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
     
8. Здание, сооружение имеет следующие показатели:______________________________
                                                 (мощность, производительность,

_______________________________________________________________________________
 производственная площадь, протяженность, вместимость и т. п.)

  9.Технологические и архитектурно-строительные решения  по зданию,сооружению
характеризуются следующими данными:____________________________________________
                                       (краткие технические характеристики по 

_______________________________________________________________________________
планировке, этажности, основным материалам и конструкциям,

_______________________________________________________________________________
инженерному и технологическому оборудованию)

  10. Оборудование установлено согласно  актам о его приемке после индивидуального
испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями(перечень актов приведен в
приложении  . . . к настоящему акту) в количестве:
     
   по проекту ________________________ единиц;

   фактически ________________________ единиц.

 11.Мероприятия по охране труда,обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности,
охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные

проектом _______________________________________________________________________
(сведения о выполнении)

   Характеристика мероприятий приведена в приложении . . . к акту. 

 12. Выявленные дефекты и недоделки  должны  быть  устранены в сроки, указанные в
приложении . . . к акту.

 13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: 
     
всего _________________ тыс. руб., в том числе строительно-монтажных работ ____

____________тыс.руб., оборудования, инструмента и инвентаря ___________ тыс.руб.

 Решение рабочей комиссии

_______________________________________________________________________________
(наименование здания, сооружения)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ  от  генерального  подрядчика  и  готовым  для  предъявления
Государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии _________________________________________________
                                                     (подпись)
     
Члены рабочей комиссии:________________________________________________________

                       ________________________________________________________
                                                     (подписи)

     
Сдали                                          Приняли
представители генерального                     представители заказчика
подрядчика и субподрядных                      (застройщика): 
организаций:
_________________________                       _________________________

_________________________                       _________________________

_________________________                       _________________________
      (подписи)                                        (подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Обязательное 

УТВЕРЖДАЮ
_____________________

_____________________

_____________________

_____________________
(фамилия, имя, отчество
 и должность лица,
 утверждающего акт)

                "____"________19__г.

А К Т
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО
 СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ, ПОМЕЩЕНИЯ

г._____________ 	"_________"_____________________19_____г.

Рабочая приемочная комиссия, назначенная ______________________________________

_______________________________________________________________________________
{наименование организации-заказчика (застройщика), назначившей рабочую комиссию}

решением от "_________ " ____________________________ 19 ______ г. N___________
     
в составе: 
     
председателя - представителя заказчика (застройщика) _________________________

______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей: 
     
генерального подрядчика ______________________________________________________

______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных организаций _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации _________________________________________________

_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика __________________________________________________

_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя. отчество, должность)

органов государственного санитарного надзора _________________________________

_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

 органов государственного пожарного надзора __________________________________

_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

  Государственной инспекции по охране атмосферного воздуха при Государственном
комитете  СССР   по гидрометеорологии и контролю природной среды (по  объектам 
производственного назначения) 

____________________________________________ ________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

технической инспекции труда ЦК или совета профсоюзов _________________________

______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

профсоюзной организации заказчика или эксплуатационной организации ___________

______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

других заинтересованных органов надзора и организаций ________________________

______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87,

УСТАНОВИЛА: 
     
1. Генеральным подрядчиком____________________________________________________
(наименование организации и ее

______________________________________________________________________________
ведомственная подчиненность)

 предъявлено к приемке в эксплуатацию законченное строительством______________

______________________________________________________________________________,
(наименование здания, сооружения и помещения)

входящего в состав ___________________________________________________________
(наименование объекта)

2. Строительство произведено на основании  решения (постановления, распоряжения,

приказа) от "_____"__________________19____г. N___________________ 

_______________________________________________________________________________
(наименование органа, вынесшего решение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим __________

______________________________________________________________________________,
(виды работ)

и субподрядными организациями ________________________________________________

______________________________________________________________________________, 
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

выполнившими _________________________________________________________________
(виды работ)

4. Проектно-сметная  документация   на  строительство   разработана   проектными

организациями _________________________________________________________________
(наименования проектных организаций и их ведомственная подчиненность)

5. Строительство осуществлялось по проекту ___________________________________

______________________________________________________________________________
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам))

6. Проектно-сметная документация утверждена __________________________________
                                                    (наименование органа,
______________________________________________________________________________
утвердившего проектно-сметную документацию на объект в целом)

"______"___________________19____г. 	N ___________________

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ____________________________ ; окончание работ _________________
                      (месяц и год)                              (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес:

по норме или по ПОС__________________________________________________________, 

фактически __________________________________________________________________.

8. Рабочей комиссии представлена следующая документация: _____________________
                                                           (перечень документов

______________________________________________________________________________
 в соответствии с п.3.5 СНиП 3.01.04-87 или номер приложения к акту)

 9.Предъявленное к приемке в эксплуатацию здание, сооружение, помещение имеет

следующие основные показатели: _______________________________________________
                                          (мощность, производительность,

______________________________________________________________________________
 производственная площадь, протяженность, вместимость и т. п.)

 10.Технологические и архитектурно-строительные  решения  по  зданию, сооружению,

помещению характеризуются следующими данными: _________________________________
                                             (краткие технические характеристики

_______________________________________________________________________________
    по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и 

_______________________________________________________________________________
технологическому оборудованию) 

 11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального
испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов 
приведен в приложении . . . к настоящему акту) в количестве:

 по проекту _______________единиц;

 фактически ______________ единиц.

 12.Мероприятия по охране труда,обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности,
охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
проектом _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
(сведения о выполнении)

  Характеристика мероприятий приведена в приложении . . . к акту.

 13.Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации,
теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения  и  связи  обеспечивают нормальную
эксплуатацию здания,сооружения, помещения и приняты  городскими эксплуатационными
организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в
приложении . . . к акту.

 14. Недоделки и дефекты устранены.

 15.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

    всего __________________ тыс. руб., в том числе:

    строительно-монтажных работ ______________________ тыс. руб., 

    оборудования, инструмента и инвентаря _________________________ тыс. руб.

 16.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ____________

тыс. руб., в том числе: стоимость строительно-монтажных работ ________________

тыс. руб., стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ___________тыс. руб.

 17.Экономический   эффект  от  внедренных  мероприятий  подрядчика, удешевляющих
строительство  на  сдаваемом  в  эксплуатацию   здании,   сооружении,   помещении
___________________тыс. руб.

 Решение рабочей комиссии 
     
Предъявленное к приемке ______________________________________________________
                              (наименование здания, сооружения, помещения)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель рабочей комиссии ________________________________________________
                                                 (подпись)

Члены рабочей комиссии:_______________________________________________________

                       _______________________________________________________
                                                 (подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Обязательное

УТВЕРЖДЕН

_______________________

_______________________
                      ( дата и номер решения
 (приказа, постановления и др.),
 фамилия, имя, отчество и
 должность лица, подписавшего решение
 (приказ, постановление и др.))

А К Т
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

от "_____"____________________19____г.  ____________________________
                                          (местонахождение объекта)

  Государственная  приемочная  комиссия, назначенная  решением   (приказом,
постановлением и др.)   от "_____"_____________________19____г.

N _________________________________________________________________________
(наименование органа, назначившего комиссию)
  в составе:

      председателя _________________________       _______________________,
                    (фамилия, имя, отчество)               (должность)

      членов комиссии - представителей:

      заказчика (застройщика)
      ________________________                     _______________________,
      (фамилия, имя, отчество)                             (должность)  

      эксплуатационной организации
      ________________________                     _______________________,
       (фамилия, имя, отчество)                            (должность)

      генерального подрядчика
      ________________________                     ________________________,
      (фамилия, имя, отчество)                             (должность)

      генерального проектировщика 

      ___________________________                 _________________________,
       (фамилия, имя, отчество)                            (должность) 

      органов государственного санитарного надзора

      __________________________                  __________________________
      (фамилия, имя, отчество)                             (должность)
 
      органов государственного пожарного надзора
      
      __________________________                  ___________________________
      (фамилия, имя, отчество)                             (должность) 

 Государственной инспекции по охране атмосферного воздуха при Государственном
комитете СССР  по  гидрометеорологии  и контролю природной среды (по объектам
производственного назначения)
      __________________________                 ____________________________
       (фамилия, имя, отчество)                            (должность) 

 исполкома  районного (городского)  Совета  народных  депутатов  (по объектам
производственного  назначения) или  органов  госархстройконтроля,   районного
архитектора (по объектам жилищно-гражданского назначения)
      __________________________                 ___________________________,
      (фамилия, имя, отчество)                            (должность)

 технической  инспекции  труда  соответствующего ЦК или совета профсоюзов (по
объектам производственного назначения)
      __________________________                  ___________________________,
       (фамилия, имя, отчество)                           (должность)

 профсоюзной организации заказчика(застройщика)или эксплуатационной организации
(по объектам производственного назначения),или профсоюзной организации заказчика
(застройщика),  или  соответствующего  совета  профсоюзов (по объектам  жилищно-
гражданского назначения)
     ___________________________                 ____________________________,
      (фамилия, имя, отчество)                             (должность)

 финансирующего банка (по объектам производственного назначения)
     ___________________________                _____________________________,
      (фамилия, имя, отчество)                              (должность)

 органов по регулированию использования и охране вод системы Минводхоза СССР (по
объектам производственного назначения)
     ___________________________                _____________________________,
      (фамилия, имя, отчество)                               (должность)

 других заинтересованных органов и организаций (согласно пп.4.13, 4.14 СНиП
3.01.04-87)
     ___________________________               ______________________________,
       (фамилия, имя, отчество)                               (должность)

 руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87,

УСТАНОВИЛА: 

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) _____________________________

________________________________________________________________________________
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

 предъявлен к приемке в эксплуатацию ___________________________________________
                                       [наименование объекта и вид строительства

________________________________________________________________________________
(новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)]
  
по адресу: _____________________________________________________________________
[область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал,

________________________________________________________________________________
 улица, номер дома (корпуса)]

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

от " _______"_________________________19____г. N _____________

________________________________________________________________________________
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ (для
объектов жилищно-гражданского назначения)

 от "_______"_________________________19____г. N_________________

_______________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком _________________________

_______________________________________________________________________________
(наименование организации и его ведомственная подчиненность)

выполнившим ___________________________________________________________________,
(виды работ)
и субподрядными организациями _________________________________________________
                                [наименования организаций и их ведомственная
   
_______________________________________________________________________________
подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе 
 
_______________________________________________________________________________
организаций свыше трех перечень их указывается в приложении... к акту)]

  4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным

проектировщиком ________________________________________________________________,
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

 выполнившим ___________________________________________________________________
(наименование частей или разделов документации) 

и субподрядными организациями___________________________________________________
                                [наименования организаций, их ведомственная 

________________________________________________________________________________
 подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций

________________________________________________________________________________
свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

5. Исходные данные для проектирования выданы ___________________________________
                                           [наименования научно-исследовательских

________________________________________________________________________________
и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность,

________________________________________________________________________________
тематика исходных данных (при числе организаций 

________________________________________________________________________________
свыше трех перечень их указывается в приложении . . . к акту)]

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно

применяемому)___________________________________________________________________
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для

________________________________________________________________________________
 индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается

________________________________________________________________________________
наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена ____________________________________
                                               [наименование органа, утвердившего

________________________________________________________________________________
       (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)]

"______"_______ __________________19____г. N_______________

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _________________________; окончание работ ________________________
                    (месяц и год)                            (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес:

по норме или по ПОС _____________________ ; 

фактически ______________________________ .

  9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

_______________________________________________________________________________
(перечень документов в соответствии с п.4.17 СНиП 3.01.04-87)

  Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

  10. Предъявленный к приемке в  эксплуатацию  объект  имеет  следующие основные
показатели мощности, производительности, производственной площади,протяженности,
вместимости, объема,пропускной способности, провозной способности, число рабочих
мест и т.п.;[заполняется по всем объектам(кроме жилых домов)в единицах измерения
соответственно целевой продукции или основным видам услуг]:

Мощность,	
Единица 	По проекту 	Фактически 
	
производительность 
и т.д.	измерения 	общая 
(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
	общая 
(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди 	

  	  

       	  	  	  	

   Выпуск   продукции  (оказание  услуг), предусмотренной  проектом  в  объеме,
соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _______

______________________________________________________________________________
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели 	Единица измерения
	По 
проекту 	
Фактически 	
Общая площадь
     
 Число этажей 

Общий строительный объем

 В том числе подземной части
     
 Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений 
     	м

этаж

м

"

м 

  	По проекту 	Фактически
	
Показатели 	Число квартир 	Площадь
 квартир, м 
 	Число квартир 	Площадь 
квартир, м 	
  	  	общая 
	жилая 	  	общая 	жилая 	
Всего квартир
     
В том числе:
     
однокомнатных
     
двухкомнатных
     
трехкомнатных
     
четырехкомнатных и более 

   11. Технологические   и   архитектурно-строительные   решения   по объекту
характеризуются следующими данными: ___________________________________________
                              (краткие технические характеристики по особенностям  

_______________________________________________________________________________
   его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям,

_______________________________________________________________________________
инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении . . . к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _________

_______________________________________________________________________________________
(сведения о выполнении)

     Характеристика мероприятий приведена в приложении . . . к акту. 

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении . . . к акту.

     15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.
     
     16. Работы по озеленению,  устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям,  тротуаров,  хозяйственных,   игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ 	Единица измерения 	Объем работ 	Срок выполнения 

     

     
     17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной,  документации:
     
      всего __________________________________________________________________________ тыс. руб., 
     
в том числе:
     
строительно-монтажных работ________________________________________________________ тыс. руб.,

оборудования, инструмента и  инвентаря _______________________________________________ тыс. руб.,

     18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию____________________ тыс. руб., 
     
в том числе:
     
стоимость строительно-монтажных работ _______________________________________________ тыс. руб., 

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _______________________________________ тыс. руб.,
 
19. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте, ______________________ тыс. руб.
     
20. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических ____________________________________________________________________________
(по жилым домам не заполняется)

__________________________________________________________________________________________
     
__________________________________________________________________________________________     

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)
     
 _________________________________________________________________________________________
     
 _________________________________________________________________________________________

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке __________________________________________________________________
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии ___________________________________________
                                                       (подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии: ________________________________________________
     
                                                                                            ________________________________________________
(подписи)

   Извлечение
 из постановления Совета Министров СССР
   от 23 января 1981 г. N 105
    "О приемке в эксплуатацию законченных
 строительством объектов"

" . . . в случае нарушения правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов привлекать председателей и членов комиссий, а также лиц, вынуждающих к приемке в эксплуатацию объектов с нарушением правил, установленных настоящим постановлением, к административной, дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством".     

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Обязательное

РАБОТЫ, СРОК ИСПОЛНЕНИЯ КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ К ПЕРЕНОСУ

Республика 
(зона, район)	
Виды работ 	Предельный срок выполнения работ
	
1. РСФСР 
(северная зона, 
см. обязательное приложение 7)
     	Устройство верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок; отделка элементов фасадов зданий 
	1 сентября 	
2. РСФСР 
(кроме северной зоны) 
     
Казахская ССР
     
Украинская ССР
     
Белорусская ССР
     
Молдавская ССР
     
Латвийская ССР
     
Литовская ССР 
     
Эстонская ССР
     
Высокогорные районы
республик Закавказья и
Средней Азии 
     	Устройство верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хо- зяйственных, игровых и спортивных площадок; отделка элементов фасадов зданий 	1 июля 	

Примечания: 

1. Озеленение застраиваемых территорий выполняется в ближайший благоприятный агротехнический период, следующий за моментом ввода объекта в эксплуатацию.

2. Предельные сроки выполнения работ указаны для ближайшего благоприятного периода, следующего за моментом ввода объекта в эксплуатацию.

3. Конкретные сроки выполнения перенесенных работ устанавливаются государственными приемочными комиссиями.

4. Под термином "верхнее покрытие" понимается завершающий слой конструкции дорожной одежды (верхний слой асфальтобетонного покрытия при многослойном покрытии, слой асфальтобетона при однослойном покрытии или бетонное покрытие), устраиваемый на прочном основании (щебеночном, гравийном, тощем бетоне и подобных им).

5. Указанный порядок переносов сроков выполнения отдельных видов работ распространяется также на объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, отнесенные к объектам производственного назначения в соответствии с "Инструкцией о порядке составления периодической и годовой статистической отчетности по капитальному строительству". Часть I, ЦСУ СССР, 1986.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Обязательное
 
СЕВЕРНАЯ ЗОНА РСФСР

К северной зоне РСФСР относятся территории:

1. Европейской север: Мурманская область, Карельская АССР, Архангельская область, Коми АССР.

2. Север Западной Сибири: север Тюменской области (Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа), север Томской области (районы Александровский, Бакчарский, Верхнекетский, Каргасокский, Колпашевский, Кривошеинский, Парабельский, Молчановский, Чаинский) .

3. Север Восточной Сибири: север Красноярского края [Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский автономные округа, районы Туруханский, Енисейский, Богучанский, Кежемский, Мотыгинский], север Иркутской области (районы Катангский, Бодайбинский, Казачинско-Ленинский, Киренский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, Усть-Илимский, Усть-Кутский, Братский).

Север Бурятской АССР (районы Баунтовский, Северо-Байкальский).

Север Читинской области (районы Каларский, Тунгиро-Олекминский, Тунгокоченский).

4. Дальневосточный север: Якутская АССР, Магаданская область, север Амурской области (районы Зейский, Селемджинский), север Хабаровского края (районы Аяно-Майский, Охотский, Николаевский, им. Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканский, Ульчский), Камчатская область, север Сахалинской области (районы Охинский, Ногликский).

Кроме этого, в состав северной зоны РСФСР включаются территории островов Северного Ледовитого океана и его морей, а также Берингова и Баренцева морей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Обязательное

ГКНТ СССР         ГОССТРОЙ СССР        ГОСПЛАН СССР         СТРОЙБАНК СССР 

ОБ ОТНЕСЕНИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
К КАТЕГОРИИ СЛОЖНОГО ПРИ РЕШЕНИИ ВОПРОСА О ПРИЕМКЕ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Государственный комитет СССР по науке и технике, Госстрой СССР, Госплан СССР и Стройбанк СССР устанавливают следующие критерии оценки сложного отечественного оборудования при решении вопроса о приемке в эксплуатацию законченных строительством предприятий с применением принципиально новых, впервые осваиваемых технологических процессов производства продукции, сооружаемых в порядке, предусмотренном постановлением Совета Министров СССР от 16 июля 1985 г. N 666.

Отечественное оборудование относится к категории сложного, если его установка приводит к дополнительным затратам времени для доведения мощности предприятия до уровня, соответствующего нормам продолжительности освоения проектной мощности в начальный период, и оно отвечает следующим требованиям: включено в именные перечни оборудования, утверждаемые Советом Министров СССР и Госпланом СССР, основано на впервые применяемых конструктивных решениях и предназначено для выпуска новой, впервые осваиваемой в народном хозяйстве продукции с высокими технико-экономическими показателями.

Законченные строительством предприятия, сооруженные на базе сложного отечественного оборудования, принимаются в эксплуатацию в порядке, установленном постановлением Совета Министров СССР от 23 января 1981 г. N 105, в случае, если предприятие с аналогичным оборудованием уже принималось в эксплуатацию в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 16 июля 1985 г. N 666.

Заместитель Председателя Государственного комитета СССР по науке и технике

     М.Г.Круглов 
	Заместитель Председателя Госстроя СССР

     Л.А.Бибин 
	 Заместитель Председателя Госплана СССР

     В.М.Серов 
  	 Заместитель Председателя Правления Стройбанка СССР
     
     В.Н.Куликов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Обязательное

 УТВЕРЖДЕН
     _________________________
(дата, должность, фамилия,
_________________________
имя, отчество руководителя
_________________________
 местного Совета народных депутатов)

А К Т
О ПРИЕМКЕ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

г. ___________ 	       " ________ " _______________ 198 ___ г.

Приемочная комиссия, назначенная _____________________________________________

______________________________________________________________________________
(наименование организации, назначившей приемочную комиссию)

решением (приказом) от " _____ " _________________ 198 ___ г. N _____ 
     
в составе: 
     
председателя - представителя заказчика (застройщика) __________________________

_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей: 

генерального подрядчика _______________________________________________________

                        _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных организаций ______________________________________________________

                         ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации _________________________________________________

                             _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

архитектора - автора проекта (генерального проектировщика) ____________________

_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарного надзора __________________________________

_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

 органов государственного пожарного надзора ___________________________________

_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

технической инспекции труда ЦК или Совета профсоюзов __________________________

_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

профсоюзной организации заказчика или эксплуатационной организации ____________

_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

 предприятий Министерства связи СССР или союзной республики ___________________

_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей привлеченных организаций _______________________________________

______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87,
     
УСТАНОВИЛА: 
     
1. Генеральным подрядчиком ____________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

 предъявлено к приемке в эксплуатацию законченное строительством ______________

_______________________________________________________________________________
(наименование объекта)

2. Строительство произведено на основании решения (постановления) 

от " ____ " ____________ 198__г. N ____ _______________________________________
                                        (наименование органа, вынесшего решение)
     
в  соответствии   с  разрешением   органа  Госархстройконтроля  на производство
строительно-монтажных работ от "____"___________198__г. в сроки:

начало работ _____________________ ; окончание работ __________________________
                (месяц и год)                             (месяц и год) 

при продолжительности строительства, мес:

по норме ______________ ; фактически ___________________.

 3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком _______________________

_______________________________________________________________________________,
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

ВЫПОЛНИВШИМ ___________________________________________________________________,
(виды работ)

и субподрядными организациями __________________________________________________
(наименование организаций)

по типовому (индивидуальному) проекту, серии ___________________________________ 
                                                        (номер серии)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектной

организацией ___________________________________________________________________
(наименование организации)

и утверждена ___________________________________________________________________
(наименование организации, утвердившей проект)

5. Приемочной  комиссии   представлена   документация,   предусмотренная   п.7.3
СНиП 3.01.04-87.
     
6. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Показатели 	Единица измерения 
	По 
проекту 	Фактически 	
 Общая площадь 
     	м 	  	  	
 Число этажей 	этаж 
	  	  	
 Число секций 	секция 	
       	  	
 Всего квартир 	шт.	  
     	  	
 в том числе:  		  	
       	
   однокомнатных  	"	  	  
     	
   двухкомнатных 
     	"	  	  	
   трехкомнатных 
     	"	  	  	
   четырехкомнатных 	"
	  	  	
   пятикомнатных 	"	
       	  	
 Число мест или посещений (для школ, больниц,	место 	  
     	  	
 детских садов)		  	  
     	
 Общий строительный объем,
  в том числе 
     	м 
	  	  	
 подземной части 
     	"	  	  	
 Площадь встроенных помещений 
     	м 	  	  	

   7. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего ____ тыс. руб., в том числе строительно-монтажных работ _______ тыс. руб.

   8. На объекте выполнены работы  по  установке оборудования, предусмотренного
проектом, произведено его испытание и комплексное опробование, что обеспечивает
пожарную безопасность и взрывобезопасность объекта.

   9. Наружные коммуникации,  инженерные  сооружения   обеспечивают   нормальную 
эксплуатацию,  смонтированы,  испытаны  и  приняты  городскими эксплуатационными
организациями по актам (справкам) о приемке: 

водоснабжения от    "_____"_______________198__г. N________;

канализации от      "_____"_______________198__г. N________; 

газоснабжения от    "_____"_______________198__г. N________; 

теплоснабжения от   "_____"_______________198__г. N________; 

электроснабжения от "_____"_______________198__г. N________; 

теплового пункта от "_____"_______________198__г. N________; 

дренажей от         "_____"_______________198__г. N________; 

наружного освещения от "_____"____________198__г. N________; 

телефонизации от    "_____"_______________198__г. N________; 

радиофикации от     "_____"_______________198__г. N________; 

телевидения от      "_____"_______________198__г. N________;

ОДС от              "_____"_______________198__г. N________; 

водостоков от       "_____"_______________198__г. N________;

коллекторов от      "_____"_______________198__г. N________;

   10. Работы по озеленению, устройству  верхнего покрытия подъездных дорог к
зданиям, тротуаров,  хозяйственных, игровых и  спортивных  площадок;  отделке
элементов фасадов зданий должны быть выполнены (если перенос осуществляется в
соответствии с п.1.8 СНиП 3.01.04-87):

Виды работ 	Объем работ 	Срок выполнения 

     

     

     	  	

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

_______________________________________________________
(наименование объекта)
 
СЧИТАТЬ сооруженным в соответствии с утвержденным проектом, 

ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и 

ГОТОВЫМ для предъявления Государственной приемке  Приложение к акту:  

1. _______________________________  

2.________________________________

Председатель приемочной комиссии __________________________________________
(подпись)

Члены приемочной комиссии: ________________________________________________

                           ________________________________________________
(подписи)

Руководитель Государственной приемки ______________________________________

___________________________________________________________________________
(наименование организации, фамилия, имя, отчество)

 СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.
                                                ___________________________
                                                            (подпись)

М.П.

Текст документа сверен по: 
официальное издание 
Госстрой России - 
М.: ГУП ЦПП, 1995 

СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения (с Изменением N 1)

Вид документа: 
Постановление Госстроя СССР от 21.04.1987 N 84
СНиП от 21.04.1987 N 3.01.04-87

Принявший орган: Госстрой СССР

Статус: Действующий
     
Тип документа: Нормативно-технический документ
Дата начала действия: 01.01.1988

Опубликован: официальное издание, Госстрой России - М.: ГУП ЦПП, 1995 год
Дата редакции: 18.11.1987

Ссылается на 
О приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов (с изменениями на 30 декабря 1988 года)
Постановление Совмина СССР от 23.01.1981 N 105

Изменение N 1 СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения
Постановление Госстроя СССР от 18.11.1987 N 272
СНиП от 18.11.1987 N 3.01.04-87

СНиП III-3-81 Часть III. Правила производства и приемки работ. Глава 3. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения (с Изменениями N 1-3) (не действует на территории РФ)
Постановление Госстроя СССР от 27.11.1981 N 201
СНиП от 27.11.1981 N III-3-81

На него ссылаются 
СТО 36554501-014-2008 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения
Приказ ФГУП "НИЦ "Строительство" от 23.09.2008 N 219
СТО (Стандарт организации) от 23.09.2008 N 36554501-014-2008

СРП-2007.1 Часть 1. Рекомендации о составе, порядке разработки, согласования и утверждения научно-проектной документации на выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия. Общие положения
Письмо Минкультуры РФ от 10.12.2007 N 78-01-35/04-ДА
Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами от 10.12.2007 N СРП-2007.1

ГОСТ Р 52751-2007 Плиты из сталефибробетона для пролетных строений мостов. Технические условия
Приказ Ростехрегулирования от 24.09.2007 N 253-ст
ГОСТ Р от 24.09.2007 N 52751-2007

ТР 103-07 Технические рекомендации по устройству дорожных конструкций с применением асфальтобетона
ТР (Технические рекомендации) от 01.06.2007 N 103-07
Приказ Комплекса архитектуры, строительства, развития и реконструкции города от 01.06.2007

Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Федерации / С. А. Боголюбов, Е. А. Галиновская, Н. А. Игнатюк и [др.]; под ред. С.А.Боголюбова.
Комментарий, разъяснение, статья от 01.01.2007
М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007

Изменение N 1 ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 839-1-4-89) Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию
Приказ Ростехрегулирования от 27.12.2006 N 367-ст
ГОСТ Р от 27.12.2006 N 50776-95

МДС 12-23.2006 Временные рекомендации по технологии и организации строительства многофункциональных высотных зданий-комплексов в Москве
Приказ ФГУП "НИЦ "Строительство" от 08.06.2006 N 74
МДС от 08.06.2006 N 12-23.2006

СТО 11233753-001-2006 Системы автоматизации. Монтаж и наладка
СТО (Стандарт организации) от 05.06.2006 N 11233753-001-2006

СП 40-109-2006 Проектирование и монтаж водопроводных и канализационных сетей с применением высокопрочных труб из чугуна с шаровидным графитом
Приказ Росстроя от 26.02.2006 N 39
Свод правил (СП) от 26.02.2006 N 40-109-2006
Своды правил по проектированию и строительству

СП 41-106-2006 Проектирование и монтаж подземных трубопроводов для систем горячего водоснабжения и теплоснабжения из напорных асбестоцементных труб и муфт
Свод правил (СП) от 23.12.2005 N 41-106-2006
Письмо Росстроя от 23.12.2005
Своды правил по проектированию и строительству

Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях. / И. И.Веремеенко, Н.Г.Салищева, Е.Н.Сидоренко и др.; Отв. ред. Е.Н.Сидоренко - 5-е издание, перераб. и доп.
Комментарий, разъяснение, статья от 01.12.2005
М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006

ТР 169-05 Технические рекомендации по проектированию и монтажу каналов связи из полиэтиленовых труб с двухслойной стенкой
ТР (Технические рекомендации) от 19.07.2005 N 169-05
Приказ Комплекса архитектуры, строительства, развития и реконструкции города от 19.07.2005

ТР 170-05 Технические рекомендации на проектирование и строительство подземных сетей водоотведения из безнапорных полиэтиленовых труб с двухслойной стенкой
ТР (Технические рекомендации) от 21.04.2005 N 170-05
Приказ Комплекса архитектуры, строительства, развития и реконструкции города от 21.04.2005

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая (постатейный) / Е.Ю.Валявина, А.К.Губаева, И. А. Дроздов и др.; Отв. ред. А.П.Сергеев, Ю.К.Толстой
Комментарий, разъяснение, статья от 15.04.2005
М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005

СО 34.20.514-2005 Методические указания по эксплуатации газового хозяйства тепловых электростанций
СО от 23.03.2005 N 34.20.514-2005
Приказ Фирмы по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС от 23.03.2005
Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

ТР 162-04 Технические рекомендации по применению железобетонных труб с внутренней полиэтиленовой оболочкой
ТР (Технические рекомендации) от 05.03.2005 N 162-04
Приказ Комплекса архитектуры, строительства, развития и реконструкции города от 05.03.2005

ТСН 12-329-2004 РС(Я) Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов
Приказ министерства строительства и архитектуры Республики Саха (Якутия)  от 24.11.2004 N 154
ТСН от 24.11.2004 N 12-329-2004 Республики Саха (Якутия)
ТСН от 24.11.2004 N 12-329-2004 РС(Я)

ТСН 41-311-2004 Московской области  (ТСН АИТ-2004 МО) Автономные источники теплоснабжения
Распоряжение Минмособлстроя от 28.09.2004 N 50
ТСН от 28.09.2004 N АИТ-2004 МО
ТСН от 28.09.2004 N 41-311-2004 Московской области

ТСН 41-310-2004 Курской области Поквартирные системы теплоснабжения от теплогенераторов на газовом топливе
Постановление Правительства Курской области от 19.07.2004 N 75
ТСН от 19.07.2004 N 41-310-2004 Курской области

ТСН 12-327-2004 Новосибирской области Правила приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов на территории Новосибирской области (не действует)
Приказ Комитета архитектуры и градостроительства Новосибирской области от 15.07.2004 N 14
ТСН от 15.07.2004 N 12-327-2004 Новосибирской области

СП 40-108-2004 Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб
Письмо Госстроя России от 28.04.2004 N ЛБ-302/9
Свод правил (СП) от 28.04.2004 N 40-108-2004
Своды правил по проектированию и строительству

СП 41-106-2004 Проектирование и монтаж подземных трубопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения из асбестоцементных труб (не действует на территории РФ)
Постановление Госстроя России от 07.04.2004 N 51
Свод правил (СП) от 07.04.2004 N 41-106-2004
Своды правил по проектированию и строительству

ТСН 12-324-2004 Тюменской области Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов недвижимости на территории Тюменской области
Постановление Губернатора Тюменской области от 29.03.2004 N 11-пк
ТСН от 29.03.2004 N 12-324-2004 Тюменской области

СП 41-107-2004 Проектирование и монтаж подземных трубопроводов горячего водоснабжения из труб ПЭ-С с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке
Письмо Госстроя России от 26.03.2004 N ЛБ-2014/9
Свод правил (СП) от 26.03.2004 N 41-107-2004
Своды правил по проектированию и строительству

СП 32-105-2004 Метрополитены
Письмо Госстроя России от 23.03.2004 N ЛБ-1912/9
Свод правил (СП) от 23.03.2004 N 32-105-2004
Своды правил по проектированию и строительству

СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей
СО от 25.12.2003 N 34.04.181-2003
Приказ РАО "ЕЭС России" от 25.12.2003
Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

СО 34.49.505-2003 Правила применения огнезащитных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений энергетических предприятий
СО от 01.09.2003 N 34.49.505-2003
Приказ РАО "ЕЭС России" от 01.09.2003
Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

СНиП 32-02-2003 Метрополитены (отказано в госрегистрации)
Постановление Госстроя России от 27.06.2003 N 120
СНиП от 27.06.2003 N 32-02-2003

ГОСТ Р 52059-2003 Услуги бытовые. Услуги по ремонту и строительству жилья и других построек. Общие технические условия
Постановление Госстандарта России от 28.05.2003 N 162-ст
ГОСТ Р от 28.05.2003 N 52059-2003

СО 153-34.48.519-2002 Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4-35 кВ
СО от 27.12.2002 N 153-34.48.519-2002
РД от 24.04.2003 N 153-34.0-48.519-2002
Приказ Минсвязи России от 24.04.2003
Приказ Минэнерго России от 27.12.2002
Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

Об утверждении и введении в действие Инструкции по осуществлению надзора за строительно-монтажными работами на объектах использования атомной энергии
Приказ Госатомнадзора России от 14.04.2003 N 37
РД от 14.04.2003 N 03-33-2003

ТСН 12-322-2003 Приморского края Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов недвижимости на территории Приморского края
Постановление Администрации Приморского края от 31.03.2003 N 97
ТСН от 31.03.2003 N 12-322-2003 Приморского края

СО 153-34.48.519-2002 Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4-35 кВ
СО от 27.12.2002 N 153-34.48.519-2002
РД от 24.04.2003 N 153-34.0-48.519-2002
Приказ Минсвязи России от 24.04.2003
Приказ Минэнерго России от 27.12.2002
Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

ТР 130-02 Технические рекомендации по проектированию и бесканальной прокладке трубопроводов горячего водоснабжения из труб "ПЭ-х", теплоизолированных пенополиуретаном в гофрированной полиэтиленовой оболочке "Профлекс"
ТР (Технические рекомендации) от 09.12.2002 N 130-02
Распоряжение Департамента градостроительства города Москвы от 09.12.2002

ТСН 12-317-2002 Костромской области Приемка законченных строительством объектов на территории Костромской области
Постановление администрации Костромской области от 05.11.2002 N 422
ТСН от 05.11.2002 N 12-317-2002 Костромской области

О внесении изменений и дополнений в территориальные строительные нормы ТСН 31-304-99 НН "Приемка и ввод в эксплуатацию жилых домов и других строений, возведенных индивидуальными застройщиками для собственного пользования"
Постановление администрации Нижегородской области от 10.10.2002 N 268
ТСН от 10.10.2002 N 31-304-99 НН

ТСН 41-304-2002 Смоленской области (ТСН 41-304-2002 СмО) Поквартирные системы теплоснабжения от котлов на газовом топливе
Постановление Администрации Смоленской области от 07.10.2002 N 245
ТСН от 07.10.2002 N 41-304-2002 СмО
ТСН от 07.10.2002 N 41-304-2002 Смоленской области

ТСН 12-318-2003 Амурской области (ТСН 12-318-2003 АО) Правила приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов
Постановление Главы Администрации Амурской области от 04.09.2002 N 543
ТСН от 04.09.2002 N 12-318-2003 АО
ТСН от 04.09.2002 N 12-318-2003 Амурской области

СП 40-106-2002 Проектирование и монтаж подземных трубопроводов водоснабжения с использованием труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом
Постановление Госстроя России от 04.06.2002 N 34
Свод правил (СП) от 04.06.2002 N 40-106-2002
Своды правил по проектированию и строительству

Методические указания по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок
Приказ Минэнерго России от 03.04.2002
Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

МДК 4-04.2002 Типовая инструкция по технической эксплуатации баков-аккумуляторов горячей воды в системах коммунального теплоснабжения
Приказ Госстроя России от 22.01.2002 N 15
МДК от 22.01.2002 N 4-04.2002

РД 153-34.0-20.262-2002 Правила применения огнезащитных покрытий кабелей на энергетических предприятиях
РД от 04.01.2002 N 153-34.0-20.262-2002
СО от 04.01.2002 N 34.20.262-2002
Приказ РАО "ЕЭС России" от 04.01.2002
Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

ИД-24.2001 Организация проектирования (разъяснения по осуществлению проектной деятельности и отдельным положениям нормативных документов, регламентирующих вопросы организации проектирования)
ИД от 01.01.2002 N 24.2001

О порядке применения действующих нормативных документов по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов
Письмо Госстроя России от 05.11.2001 N ЛБ-6062/9

Руководство по проектированию автономных источников теплоснабжения
Указание Москомархитектуры от 23.10.2001 N 39

ТСН 40-304-2003 Самарской области (ТСН 40-304-2003 СО) Водоснабжение и канализация территорий малоэтажного жилищного строительства и садоводческих объединений граждан
Распоряжение Главного управления архитектуры и градостроительства Самарской области от 02.10.2001 N 348-р
ТСН от 02.10.2001 N 40-304-2003 СО
ТСН от 02.10.2001 N 40-304-2003 Самарской области

Об утверждении перечней нормативных документов по пожарной безопасности
Приказ МВД России от 21.05.2001 N 30

СП 40-104-2001 Проектирование и монтаж подземных трубопроводов водоснабжения из стеклопластиковых труб (с поправкой)
Постановление Госстроя России от 12.03.2001 N 18
Свод правил (СП) от 12.03.2001 N 40-104-2001
Своды правил по проектированию и строительству

СП 40-104-2001 Проектирование и монтаж подземных трубопроводов водоснабжения из стеклопластиковых труб (старая редакция)
Постановление Госстроя России от 12.03.2001 N 18
Свод правил (СП) от 12.03.2001 N 40-104-2001
Своды правил по проектированию и строительству

ПБ 11-401-01 Правила безопасности в газовом хозяйстве металлургических и коксохимических предприятий и производств
Постановление Госгортехнадзора России от 20.02.2001 N 9
ПБ от 20.02.2001 N 11-401-01
Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора

Рекомендации по применению эффективных материалов и технологий на основе мелкозернистых бетонов при проектировании и устройстве гидроизоляции и усилении строительных конструкций
Указание Москомархитектуры от 27.12.2000 N 56

Об утверждении Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения
Приказ Госстроя России от 13.12.2000 N 285

МДК 4-02.2001 Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения
Приказ Госстроя России от 13.12.2000 N 285
МДК от 13.12.2000 N 4-02.2001

ТСН 12-310-2000 Московской области (ТСН ПЭОН-2000 МО) Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов недвижимости на территории Московской области (не действует)
Распоряжение Минмособлстроя от 10.11.2000 N 143
ТСН от 10.11.2000 N ПЭОН-2000 МО
ТСН от 10.11.2000 N 12-310-2000 Московской области

СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования
Постановление Госстроя России от 16.08.2000 N 80
Свод правил (СП) от 16.08.2000 N 40-102-2000
Своды правил по проектированию и строительству

ТСН 12-309-2000 г.Москвы (МГСН 8.01-00) Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения
Постановление Правительства Москвы от 11.07.2000 N 530
МГСН от 11.07.2000 N 8.01-00
ТСН от 11.07.2000 N 12-309-2000 г.Москвы

ПБ 12-368-00 Правила безопасности в газовом хозяйстве (с Изменением N 1) (не действует на территории РФ)
Постановление Госгортехнадзора России от 26.05.2000 N 27
ПБ от 26.05.2000 N 12-368-00
Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора

ПБ 12-368-00 Правила безопасности в газовом хозяйстве (старая редакция)
Постановление Госгортехнадзора России от 26.05.2000 N 27
ПБ от 26.05.2000 N 12-368-00
Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора

РД 153-34.1-09.164-00 Типовая программа проведения энергетических обследований систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)
РД от 04.05.2000 N 153-34.1-09.164-00
СО от 04.05.2000 N 34.09.164-00
Приказ РАО "ЕЭС России" от 04.05.2000
Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

П 79-2000 Типовая инструкция по эксплуатации гидротехнических сооружений гидроэлектростанций (не действует)
П от 27.03.2000 N 79-2000
СО от 27.03.2000 N 34.21.542
Приказ РАО "ЕЭС России" от 27.03.2000
Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

РД 12-331-99 Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности на объектах газоснабжения (не действует на территории РФ)
Постановление Госгортехнадзора России от 14.12.1999 N 92
РД от 14.12.1999 N 12-331-99
Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора

РД 153-39.4-041-99 Правила технической эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов
Приказ Минэнерго России от 12.10.1999 N 338
РД от 12.10.1999 N 153-39.4-041-99
Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

ТСН 12-307-99 Иркутской области (ТСН 12-301-99 Иркутской области) Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения
Постановление Губернатора Иркутской области от 05.10.1999 N 536-п
ТСН от 05.10.1999 N 12-301-99 Иркутской области
ТСН от 05.10.1999 N 12-307-99 Иркутской области

СП 13-101-99 Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб
Постановление Госстроя России от 14.07.1999 N 2
Свод правил (СП) от 14.07.1999 N 13-101-99
Своды правил по проектированию и строительству

РД 153-34.1-21.523-99 Инструкция по эксплуатации железобетонных и кирпичных дымовых труб и газоходов на тепловых электростанциях
РД от 30.06.1999 N 153-34.1-21.523-99
СО от 30.06.1999 N 34.21.523-99
Приказ Департамента стратегии развития и научно-технической политики РАО "ЕЭС России" от 30.06.1999
Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

ТСН 31-304-99 НН Приемка и ввод в эксплуатацию жилых домов и других строений, возведенных индивидуальными застройщиками для собственного пользования (с Изменениями и Дополнениями)
Постановление администрации Нижегородской области от 23.06.1999 N 208
ТСН от 23.06.1999 N 31-304-99 НН

ТСН 31-304-99 НН Приемка и ввод в эксплуатацию жилых домов и других строений, возведенных индивидуальными застройщиками для собственного пользования (старая редакция)
Постановление администрации Нижегородской области от 23.06.1999 N 208
ТСН от 23.06.1999 N 31-304-99 НН

МДС 11-2.99 Рекомендации по деятельности управляющего проектом при разработке и реализации проектной и рабочей документации на строительство предприятий, зданий и сооружений
МДС от 21.05.1999 N 11-2.99
Приказ Госстроя России от 21.05.1999

СНиП 34-02-99 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки
Постановление Госстроя России от 17.05.1999 N 36
СНиП от 17.05.1999 N 34-02-99

ПБ 11-267-99 Правила безопасности в сталеплавильном производстве (не действуют на территории РФ)
Постановление Госгортехнадзора России от 08.02.1999 N 15
ПБ от 08.02.1999 N 11-267-99
Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора

РБ-005-98 Требования к сертификации строительных конструкций, важных для безопасности объектов использования атомной энергии
Постановление Госатомнадзора России от 29.12.1998 N 2
РБ от 29.12.1998 N 005-98
Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора

Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля
Приказ ГУГПС МЧС России от 28.12.1998 N 20/2.2/3144
Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора

ТР 88-98 Технические рекомендации по технологии монтажа полимербетонных труб для микротоннельной прокладки канализационных коллекторов внутренним диаметром 300-1200 мм
ТР (Технические рекомендации) от 18.12.1998 N 88-98
Приказ Комплекса перспективного развития города Москвы от 18.12.1998

ПБ 12-245-98 Правила безопасности в газовом хозяйстве (не действует на территории РФ)
Постановление Госгортехнадзора России от 30.11.1998 N 71
ПБ от 30.11.1998 N 12-245-98

ПБ 11-242-98 Правила безопасности в литейном производстве (не действуют на территории РФ)
Постановление Госгортехнадзора России от 19.11.1998 N 65
ПБ от 19.11.1998 N 11-242-98
Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора

Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше
РД от 16.10.1998 N 153-34.0-48.518-98
СО от 16.10.1998 N 153-34.48.518-98
Приказ Госкомсвязи России от 16.10.1998
Приказ Минэнерго России от 01.01.1998
Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

РД 153-34.0-20.507-98 Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) (с Изменением N 1)
РД от 06.07.1998 N 153-34.0-20.507-98
СО от 06.07.1998 N 34.20.507-98
Приказ Департамента стратегии развития и научно-технической политики РАО "ЕЭС России" от 06.07.1998
Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

РД 153-34.0-21.524-98 Типовая инструкция по эксплуатации металлических дымовых труб энергопредприятий
РД от 30.06.1998 N 153-34.0-21.524-98
СО от 30.06.1998 N 34.21.524-98
Приказ РАО "ЕЭС России" от 30.06.1998
Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

Р 78.36.007-99 Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования объектов. Рекомендации
Р от 27.06.1998 N 78.36.007-99
Приказ МВД России от 27.06.1998
Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора

Р 78.36.008-99 Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов. Рекомендации
Р от 27.06.1998 N 78.36.008-99
Приказ ГУВО МВД России от 27.06.1998
Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

ТСН ПМС-97 МО Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации для индивидуального малоэтажного жилищного строительства Московской области
Постановление Правительства Московской области от 30.03.1998 N 28/9
ТСН от 30.03.1998 N ПМС-97 МО

ТСН ЭК-97 МО Технические правила и нормы строительства, эксплуатации и контроля работы сооружений систем водоотведения объектов малоэтажной застройки на территории Московской области
Постановление Правительства Московской области от 30.03.1998 N 28/9
ТСН от 30.03.1998 N ЭК-97 МО

Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше
РД от 16.10.1998 N 153-34.0-48.518-98
СО от 16.10.1998 N 153-34.48.518-98
Приказ Госкомсвязи России от 16.10.1998
Приказ Минэнерго России от 01.01.1998
Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

ТСН 12-302-98 Тамбовской области (ТСН 12-301-97 Тамбовской области) Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения
Постановление администрации Тамбовской области от 23.12.1997 N 764
ТСН от 23.12.1997 N 12-301-97 Тамбовской области
ТСН от 23.12.1997 N ТСН 12-302-98 Тамбовской области

Изменения и дополнения  к "Единым правилам безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом" (ИПБ 03-152-97) (не действует на территории РФ)
Постановление Госгортехнадзора России от 31.10.1997 N 39
ИПБ от 31.10.1997 N 03-152-97
Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора

ВСП 103-97 Сталефибробетонные ограждения защищаемых помещений учреждений Центрального банка Российской Федерации. Правила производства работ, контроля качества и приемки
Приказ Банка России от 30.10.1997 N 02-472
ВСП от 30.10.1997 N 103-97
Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

ПОТ Р М-005-97 Межотраслевые правила по охране труда при термической обработке металлов
Постановление Минтруда России от 29.09.1997 N 48
ПОТ Р от 29.09.1997 N М-005-97
Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора

Об утверждении "Перечня нормативных документов, рекомендуемых к использованию при проведении государственной экологической экспертизы, а также при составлении экологического обоснования хозяйственной и иной деятельности"
Приказ Госкомэкологии России от 25.09.1997 N 397

НПБ 240-97 Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний
Приказ ГУГПС МЧС России от 31.07.1997 N 50
НПБ от 31.07.1997 N 240-97
Нормативные документы государственной противопожарной службы МВД России, согласованные с Госстроем России

РД 10-138-97 Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин. Часть 1. Общие положения. Методические указания (с Изменением N 1)
Постановление Госгортехнадзора России от 28.03.1997 N 14
РД от 28.03.1997 N 10-138-97
Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора

РД 10-138-97 Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин. Часть 1. Общие положения. Методические указания (старая редакция)
Постановление Госгортехнадзора России от 28.03.1997 N 14
Постановление Минстроя России от 24.12.1996 N 18-91
РД от 28.03.1997 N 10-138-97
Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора

МДС 11-3.99 Методические рекомендации по проведению экспертизы технико-экономических обоснований (проектов) на строительство объектов  жилищно-гражданского назначения
МДС от 15.01.1997 N 11-3.99
Приказ Главгосэкспертизы России от 15.01.1997

МДС 11-4.99 Методические рекомендации по проведению экспертизы технико-экономических обоснований (проектов) на строительство предприятий, зданий и сооружений производственного назначения
МДС от 15.01.1997 N 11-4.99
Приказ Главгосэкспертизы России от 15.01.1997

РД 10-138-97 Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин. Часть 1. Общие положения. Методические указания (старая редакция)
Постановление Госгортехнадзора России от 28.03.1997 N 14
Постановление Минстроя России от 24.12.1996 N 18-91
РД от 28.03.1997 N 10-138-97
Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора

РД 31.3.3-97 Руководство по техническому контролю гидротехнических сооружений морского транспорта
Письмо Минтранса России от 16.12.1996 N ВЛ-6/445
РД от 16.12.1996 N 31.3.3-97
Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

СП 42-101-96 Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 300 мм (не действует на территории РФ)
Письмо Минстроя России от 09.04.1996 N 13/213
Свод правил (СП) от 04.07.1996 N 42-101-96
Своды правил по проектированию и строительству

ТСН 12-301-96 Пермской области Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения (не действует)
Постановление Главы администрации (губернатора) Пермской области от 25.03.1996 N 97
ТСН от 25.03.1996 N 12-301-96 Пермской области

Указатель нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации (по состоянию на 01.01.2008 г.)
Информация, справка от 01.01.1996

Перечень нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации (по состоянию на 01.01.98) (старая редакция)
Информация, справка от 01.01.1996

Перечень нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации (по состоянию на 01.09.2000 г.) (старая редакция)
Информация, справка от 01.01.1996

Указатель нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации (по состоянию на 01.07.2003 г.) (старая редакция)
Информация, справка от 01.01.1996

Указатель нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации (по состоянию на 01.07.2004 г.) (старая редакция)
Информация, справка от 01.01.1996

Указатель нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации (по состоянию на 01.01.2005 г.) (старая редакция)
Информация, справка от 01.01.1996

Указатель нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации (по состоянию на 01.01.2006 г.) (старая редакция)
Информация, справка от 01.01.1996

Указатель нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации (по состоянию на 01.01.2007 г.) (старая редакция)
Информация, справка от 01.01.1996

ПОТ Р О-200-01-95 Правила по охране труда на автомобильном транспорте (фактически утратил силу)
Приказ Минтранса России от 13.12.1995 N 106
ПОТ Р от 13.12.1995 N О-200-01-95
Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

РД 34.20.501-95 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (не действует на территории РФ)
РД от 24.08.1995 N 34.20.501-95
Приказ РАО "ЕЭС России" от 24.08.1995
Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию (с Изменением N 1)
Постановление Госстандарта России от 22.05.1995 N 256
ГОСТ Р от 22.05.1995 N 50776-95

ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 839-1-4-89) Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию (старая редакция)
Постановление Госстандарта России от 22.05.1995 N 256
ГОСТ Р от 22.05.1995 N 50776-95

ПБ 08-83-95 Правила обустройства и безопасной эксплуатации подземных хранилищ природного газа в отложениях каменной соли
Постановление Госгортехнадзора России от 11.01.1995 N 2
ПБ от 11.01.1995 N 08-83-95
Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора

Методические рекомендации по метрологическому обеспечению качества выполнения основных видов строительно-монтажных работ
Приказ Главгосархстройнадзора России от 05.03.1994
Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора

РД 09-54-94 Методические указания (отраслевые требования) о порядке лицензирования деятельности, связанной с функционированием взрывопожароопасных и химически опасных производств (объектов) (не действует на территории РФ)
Постановление Госгортехнадзора России от 18.02.1994 N 14
РД от 18.02.1994 N 09-54-94
Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора

РД 39-132-94 Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов
РД от 30.12.1993 N 39-132-94
Приказ Минэнерго России от 30.12.1993
Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

РД 34.21.562-93 Инструкция по эксплуатации железобетонных дымовых труб с металлическими газоотводящими стволами на тепловых электростанциях
РД от 27.12.1993 N 34.21.562-93
СО от 27.12.1993 N 34.21.562-93
Приказ Департамента стратегии развития и научно-технической политики РАО "ЕЭС России" от 27.12.1993
Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

Пособие к руководящему документу РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ
Пособие от 22.12.1993 N 78.145-93
Приказ МВД России от 22.12.1993
Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

НПБ 05-93 Порядок участия органов государственного пожарного надзора Российской Федерации в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов
Приказ МВД России от 06.12.1993 N 521
НПБ от 06.12.1993 N 05-93
Нормативные документы государственной противопожарной службы МВД России, согласованные с Госстроем России

РД 06-28-93 Правила безопасности при строительстве (реконструкции) и горнотехнической эксплуатации размещаемых в недрах объектов, не связанных с добычей полезных ископаемых (не действует на территории РФ)
Постановление Госгортехнадзора России от 19.08.1993 N 29
РД от 19.08.1993 N 06-28-93
Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора

ОСТН-600-93 (Минсвязи России) Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройство связи радиовещания и телевидения (Разделы 4, 5. Приложения 1-10)
Приказ Минсвязи России от 15.07.1993 N 168
ОСТН от 15.07.1993 N 600-93
Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

РД 78.146-93 Инструкция о техническом надзоре за выполнением проектных и монтажных работ по оборудованию объектов средствами охранной сигнализации (не действует на территории РФ)
РД от 16.06.1993 N 78.146-93
Приказ МВД России от 16.06.1993
Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора

Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (с Изменениями N 1, 2) (не действуют на территории РФ)
Постановление Госгортехнадзора России от 28.05.1993
Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора

Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (с Изменением  N 1) (старая редакция)
Постановление Госгортехнадзора России от 28.05.1993

Методические рекомендации по проведению экспертизы раздела "Организация строительства"
Письмо Главгосэкспертизы России от 18.03.1993 N 24-13-4/73

РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ
РД от 12.01.1993 N 78.145-93
Приказ МВД России от 12.01.1993
Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

Рекомендации о порядке осуществления государственного контроля за соблюдением требований строительных норм и правил при производстве строительно-монтажных работ на объектах производственного назначения
МДС от 01.01.1993 N 12-7.2000

Правила технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных (не действуют на территории РФ)
Постановление Минстроя России от 11.11.1992 N 251

ПБ 06-07-92 Единые правила безопасности при разработке месторождений  полезных ископаемых открытым способом (с изменениями и дополнениями) (не действует на территории РФ)
ПБ от 21.07.1992 N 06-07-92
Постановление Госгортехнадзора России от 21.07.1992
Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора

ПБ 06-07-92 Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом (старая редакция)
ПБ от 21.07.1992 N 06-07-92
Постановление Госгортехнадзора России от 21.07.1992

Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей
Приказ Госэнергонадзора России от 07.05.1992
Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора

Правила эксплуатации электроустановок потребителей (не действует на территории РФ)
Письмо Главгосэнергонадзора России от 31.03.1992
Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора

РД 34.70.110-92 Правила организации пусконаладочных работ на тепловых электростанциях
СО от 28.11.1991 N 34.70.110-92
РД от 28.11.1991 N 153-34.20.406
Приказ Минэнерго СССР от 28.11.1991
Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы
Постановление Госстроя СССР от 21.11.1991 N 17
СНиП от 21.11.1991 N 3.06.04-91

ПНАЭ Г-9-026-90 Общие положения по устройству и эксплуатации систем аварийного электроснабжения атомных станций
Постановление Госпроматомнадзора СССР от 26.04.1991 N 2
ПНАЭ от 26.04.1991 N Г-9-026-90
Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора

РД 34.35.414-91 Правила организации пусконаладочных работ по АСУ ТП на тепловых электростанциях
РД от 12.02.1991 N 34.35.414-91
СО от 12.02.1991 N 153-34.35.414-91
Приказ Минэнерго СССР от 12.02.1991
Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

ВСН 34-91 (Минтрансстрой СССР) Правила производства и приемки работ на строительстве новых, реконструкции и расширении действующих гидротехнических морских и речных транспортных сооружений. Часть I
ВСН от 01.01.1991 N 34-91
Приказ Минтрансстроя СССР от 01.01.1991
Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

ВСН 34-91 (Минтрансстрой СССР) Правила производства и приемки работ на строительстве новых, реконструкции и расширении действующих гидротехнических морских и речных транспортных сооружений. Часть II
ВСН от 01.01.1991 N 34-91
Приказ Минтрансстроя СССР от 01.01.1991
Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

ВСН 34-91 (Минтрансстрой СССР) Правила производства и приемки работ на строительстве новых, реконструкции и расширении действующих гидротехнических морских и речных транспортных сооружений. Часть III
ВСН от 01.01.1991 N 34-91
Приказ Минтрансстроя СССР от 01.01.1991
Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

ВСН 123-90 (ММСС СССР) Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам
ВСН от 24.12.1990 N 123-90
Приказ Минмонтажспецстрой СССР от 24.12.1990
Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

Правила безопасного ведения работ в зеленом хозяйстве
Решение Президиума Росжилкоммунсоюза от 15.11.1990 N 5
Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

ВСН АС-90 Правила приемки в эксплуатацию законченных строительством энергоблоков атомных станций
Приказ министерства атомной энергетики и промышленности СССР от 20.09.1990 N 700
ВСН от 20.09.1990 N АС-90
Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

РД 31.35.13-90 Указания по ремонту гидротехнических сооружений на морском транспорте
Приказ Минморфлота СССР от 02.03.1990 N 24
РД от 02.03.1990 N 31.35.13-90
Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

РД 34 15.073-91 Руководство по геотехническому контролю за подготовкой оснований и возведением грунтовых сооружений в энергетическом строительстве
РД от 09.02.1990 N 34 15.073-91
РД от 09.02.1990 N 34.15.073-91
Приказ Минэнерго СССР от 09.02.1990
Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

Пособие по производству и приемке работ при строительстве новых, реконструкции и расширении действующих гидротехнических морских и речных транспортных сооружений (к СНиП 3.07.02-87)
Пособие от 21.11.1989 N 3.07.02-87
Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

ВСН 61-89 (Минтрансстрой СССР) Изыскания, проектирование и строительство железных дорог в районах вечной мерзлоты
Приказ Минтрансстроя СССР от 20.07.1989 N МО437
ВСН от 20.07.1989 N 61-89
Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

ВСН 012-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть II. Формы документации и правила ее оформления в процессе сдачи-приемки (с Изменением N 1)
Приказ Миннефтегазстроя СССР от 16.05.1989 N 239
ВСН от 16.05.1989 N 012-88
Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

ВСН 012-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть II. Формы документации и правила ее оформления в процессе сдачи-приемки (старая редакция)
Приказ Миннефтегазстроя СССР от 16.05.1989 N 239
ВСН от 16.05.1989 N 012-88

ВСН 012-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть I (с Изменением N 1)
Приказ Миннефтегазстроя СССР от 27.12.1988 N 375
ВСН от 27.12.1988 N 012-88
Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

ВСН 012-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть I (старая редакция)
Приказ Миннефтегазстроя СССР от 27.12.1988 N 375
ВСН от 27.12.1988 N 012-88

РД 34.20.407-87 Правила приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов распределительных электрических сетей напряжением 0,38-20 кВ сельскохозяйственного назначения
РД от 12.12.1988 N 34.20.407-87
СО от 12.12.1988 N 153-34.20.407
Приказ Минэнерго СССР от 12.12.1988
Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

ВСН 005-88 Строительство промысловых стальных трубопроводов. Технология и организация
Приказ Миннефтегазстроя СССР от 01.11.1988 N 332
ВСН от 01.11.1988 N 005-88
Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых зданий
Приказ Госстроя СССР от 06.07.1988 N 191
ВСН от 06.07.1988 N 57-88(Р)
Своды правил по проектированию и строительству

РД 34.35.412-88 Правила приемки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций (с Изменением)
РД от 30.05.1988 N 34.35.412-88
СО от 30.05.1988 N 153-34.35.412-88
Приказ Минэнерго СССР от 30.05.1988
Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

СНиП 3.05.02-88* Газоснабжение (не действует на территории РФ)
Постановление Госстроя СССР от 17.03.1988 N 39
СНиП от 17.03.1988 N 3.05.02-88*

Изменение N 1 СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения
Постановление Госстроя СССР от 18.11.1987 N 272
СНиП от 18.11.1987 N 3.01.04-87

Пособие по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений (к СНиП 1.04.03-85)
Пособие от 16.09.1987 N 1.04.03-85

ПНАЭ Г-1-001-85 Типовое содержание технического обоснования безопасности атомных станций (ТС ТОБ АС-85)
ПНАЭ от 29.10.1985 N Г-1-001-85
Постановление Госатомэнергонадзора СССР от 29.10.1985
Постановление Минздрава СССР от 25.10.1985
Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора

СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации
Постановление Госстроя СССР от 31.05.1985 N 73
СНиП от 31.05.1985 N 3.05.04-85*

СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II (Разделы З (подразделы 3-7), И, Приложение)
Постановление Госстроя СССР от 17.04.1985 N 51
Постановление Госплана СССР от 17.04.1985 N 90
СНиП от 17.04.1985 N 1.04.03-85*
Своды правил по проектированию и строительству

ВСН 118-84 (Минсельхоз СССР) Инструкция о порядке составления сводной сметы затрат на ввод в эксплуатацию предприятий, зданий и сооружений Министерства сельского хозяйства СССР
ВСН от 19.01.1984 N 118-84
Приказ Минсельхоза СССР от 19.01.1984
Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

ВСН 114-82 (Минсельхоз СССР) Правила приемки в эксплуатацию законченных строительством предприятий, зданий и сооружений сельского хозяйства
ВСН от 17.03.1982 N 114-82
Приказ Минсельхоза СССР от 17.03.1982
Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

СНиП III-3-81 Часть III. Правила производства и приемки работ. Глава 3. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения (с Изменениями N 1-3) (не действует на территории РФ)
Постановление Госстроя СССР от 27.11.1981 N 201
СНиП от 27.11.1981 N III-3-81

СНиП III-3-81 Часть III. Правила производства и приемки работ. Глава 3. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения (старая редакция)
Постановление Госстроя СССР от 27.11.1981 N 201
СНиП от 27.11.1981 N III-3-81

Рекомендации по планированию и организации жилищно-гражданского строительства при застройке городов градостроительными комплексами
Информация, справка

Тематики 
Строительство и архитектура

Промышленные предприятия, производственные здания и сооружения, вспомогательные здания

Принятие в эксплуатацию завершенных объектов

Инженерное оборудование зданий и сооружений, внешние сети

Топливно-энергетический комплекс

Строительное производство (К 12)

Жилые, общественные и производственные здания и сооружения (К 31)

Водоснабжение и канализация (К 40)

Склады

Монтаж, наладка, контроль, испытания, приемка в эксплуатацию

Газовый комплекс

Строительство зданий и сооружений предприятий газового комплекса

Пожарная безопасность производства в топливно-энергетическом комплексе

Строительство предприятий и объектов топливно-энергетического комплекса

Строительство предприятий и объектов электроэнергетики

Автозаправочные станции

Общие вопросы эксплуатации объектов АЗС

Территория, здания и сооружения объектов АЗС

Очистные сооружения АЗС

Строительство объектов АЗС