ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 марта 2010 г. N 434р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГНОЗНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ И НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОАО "РЖД"

(В ред. Распоряжений ОАО "РЖД" от 23.03.2010 N 578р, от 21.01.2011 N 73р,
от 29.03.2011 N 623р, от 05.09.2011 N 1920р, от 31.07.2012 N 1517р)

В целях недопущения увеличения сметной стоимости строительства объектов и начальной (максимальной) цены договора при размещении заказа на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, финансируемых за счет средств ОАО "РЖД":
1. Утвердить прилагаемую Методику формирования прогнозной стоимости строительства объектов и начальной (максимальной) цены договора при размещении заказа на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, финансируемых за счет средств ОАО "РЖД".
2. Признать утратившими силу нормативные документы ОАО "РЖД" и Департамента капитального строительства, перечень которых приведен в приложении к настоящему распоряжению.

Вице-президент ОАО "РЖД"
О.В.Тони

Приложение
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 03.03.2010 г. N 434p

ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Распоряжение ОАО "РЖД" от 19 декабря 2008 г. N 2758р "Об утверждении Временного порядка определения текущей сметной стоимости строительства объектов, финансируемого за счет средств ОАО "РЖД" (в редакции распоряжения ОАО "РЖД" от 10 апреля 2009 г. N 772р);
2. Письма Департамента капитального строительства:
а) от 11 февраля 2008 г. N ЦУКС М-20/190, о порядке возмещения разницы в стоимости материалов, конструкций и изделий при строительстве объектов за счет средств ОАО "РЖД";
б) от 28 марта 2008 г. N ЦУКС М-20/422, об индексах-дефляторах в строительстве до 2020 года для определения сметной стоимости строительства объектов ОАО "РЖД" в прогнозных ценах;
в) от 12 мая 2005 г. N ЦУКС М-20/894, о применении индексов-дефляторов при определении договорной цены,
г) от 24 июля 2008 г. N ЦУКС М-20/1197, об индексах-дефляторах на проектно-изыскательские работы;
д) от 30 апреля 2008 г. N ЦУКС М-20/253, о системе ценообразования при финансировании строительства объектов из разных источников.

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением ОАО "РЖД"
от 03.03.2010 г. N 434р

МЕТОДИКА
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГНОЗНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ И НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОАО "РЖД"

(В ред. Распоряжений ОАО "РЖД" от 23.03.2010 N 578р, от 21.01.2011 N 73р,
от 29.03.2011 N 623р, от 05.09.2011 N 1920р, от 31.07.2012 N 1517р)

1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика формирования прогнозной стоимости строительства объектов и начальной (максимальной) цены договора при размещении заказа на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, финансируемых за счет средств ОАО "РЖД" (далее - Методика) определяет основные положения формирования прогнозной стоимости строительства объектов на период строительства и порядок определения начальной (максимальной) цены договора при размещении заказа на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.
Методика предназначена для использования проектными институтами при формировании прогнозной стоимости строительства объекта в составе проектной документации и заказчиками при определении начальной (максимальной) цены договора при размещении заказов на поставку оборудования и выполнение работ (услуг) по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства.
Методика не применяется в случаях строительства объектов ОАО "РЖД", осуществляемого с привлечением в установленном порядке средств федерального бюджета и внебюджетных источников, если применение иного порядка формирования стоимости указанных работ предусмотрено соответствующими соглашениями с федеральными органами государственной власти и организациями, участвующими в софинансировании указанных работ.
1.2. В Методике используются следующие основные понятия:
общая сметная стоимость строительства - сумма денежных средств, необходимых для осуществления работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов в соответствии с проектными материалами;
прогнозная стоимость строительства - сметная стоимость строительства, предусмотренная проектно-сметной документацией, прошедшей государственную и ведомственную экспертизу, и указанная заказчиком в документации об утверждении проектной документации после пересчета в прогнозный уровень цен в соответствии с разделом 2.
начальная (максимальная) цена договора - сметная стоимость работ, предусмотренная утвержденной проектно-сметной документацией и указанная заказчиком в конкурсной или иной документации при размещении заказа на выполнение строительных, монтажных, ремонтных, проектных и изыскательских работ, поставку оборудования и других работ и услуг после пересчета в прогнозный уровень в соответствии разделом 3.

2. Определение прогнозной стоимости строительства объектов

2.1. Расчет прогнозной стоимости строительства объекта в составе проектной документации осуществляется проектной организацией.
2.2. Прогнозная стоимость строительства определяется в следующем порядке.
Показатели сметной стоимости строительства по итогу сводного сметного расчета, рассчитанные в текущем уровне цен, корректируются на прогнозный индекс инфляции (прогнозный коэффициент инфляции) на период строительства.
Прогнозные индексы инфляции по годам строительства объектов:
    2009 год - без инфляции;           2011 год - 4%
    2010 год - 2,5%;                   2012 год - 6,7%

2.3. В случае если нормативный срок строительства объекта согласно проекту организации строительства или директивный срок строительства, установленный ОАО "РЖД" более одного года, прогнозная стоимость строительства определяется:

          С      = С  х К  + С  х К  + С  х К  + С  х К
           прог.    1    1    2    2    3    3    n    n

    С        -  сметная  стоимость  строительства,  планируемая  к
      1,2,3     освоению соответственно в 1-й,  2-й,..., n-й год, в текущем уровне
                цен проектно-сметной документации;

    К          - прогнозный коэффициент инфляции, приходящийся на IV
     1,2... n    квартал  первого,  второго,  n-ого финансового года,
                 рассчитанный нарастающим итогом.

В случае если нормативный срок строительства объекта составляет более 3-х лет, заказчику в задании на проектирование предусматривать разбивку сметной стоимости строительства по очередям (этапам) с учетом завершения технологических процессов и сроком строительства одной очереди (этапа) не более 3-х лет.
3. Расчет прогнозной сметной стоимости строительства объектов осуществляется с применением прогнозных коэффициентов инфляции согласно таблице N 1 приложения N 1.
4. Порядок оформления и пример расчета прогнозной стоимости строительства на период строительства приведен в приложении N 2.

3. Порядок определения начальной (максимальной) цены договора
при размещении заказа на выполнение работ (услуг),
поставку оборудования по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства

3.1. Расчет начальной (максимальной) цены договора при размещении заказа на выполнение проектных, изыскательских, строительных, монтажных, ремонтных и других работ (услуг) по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства осуществляется заказчиком.
3.2. В зависимости от выполняемых работ, услуг и закупаемых товаров начальная (максимальная) цена договора определяется:
на выполнение проектных и изыскательских работ;
на выполнение строительных, монтажных и ремонтных работ (далее подрядных работ);
на поставку оборудования;
другие работы (услуги) (пуско-наладочные работы, страхование объектов строительства, негосударственная экспертиза, исходная и разрешительная документация и т.д.);
единый заказ на выполнение подрядных работ, поставку оборудования и другие работы (услуги).
Общая сметная стоимость строительства объекта для определения начальной (максимальной) цены договора при размещении заказа на поставку оборудования и выполнение работ (услуг) по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства формируется заказчиком по структуре работ и затрат и оформляется согласно приложению N 4.
3.3. Основанием для определения начальной (максимальной) цены договора при размещении заказа на выполнение проектных, изыскательских, строительных, монтажных, ремонтных и других работ (услуг), поставку оборудования, поручаемых подрядчику, является сметная стоимость работ в текущем уровне цен, учтенная в общей стоимости строительства объекта, имеющая положительное заключение экспертизы и утвержденная в установленном ОАО "РЖД" порядке.
3.4. Начальная (максимальная) цена договора при размещении заказа на выполнение проектных, изыскательских и других работ (услуг) определяется в соответствии с "Порядком определения стоимости проектных, изыскательских и других работ (услуг) для строительства объектов, финансируемого за счет средств ОАО "РЖД", утвержденного распоряжением ОАО "РЖД" от 28 декабря 2009 г. N 2697р.
Прогнозный коэффициент инфляции к начальной (максимальной) цене договора не применяется. Инфляционные изменения учитываются индексами пересчета в текущие цены.
3.5. Начальная (максимальная) цена договора на поставку оборудования определяется на основании общей стоимости оборудования (гр.5 по итогам глав 1-9(11) утвержденного сводного сметного расчета стоимости строительства) с учетом прогнозного коэффициента инфляции. Прогнозный коэффициент инфляции рассчитывается, как среднее арифметическое между прогнозным коэффициентом инфляции на момент формирования начальной цены и прогнозным коэффициентом инфляции на момент поставки оборудования согласно таблице N 2 приложения N 1.
Текущая цена единицы оборудования не корректируется на прогнозный индекс инфляции. Предельно допустимая текущая цена единицы оборудования по закупаемой номенклатуре определяется согласно действующим нормативным документам ОАО "РЖД" по организации закупок.
Суммарная начальная (максимальная) стоимость закупаемого оборудования в текущем уровне цен не должна превышать начальную (прогнозную) стоимость оборудования, учтенную утвержденной сметной документацией.
Начальная (максимальная) стоимость всего закупаемого оборудования по объекту оформляется согласно приложению N 5.
3.6. В начальную (максимальную) цену при размещении заказа на выполнение подрядных работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства включаются следующие показатели утвержденной сметной стоимости строительства:
стоимость строительно-монтажных работ и прочих затрат, относящихся к строительно-монтажным работам, по итогам глав 1-9 (11);
другие работы и затраты (страхование, пуско-наладочные работы и т.д.), поручаемые заказчиком.
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты в расчет начальной (максимальной) цены договора не включается и остается у заказчика. Резерв средств может быть использован при фактическом наличии дополнительных работ и затрат, оформленных в установленном порядке.
3.6.1. Начальная (максимальная) цена договора подрядных работ определяется в следующем порядке.
Показатели сметной стоимости работ по итогам глав сводного сметного расчета, утвержденные в составе проектно-сметной документации в текущем уровне цен корректируются на прогнозный коэффициент инфляции, на период строительства. Прогнозные коэффициенты инфляции на период строительства приведены в таблице N 2 приложения N 1.
3.6.2. В случае если нормативный срок строительства объекта согласно проекту организации строительства составляет до 3-х лет (включительно) начальная (максимальная) цена договора в соответствии с нормативными или директивными сроками строительства определяется заказчиком по одному из двух вариантов:
1 вариант. Начальная (максимальная) цена договора в текущем уровне цен утвержденной сметной документации по годам строительства корректируется на среднегодовой прогнозный коэффициент инфляции,

          С                      = С х К + С х К + С х К
           нач.(макс.)подрядчика    1   1   2   2   3   3

    C        -  сметная  стоимость  работ,  подлежащая  выполнению
      1,2,3
подрядчиком в 1-й,  2-й, 3-й год в текущем уровне цен утвержденной
проектно-сметной документации.
    К - прогнозный коэффициент инфляции за первый год производства
     1
работ   равен   среднему    арифметическому    между    прогнозным
коэффициентом  инфляции  на  квартал  начала  работ  и  прогнозным
коэффициентом инфляции на IV квартал  первого  года  строительства
объекта;
    К  - прогнозный коэффициент инфляции за первый  и  второй  год
     2
производства работ равен среднему арифметическому между прогнозным
коэффициентом  инфляции  нарастающим  итогом  на I квартал второго
года   строительства   и   прогнозным   коэффициентом    инфляции,
нарастающим  итогом  на  IV  квартал  второго  года  строительства
объекта;
    К  - прогнозный  коэффициент инфляции за три года производства
     3
работ    равен    среднему    арифметическому   между   прогнозным
коэффициентом инфляции нарастающим итогом на  I  квартал  третьего
года строительства и прогнозным коэффициентом инфляции нарастающим
итогом на квартал окончания работ  в  третьем  году  строительства
объекта.".
    (В ред. Распоряжения ОАО "РЖД" от 23.03.2010 N 578р)
    2 вариант.  Начальная (максимальная) цена договора  в  текущем
уровне  цен  утвержденной  сметной  документации распределенная по
кварталам соответствующих лет производства работ корректируется на
прогнозный коэффициент инфляции соответствующего квартала.

                 С                     =С + С + С
                  нач.(макс.)подрядчика  1   2   3

    С - сметная стоимость работ, подлежащая выполнению подрядчиком
1,2,3 в 1-й, 2-й, 3-й год в прогнозном уровне цен.

           С  = С   х К + С   х К  + С   х К  + С   х К
            1    1/1   1   1/2   2    1/3   3    1/4   4

           С  = С   х К + С   х К  + С   х К  + С   х К
            2    2/1   5   2/2   6    2/3   7    2/4   8

           С  = С   х К + С   х К  + С   х К  + С   х К
            3    3/1   8   3/2   9    3/3   10   3/4   11

    С       , С       , C          -   сметная   стоимость  работ,
     1/1-1/4   2/1-2/4   3/1+3/4
подлежащая выполнению   подрядчиком   в  соответствующем  квартале
1,2,3-го года строительства  в  текущем  уровне  цен  утвержденной
проектно-сметной документации.
    К        - прогнозные коэффициенты  инфляции  соответствующего
     1,2..12
квартала 1,2,3-го года строительства.

Пример расчета приведен в приложении N 3.
3.6.3. Пункт исключен Распоряжением ОАО "РЖД" от 29.03.2011 N 623р
3.6.4. При внесении изменений в проектную документацию на основании дополнительного задания на проектирование корректировка и утверждение проектно-сметной документации данных объектов осуществляется в установленном ОАО "РЖД" порядке.
3.6.5. Начальная (максимальная) цена договора при размещении заказа оформляется согласно приложению N 6.
3.6.6. В случае если нормативный срок строительства свыше 3-х лет стоимость подрядных работ на последующие годы корректируется на прогнозный коэффициент инфляции, учитывающий инфляцию последующих лет строительства. При отсутствии прогнозных коэффициентов инфляции на соответствующий год используется величина уровня инфляции за последний истекший календарный год, установленная внутренними документами ОАО "РЖД".
3.7. Начальная (максимальная) цена договора при размещении единого заказа на выполнение подрядных работ, поставку оборудования и оказание других услуг заказчику определяется путем суммирования стоимости затрат, рассчитанных по пункту 3.4; 3.5; 3.6 настоящей Методики и оформляется расчетом согласно приложению N 7.
3.8. Порядок определения прогнозной стоимости строительства и начальной (максимальной) цены договора при размещении заказа на выполнение подрядных работ по переходящим объектам, по которым проведены конкурсные процедуры и заключены договора, приведен в приложении N 8.

Приложение N 1
к Методике, утвержденной распоряжением
ОАО "РЖД" от 3 марта 2010 г. N 434р
(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"
от 31 июля 2012 г. N 1517р)

Раздел 1. Прогнозные коэффициенты инфляции для определения прогнозной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства

Порядковый
номер  
строки  	Наименование 
периода (год 
и месяц) в  
котором   
определена  
текущая   
стоимость  
объекта в ССР	Прогнозные коэффициенты инфляции на 2011-2015 годы  	

2011   	

2012   	

2013   	

2014   	

2015   	
1    	2      	3    	4    	5    	6    	7    	
							
	2011     						
1    	01.07.2011 	1,012  	1,085   	1,162   	1,240   	1,324   	
							
	2012    						
2    	01.01.2012 		1,072   	1,148   	1,226   	1,310   	
							
3.   	II квартал  		1,041   	1,114   	1,189   	1,270   	

Раздел 2. Прогнозные коэффициенты инфляции для определения начальной (максимальной) цены договора при размещении заказа на выполнение подрядных работ и поставку оборудования при строительстве, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства

Порядковый
номер  	Наименование
периода   
(год и    
месяц) в   
котором   
определена  
текущая   
стоимость  
объекта в  
ССР     	Прогнозные коэффициенты инфляции на 2011-2014 годы                 	
		2011    	2012          	2013          	2014          	
		
кварталы  	
кварталы        	
кварталы        	
кварталы        	
		III  	IV  	I  	II  	III 	IV  	I  	II  	III 	IV  	I  	II  	III 	IV  	
1    	2      	3  	4  	5  	6  	7  	8  	9  	10  	11 	12 	13 	14  	15  	16  	
	2011    															
1    	01.07.2011 	1,000 	1,012	1,017	1,038 	1,065	1,085	1,090	1,112 	1,141	1,162	1,168	1,192 	1,221	1,240	
																
	2012    															
2    	01.01.2012 			1,005	1,026 	1,053	1,072	1,077	1,099 	1,127	1,148	1,154	1,178 	1,207	1,226	
																
3.   	II квартал 
2012    				1,000 	1,023	1,041	1,046	1,067 	1,094	1,114	1,120	1,143 	1,171	1,189	

Примечание.
1. Прогнозные коэффициенты инфляции раздела 1 приложения применяются проектными институтами и заказчиками при расчете прогнозно сметной стоимости строительства объекта на период строительства к составе утверждаемой проектной документации. В случае окончания строительства объекта в I, II, III кварталах используются коэффициенты инфляции по кварталам раздела 2.
2. Прогнозные коэффициенты инфляции раздела 2 приложения применяются заказчиками при расчете начальной (максимальной) цены договора (наряд-заказа) при размещении заказа на выполнение подрядных работ и поставку оборудования на основании утвержденной сметной документации.

Приложение N 2
к Методике, утвержденной
распоряжением ОАО "РЖД"
от 03.03.2010 г. N 434р

                         пример условный

                Прогнозная стоимость строительства
     ________________________________________________________
        (наименование титула по заданию на проектирование)

N  
п.п.	
Наименование показателя 	
Един  
измер.	Распределение по годам
строительства в    
соответствии с ПОС  	
Стоимость
всего  	
			2010 г.	2011 г.	2012 г.		

1  	Стоимость строительства 
(всего) в базисном      
уровне цен по состоянию 
на 01.01.2000           	
млн. 
руб. 	
190  				

2  	Стоимость строительства 
(всего) в текущем уровне
цен на момент           
составления сметной     
документации по         
состоянию на 01.03.2009 	

млн. 
руб. 	

560  				

3  	Стоимость строительства 
(всего) на момент выдачи
заключения по сметной   
документации экспертизой
по состоянию на         
01.03.2009              	
млн. 
руб. 	
560  				

4  	Коэффициенты инфляции в 
ценах соответствующих   
лет строительства:      
январь2010-сентябрь 2012						

5  	Затраты по годам в      
прогнозных ценах        
соответствующих лет     
строительства           	
млн. 
руб. 					

    где,
    К  = 1,025 (строка 2, графа 4, таблица N 1 приложения N 1)
     1
    К  = 1,066 (строка 2, графа 5, таблица N 1 приложения N 1)
     2
    К  = 1,137 (строка 2, графа 6, таблица N 1 приложения N 1)
     3

                              Расчет
       прогнозной стоимости строительства объекта с учетом
                      коэффициентов инфляции

    Всего  сметная  стоимость  работ  в  текущих  ценах  2009 года
(индексы пересчета с 1 марта 2009 г.) определенная сводным сметным
расчетом составляет 2610 млн. руб.;
    стоимость   работ,   подлежащих   выполнению   в   первый  год
строительства объекта (2010 г.) - 800 млн. руб.;
    стоимость   работ,   подлежащих   выполнению   во  второй  год
строительства объекта (2011 г.) - 1250 млн. руб.;
    стоимость   работ,   подлежащих   выполнению   в   третий  год
строительства объекта (2012 г.) - 560 млн. руб.;
    Сроки строительства:
    Начало строительства - январь (I кв.) 2010 год.
    Окончание строительства - октябрь (IV кв.) 2012 год.

               С      = С  х К  + С  х К  + С  х К
                прог.    1    1    2    2    3    3

С = 800 млн.руб., С = 1250 млн.руб., С = 560 млн.руб. С   = 2610 млн.руб.
 1                 2                  3                тек.

    К  = 1,025 (строка 2, графа 4, таблица N 1 приложения N 1)
     1

    К  = 1,066 (строка 2, графа 5, таблица N 1 приложения N 1)
     2

    К  = 1,137 (строка 2, графа 6, таблица N 1 приложения N 1)
     3

 С     = 560 х 1,025 + 1250 х 1,066+ 800 х 1,137=2816,1 млн.руб.
  прог.

Приложение N 3
к Методике, утвержденной
распоряжением ОАО "РЖД"
от 03.03.2010 г. N 434р

(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"
от 23.03.2010 N 578р)

Расчет
начальной (максимальной) цены договора подрядных работ с учетом коэффициентов инфляции (ценах соответствующих лет)
пример условный

Всего сметная стоимость подрядных работ в текущих ценах 2009 года (индексы пересчета с 1 марта 2009 г.) определенная сводным сметным расчетом по главам 1-9(11) составляет 1980 млн.руб.;
Сроки строительства:
Начало работ - январь (I кв.) 2010 год.
Окончание работ - сентябрь (II кв.) 2012 год.

1 вариант. Начальная (максимальная) цена договора подрядных работ в текущем уровне цен, утвержденной сметной документации, корректируется на средний арифметический годовой коэффициент инфляции согласно таблице N 2 приложения N 1 в соответствии с нормативными или директивными сроками строительства.

         С                    = C х K  + С  х К  + С  х К
          нач(макс)подрядчика    1   1    2    2    3    3

    C      - сметная  стоимость   работ,   подлежащая   выполнению
     1,2,3
подрядчиком  в  1-й,  2-й,  3-й   год   в   текущем   уровне   цен
проектно-сметной документации.
    K - прогнозный коэффициент инфляции за первый год производства
     1
работ   равен   среднему    арифметическому    между    прогнозным
коэффициентом  инфляции  на  квартал  начала  работ  и  прогнозным
коэффициентом инфляции на IV квартал  первого  года  строительства
объекта;
    К  -  прогнозный  коэффициент  инфляции за первый и второй год
     2
производства работ равен среднему арифметическому между прогнозным
коэффициентом  инфляции  на I квартал второго года строительства и
прогнозным коэффициентом  инфляции  на  IV  квартал  второго  года
строительства объекта;
    К  -  прогнозный коэффициент инфляции за три года производства
     3
работ   равен   среднему    арифметическому    между    прогнозным
коэффициентом  инфляции  нарастающим  итогом на I квартал третьего
года строительства и прогнозным коэффициентом инфляции нарастающим
итогом  на  квартал  окончания  работ в третьем году строительства
объекта.
    (В ред. Распоряжения ОАО "РЖД" от 23.03.2010 N 578р)

NN 
пп 	Наименование       
показателя        	Един. 
измер.	Распределение по годам 
строительства      	Стоимость
всего   	
			2010 г.	2011г.	2012 г.		

1  	Стоимость СМР по   
итогам глав 1-9(11)
в базисных ценах на
01.01.2000         	
млн. 
руб. 	
155   	
250  	
85   	
490    	

2  	Стоимость СМР в    
текущих ценах по   
утвержденному      
сводному сметному  
расчету            	
млн. 
руб. 	
330   	
1000  	
650   	
1980    	

3  	Прогнозные         
коэффициенты       
инфляции в цены    
соответствующих лет
строительств:      
январь             
2010-сентябрь 2012 		

1,0125 	

1,047	

1,104	

1,06(ср.)	

4  	Начальная          
(максимальная) цена
по годам           
строительства      	млн. 
руб. 	
334,1 	
1047 	
717,6	
2098,7  	

    2010 год

    К  = (1,000+1,025):2 = 1,0125
     1
    1,000 - строка 2, графа 4, таблица N 2 приложения N 1;
    1,025 - строка 2, графа 7, таблица N 2 приложения N 1;

    2011 год

    К  = (1,028 + 1,066):2 = 1,047
     2
    1,028 - строка 2, графа 8, таблица N 2 приложения N 1;
    1,066 - строка 2, графа 11, таблица N 2 приложения N 1;

    2012 год
    К  = (1,083+1,125):2= 1,104
     3
    1,083 - строка 2, графа 12, таблица N 2 приложения N 1;
    1,125 - строка 2, графа 14, таблица N 2 приложения N 1.

   С          = 330х1,0125+1000х1,047+650х1,104=2098,7 млн.руб.
    нач.(макс)

2 вариант. Начальная (максимальная) цена договора подрядных работ в текущем уровне цен, распределенная по кварталам, корректируется на прогнозный коэффициент инфляции соответствующего квартала согласно таблице N 2 приложения N 1.

NN
пп	Наименование     
затрат         	Распределение стоимости поквартально по
годам строительства, млн. руб.      	
		Год  	I кв. 	II кв.	III кв.	IV кв. 	
	Текущая стоимость    
Всего в ц. 2009 г.   	1980 	450  	620 	640  	270   	
	2010 год             						
	Текущая стоимость    	330 	50  	90 	120  	70   	
	Прогнозные           
коэффициенты инфляции	
1,016 	
1,000 	
1,014 	
1,020 	
1,025  	
	Начальная (максим)   
цена                 	
335,41	
50  	
91,26 	
122,4 	
71,75 	
	2011 год             						
	Текущая стоимость    	1000  	200  	270  	330  	200  	
	Прогнозные           
коэффициенты инфляции	
1,048 	
1,028 	
1,041 	
1,054 	
1,066  	
	Начальная (максим)   
цена                 	
1047,69	
205,6 	
281,07	
347,82	
213,2  	
	2012 год             						
	Текущая стоимость    	650   	200  	260  	190  		
	Прогнозные           
коэффициенты инфляции	
1,105 	
1,083 	
1,108 	
1,125 		
	Начальная            
(максим) цена        	
718,43	
216,6 	
288,08	
213,75		
	Начальная (максим.)  
цена (по конкурсу или
корпоративному       
заказу)              	
2101,53	
472,2 	
660,41	
683,97	
284,95 	

    2010 год
    С     = 330 млн. руб.
     тек.

    С     = С  х К  + С  х К  + С  х К  + С  х К
     2010    1    1    2    2    3    3    4    4

    К  = 1,000 строка 2, графа 4, таблица 2 приложения N 1
     1
    К  = 1,014 строка 2, графа 5, таблица 2 приложения N 1
     2

    К  = 1,020 строка 2, графа 6, таблица 2 приложения N 1
     3

    К  = 1,025 строка 2, графа 7, таблица 2 приложения N 1
     4

    С    = 50х1,000+90х1,014+120х1,020+70х1,025=335,41 млн.руб.
     2010

    2011 год

    С    = 1000 млн.руб
     тек.

    С    = C x K + C x K + C x K + C x К
     2011   1   1   2   2   3   3   4   4

    K  = 1,028 строка 2, графа 8 таблица 2 приложения N 1
     1

    К  = 1,041 строка 2, графа 9, таблица 2 приложения N 1
     2

    К  = 1,054 строка 2, графа 10, таблица 2 приложения N 1
     3

    К  = 1,066 строка 2, графа 11, таблица 2 приложения N 1
     4

С     = 200х1,028+270х1,041+330х1,054+200х1,066=1047,69 млн.руб.
 2011

    2012 год

    С    = 650 млн. руб.
     тек.

    C     = С  х К  + С  х К  + С  х К
     2012    1    1    2    2    3    3

    K  = 1,083 строка 2, графа 12, раздел 2 приложения N 1
     1

    К  = 1,108 строка 2, графа 13, раздел 2 приложения N 1
     2

    К  = 1,125 строка 2, графа 14, раздел 2 приложения N 1
     3

    С     = 200х1,083+260х1,108+190х1,125=718,43 млн.руб.
     2012

    С     = C     + С    + С
     дог.    2010    2011   2012

    С     = 335,41+1047,69+718,43 =  2101,53 млн.руб.
     дог.

Приложение N 4
к Методике, утвержденной
распоряжением ОАО "РЖД"
от 03.03.2010 г. N 434р

Общая стоимость строительства объекта по видам работ для определения начальной (максимальной) цены договоров при размещении заказа на выполнение работ (услуг) при строительстве, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства по утверждению

N 
п.п	Стоимость работ и затрат	Стоимость по          
утвержденному ССР, расп.  
N _____ от _____        	Начальная (максимальная) цена договора при размещении 
заказа на выполнение подрядных работ и услуг с учетом 
коэффициентов инфляции на период производства работ   	
		в ценах на
01.01.2000	текущих
ценах__
кв.200_	в     
прогнозных
ценах   	в том числе:                                          	
					Подрядчик
(и)   	Поставщик
(и)   	Проектировщик
(и)     	Исполнители	Заказчик	
1 	2            	3    	4   	5     	6    	8    	9      	10     	11   	
1 	СМР*           				***   					
2 	оборудование        					***   			**     	
3 	НПР            				***   	***   				
4 	Прочие, всего          									
4.1	аренда или выкуп земли  								**     	
4.2	Компенсация             
собственникам за        
сносимые здания         
сооружения              								**     	
4.3	ПИР, в т.ч.             						***     			
	проектная документация  						***     			
	рабочая документация    						***     			
4.4	экспертиза              							/негосуд***	**госуд.	
4.5	авторский надзор        						***     			
4.6	получение               
исходно-разрешительной  
документации            							
***    	
**     	
4.7	другие работы и затраты 				***   	***   	***     	***    
(частично) 	**     	
4.8	содержание зак-ка       								**     	
4.9	Плата за подключение к  
инфраструктуре субъектов
естественных монополий  								
**     	
5. 	Резерв средств на       
непредвиденные работы и 
затраты                 								**     	
6. 	сего:                   									
7. 	Коэффициент снижения    									
8. 	Стоимость по итогам     
торгов                  									
9. 	Экономия общей стоимости									

ЗАКАЗЧИК:
Примечание. Номенклатура работ и затрат может быть уточнена заказчиком по конкретному объекту.
* - СМР с учетом прочих затрат (вахта, передвижной и т.д.) относящихся к СМР
** затраты заказчика или оплачиваются заказчиком напрямую государствен, структурам, резерв.
*** - виды работ на которые рассчитывается начальная (максимальная) цена по выботу подрядчика (исполнителя) при размещении заказа по конкурсу или корпоративному заказу.

Данное приложение является накопительным документом отражающим экономное расходование средств при заключении договоров на строительство объектов.

Приложение N 5
к Методике, утвержденной
распоряжением ОАО "РЖД"
от 03.03.2010 г. N 434р

Расчет начальной (максимальной) цены договора при размещении
заказа на поставку оборудования по объекту
капитального строительства:__________

N 
п.п	N     
локальных
смет и  
расчетов 	Наименование       
оборудования       	Кол-во	Сметная стоимость 
оборудования в    
текущем уровне цен
утвержденного     
сводного сметного 
расчета           	Начальная     
(максимальная)
цена          
оборудования в
текущем       
уровне цен (по
коммерческому 
предложению)  
на момент     
проведения    
торгов        	
1. 	2.    	3.         	4.  	5.         	6.     	
1. 		перечень оборудования   
по номенклатуре         
предусмотренной         
утвержденной            
документацией в разрезе 
объектов строительства  		сметная цена      
(отпускная+       
транспортные      
расходы+          
ЗСР и др. затраты,
предусмотренные   
сметой)           	

отпускная цена	
		Итого :                 				
2. 		Транспортные расходы    		х         		
3. 		Заготовительно-складские
расходы                 		х         		
4. 		Прогнозный коэффициент  
инфляции (раздел 2      
приложения N 1)         			
х     	
5. 		Всего:                  				
6. 		НДС 18%            				
7. 		Договорная цена по      
итогам конкурсных       
торгов                  		х         		
8. 		НДС 18%            		х         		
9. 		Снижение стоимости по   
отношению к утвержденной
в сводном сметном       
расчете                 		х         		

Заказчик:
Примечание:
1. Начальная цена (п.5 графа 6) не может быть, больше утвержденной сметной стоимости оборудования (п.5 графа 5).
2. Уровень транспортных и заготовительно-складские расходов и порядок их оплаты устанавливаются в условиях конкурса и не могут превышать утвержденные сметные расходы.
3. Данные строк 7,8,9 графы 6 заполняются по итогам конкурсных торгов.
4. Данное приложение представляется в конкурсную комиссию при размещении заказа по выбору исполнителя.

Приложение N 6
к Методике, утвержденной
распоряжением ОАО "РЖД"
от 03.03.2010 г. N 434р

Расчет начальной (максимальней) цены договора при размещении
заказа на выполнение подрядных работ по объекту:_________

N 
п.п	N     
локальных
смет и  
расчетов 	Наименование     
работ и затрат по  
главам сводного   
сметного расчета   	Стоимость работ по    
утвержденному ССР,    
распор. N _____ от ____ 	Начальная    
(максимальная)  
цена подрядных  
работ на период 
производства  
работ с учетом  
прогнозных    
коэффициентов  
инфляции     	
			в ценах на
01.01.2000	в текущих    
ценах с инд. 
пер.__кв.200_	
всего	
2010	
и т.д.	
1. 	2.    	3.       	4.   	5.      	6. 	7. 	8.  	
		Заполняется по видам 
работ (локальным   
сметам) по главам  
сводного сметного  
расчета с итогами по 
каждой главе    						
1.		Глава 1       						
	1-1-1.   	вид работ            						
		Итого        						
		Глава 2       						
		и т.д.       						
		Всего        						
2.		Коэффициенты инфляции 	х     					
3.		Начальная (макс) цена 						
								
4.		Коэффициент снижения  						
5.		Договорная цена по    
итогам конкурсных     
торгов                						

Заказчик:
Примечание.
1. Начальная цена не может быть больше утвержденной сметной стоимости подрядных работ в сводном сметном расчете.
2. Коэффициент снижения устанавливается в условиях конкурса при проведении конкурсных торгов или нормативными документами ОАО "РЖД"
3. Данные строк 4,5 графы 6 заполняются по итогам конкурсных торгов.
4. Данное приложение представляется в конкурсную комиссию при размещении заказа по выбору исполнителя.

Приложение N 7
к Методике, утвержденной
распоряжением ОАО "РЖД"
от 03.03.2010 г. N 434р

Расчет начальной (максимальной) цены договора при размещении
единого заказа на поставку оборудования,
выполнение подрядных работ, оказание услуг по объекту:______

N 
п.п	N     
локальных
смет и  
расчетов 	Наименование     
работ и затрат по  
главам сводного   
сметного расчета   	Стоимость работ по    
утвержденному ССР,    
распор. N _____ от ____ 	Начальная    
(максимальная)  
цена подрядных  
работ на период 
производства  
работ с учетом  
прогнозных    
коэффициентов  
инфляции     	
			в ценах на
01.01.2000	в текущих    
ценах с инд. 
пер.__кв.200_	
всего	
2010	
и т.д.	
1. 	2.    	3.       	4.   	5.      	6. 	7. 	8.  	
1. 		СМР            						
1.1		Глава 1               						
	1-1-1.  	вид работ             						
		Итого                 						
		Глава 2               						
		и т.д.                						
		Итого                 						
		Прогнозные коэф-ты    
инфляции              						
		Итого по п.1 2.       						
2. 		Стоимость оборудования						
		пообъектно            						
		Итого                 						
		Прогнозные коэф-ты    
инфляции              						
		Итого по п.2          						
3. 		Другие работы         
(услуги),поручаемые   
заказчиком            						
		по видам работ        						
		Итого по п.3 4.       						
		Начальная (макс) цена 	х    					
5. 		Коэффициент снижения  	х    					
6. 		Договорная цена по    
итогам конкурсных     
торгов                						

Заказчик:
Примечание.
1. Начальная цена не может быть больше утвержденной сметной стоимости подрядных работ в сводном сметном расчете.
2. Коэффициент снижения устанавливается в условиях конкурса при проведении конкурсных торгов или нормативными документами ОАО "РЖД"
3. Данные строк 5,6 графы 6 заполняются по итогам конкурсных торгов.
4. Данное приложение представляется в конкурсную комиссию при размещении заказа по выбору исполнителя.

Приложение N 8
к Методике, утвержденной
распоряжением ОАО "РЖД"
от 03.03.2010 г. N 434р

(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"
от 23.03.2010 N 578р)

Порядок
определения прогнозной стоимости строительства и начальной (максимальной) цены договора при размещении заказа на выполнение подрядных работ по переходящим объектам, по которым проведены конкурсные процедуры и заключены договора

1. Текущая стоимость строительства по переходящим объектам корректируется с применением прогнозных коэффициентов инфляции на период строительства 2010-2012 годы согласно таблице N 1 приложения N 1.
Для определения прогнозной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов в случае, если их текущая стоимость определена в уровне цен до 2-3 квартала 2008 г., прогнозные коэффициенты Инфляции запрашиваются в индивидуальном порядке.
2. По договорам подряда, заключенным по корпоративному заказу и результатам конкурсных торгов (в т.ч. твердой договорной ценой), стоимость (остаточная) работ переходящих на 2010 и последующие годы корректируется с учетом прогнозных коэффициентов инфляции, установленных для определения начальной (максимальной) цены договора на выполнение подрядных работ на 2010-2012 годы согласно таблице N 2 приложения N 1 если корректировка с учетом прогнозных коэффициентов предусмотрена условиями договора.
(Пункт дан в ред. Распоряжения ОАО "РЖД" от 23.03.2010 N 578р)
3. По договорам подряда, заключенным по корпоративному заказу и результатам конкурсных торгов (в т.ч. твердой договорной ценой) по объектам жилищного и коммунального хозяйства, стоимость которых определена с применением территориальных сметных нормативов и индексов пересчета, публикуемых региональными центрами ценообразования в строительстве, прогнозные коэффициенты инфляции не применяются.
К утвержденной текущей стоимости работ, определенной с индексами пересчета:
2008 года, применяется коэффициент снижения 0,883;
2009 года, применяется коэффициент снижения 0,82.
4. Начальная (максимальная) цена договора при размещении заказа на выполнение строительных, монтажных и ремонтных работ по вновь начинаемым объектам жилищного и коммунального хозяйства, стоимость которых в базисных ценах на 1 января 2000 г. учтена с применением территориальных сметных нормативов, определяется с применением к элементам прямых затрат:

- к заработной плате          - индексы пересчета ОАО "РЖД"
  и эксплуатации механизмов     по заработной плате и
                                эксплуатации механизмов;

- к Стоимости материалов      - индексы по материальным ресурсам,
                                публикуемые региональными центрами
                                ценообразования в строительстве.